«Согласовано»
	
«Утверждаю»	

______________/_______________/	
	
______________/_______________/	

«___»________________2012г.	
«___»________________2012г.	

	

Объект:Капитальный ремонт кровли здания жилого дома по ул. Алданской дом№4, г.Калининград.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли	
Сметная стоимость:	1 581.959	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.952	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	220.810	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	12.31	164.91	119.07	45.84	2 030.04	1 465.75	564.29	12.14	4.17	20 147	17 794	2 353	
									1	1				
	Накладные расходы		110%			1 612.33				110%	19 573			
	Сметная прибыль		70%			1 026.03				70%	12 456			
	Всего с НР и СП					4 668.39					52 176			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	6.12	2 603.14	1 221.06	143.55	15 931.22	7 472.89	878.53	12.14	4.69	132 968	90 721	4 120	
				1 238.53	15.51		7 579.80	94.92	5.03	12.13		38 126	1 151	
	Накладные расходы		83%			6 281.28				83%	76 254			
	Сметная прибыль		65%			4 919.08				65%	59 717			
	Всего с НР и СП					27 131.58					268 939			
	
3.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	12.31	180.53	29.88	5.06	2 222.32	367.79	62.32	12.14	6.56	15 286	4 465	409	
				145.59			1 792.21		5.81	1		10 413		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			441.35				120%	5 358			
	Сметная прибыль		65%			239.06				65%	2 902			
	Всего с НР и СП					2 902.73					23 546			
	
4.	ФЕР 12-01-002-09 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	12.31	10 000.20	155.23	53.13	123 102.49	1 910.84	653.97	12.89	5.37	415 069	24 631	3 512	
				9 791.85	3.38		120 537.67	41.55	3.21	13.56		386 926	563	
	Добавл.ресурсы:  1-1038;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 150401;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1961;  ССЦ 101-1962;  ССЦ 101-2278	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			2 342.87				120%	30 233			
	Сметная прибыль		65%			1 269.05				65%	16 376			
	Всего с НР и СП					126 714.41					461 678			
	
5.	ТЕР 12-01-004-01 
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	3.91	6 995.33	292.34	264.75	27 351.75	1 143.06	1 035.17	12.14	3.12	88 096	13 877	3 230	
				6 438.24	4.53		25 173.52	17.69	2.82	12.14		70 989	215	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1746:[ М-(1693.44=6.72*252) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			1 392.90				120%	16 910			
	Сметная прибыль		65%			754.49				65%	9 160			
	Всего с НР и СП					29 499.14					114 166			
	
6.	Цена поставщика. 
Рубероид наплавляемый нижний слой Стеклокром ЭПП 4,0 (полиэстр), м2	492.66	26.49			13 048.45			1	1	54 803			
				26.49			13 048.45		4.2	1		54 803		
	Объем: 391*2.52/2													
	Поправки: М: =108*1.03/4.2	
	
7.	Цена поставщика. 
Рубероид наплавляемый верхний слой Эластобит  ЭКП 4,5 (полиэстр), м2	492.66	28.45			14 015.00			1	1	58 863			
				28.45			14 015.00		4.2	1		58 863		
	Объем: 391*2.52/2													
	Поправки: М: =116*1.03/4.2	
	
8.	ТЕР 20-02-012-01 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	12	42.53	30.39	4.18	510.35	364.73	50.10	12.14	4.9	4 957	4 428	245	
				7.96			95.52		2.97	1		284		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9150	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			466.85				128%	5 668			
	Сметная прибыль		83%			302.73				83%	3 675			
	Всего с НР и СП					1 279.93					14 300			
	
9.	Цена поставщика. 
Дефлектор кровельный д100мм, шт.	12	63.76			765.14			1	1	3 214			
				63.76			765.14		4.2	1		3 214		
	Поправки: М: =260*1.03/4.2	
	
10.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.88	2 956.30	374.76	6.66	5 557.84	704.55	12.52	12.14	6.53	21 318	8 553	82	
				2 574.88	1.03		4 840.77	1.94	2.62	12.17		12 683	24	
	Накладные расходы		83%			586.39				83%	7 119			
	Сметная прибыль		65%			459.22				65%	5 575			
	Всего с НР и СП					6 603.45					34 012			
	
11.	ТЕРр 58-20-5 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м	1.3898	1 918.22	590.15	4.67	2 665.94	820.19	6.49	12.14	6.53	14 782	9 957	42	
				1 323.40	0.65		1 839.26	0.90	2.6	12.05		4 782	11	
	Накладные расходы		83%			681.50				83%	8 273			
	Сметная прибыль		65%			533.71				65%	6 479			
	Всего с НР и СП					3 881.15					29 535			
	
12.	ТЕРр 65-6-23 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.06	29 964.93	4 732.18	73.66	1 797.90	283.93	4.42	12.14	6.54	8 986	3 447	29	
				25 159.09	7.11		1 509.55	0.43	3.65	12.12		5 510	5	
	Накладные расходы		103%			292.89				103%	3 556			
	Сметная прибыль		60%			170.62				60%	2 071			
	Всего с НР и СП					2 261.41					14 613			
	
13.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	2.518	6 350.32	635.76	12.96	15 990.11	1 600.84	32.63	12.14	6.52	56 974	19 434	213	
				5 701.60	2.33		14 356.63	5.87	2.6	12.1		37 327	71	
	Накладные расходы		83%			1 333.57				83%	16 189			
	Сметная прибыль		65%			1 044.36				65%	12 678			
	Всего с НР и СП					18 368.04					85 841			
	
14.	ТЕР 20-02-009-03 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм, 1 зонт	6	14.60	7.16	2.43	87.60	42.99	14.55	12.15	5.59	727	522	81	
				5.01			30.06		4.09	1		123		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			55.03				128%	668			
	Сметная прибыль		83%			35.68				83%	433			
	Всего с НР и СП					178.31					1 828			
	
15.	Цена поставщика. 
Зонт Вентиляционный, шт.	6	220.71			1 324.29			1	1	5 562			
				220.71			1 324.29		4.2	1		5 562		
	Поправки: М: =900*1.03/4.2	
	
16.	ТЕРр 61-10-1 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(выходы на кровлю), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.25	3 222.10	1 873.08	1.32	805.53	468.27	0.33	12.14	3.89	7 101	5 685	1	
				1 347.70			336.93		4.2	1		1 415		
	Накладные расходы		79%			369.93				79%	4 491			
	Сметная прибыль		50%			234.14				50%	2 843			
	Всего с НР и СП					1 409.60					14 435			
	
17.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0348	1 143.95	891.55	252.40	39.81	31.03	8.78	12.14	6.48	434	377	57	
					100.00			3.48	1	12.13			42	
	Накладные расходы		110%			37.96				110%	461			
	Сметная прибыль		70%			24.16				70%	293			
	Всего с НР и СП					101.93					1 188			
	
18.	ТЕР 10-01-039-01 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0348	49 279.20	1 168.04	1 744.34	1 714.92	40.65	60.70	12.88	6.84	12 782	524	415	
				46 366.82	214.24		1 613.57	7.46	7.34	13.56		11 844	101	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		118%			56.77				118%	738			
	Сметная прибыль		63%			30.31				63%	394			
	Всего с НР и СП					1 802.00					13 913			
	
19.	ФЕР 10-01-039-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0348	3 725.84	957.29	1 250.29	129.66	33.31	43.51	12.88	6.84	1 115	429	298	
				1 518.26	153.23		52.84	5.33	7.34	13.56		388	72	
	Вычт.ресурсы:  ССЦ 101-0195:[ М-(17.80=8475.00*0.0021) ];  ССЦ 101-1591:[ М-(40.00=1695.00*0.0236) ];  ССЦ 101-1742:[ М-(508.19=5.71*89) ];  ССЦ 101-1789:[ М-(384.75=10.26*37.5) ];  ССЦ 101-1805:[ М-(49.47=11978.00*0.00413) ];  ССЦ 102-0053:[ М-(88.00=1100.00*0.08) ];  ССЦ 203-0223:[ М-(20700.00=207.00*100) ];  ССЦ 402-0087:[ М-(48.09=458.00*0.105) ];  ССЦ 405-0219:[ М-(11.68=729.98*0.016) ]	
	Добавл.ресурсы:  1-1036;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 121011;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-8052	
	Накладные расходы		118%			45.60				118%	591			
	Сметная прибыль		63%			24.34				63%	316			
	Всего с НР и СП					199.60					2 022			
	
20.	Цена поставщика. 
Дверь стальная, м2	3.48	306.55			1 066.79			1	1	4 481			
				306.55			1 066.79		4.2	1		4 481		
	Поправки: М: =1250*1.03/4.2	
	
21.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, шт.	20	88.07	12.17		1 761.40	243.40		12.14	1	6 978	2 955		
				75.90			1 518.00		2.65	1		4 023		
	Накладные расходы		103%			250.70				103%	3 044			
	Сметная прибыль		60%			146.04				60%	1 773			
	Всего с НР и СП					2 158.14					11 795			
	
	Раздел 1.  Козырьки над балконами	
	
22.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.4146	164.91	119.07	45.84	68.37	49.37	19.01	12.14	4.17	679	599	79	
									1	1				
	Накладные расходы		110%			54.31				110%	659			
	Сметная прибыль		70%			34.56				70%	419			
	Всего с НР и СП					157.24					1 757			
	
23.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.15	2 603.14	1 221.06	143.55	390.47	183.16	21.53	12.14	4.69	3 259	2 224	101	
				1 238.53	15.51		185.78	2.33	5.03	12.13		934	28	
	Накладные расходы		83%			153.96				83%	1 869			
	Сметная прибыль		65%			120.57				65%	1 464			
	Всего с НР и СП					665.00					6 592			
	
24.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.4146	180.53	29.88	5.06	74.85	12.39	2.10	12.14	6.56	515	150	14	
				145.59			60.36		5.81	1		351		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			14.87				120%	180			
	Сметная прибыль		65%			8.05				65%	98			
	Всего с НР и СП					97.77					793			
	
25.	ФЕР 12-01-002-09 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	0.4146	10 000.20	155.23	53.13	4 146.08	64.36	22.03	12.89	5.37	13 979	830	118	
				9 791.85	3.38		4 059.70	1.40	3.21	13.56		13 032	19	
	Добавл.ресурсы:  1-1038;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 150401;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1961;  ССЦ 101-1962;  ССЦ 101-2278	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			78.91				120%	1 019			
	Сметная прибыль		65%			42.74				65%	552			
	Всего с НР и СП					4 267.74					15 550			
	
26.	ТЕР 12-01-004-01 
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.4146	6 995.33	292.34	264.75	2 900.26	121.20	109.77	12.14	3.12	9 341	1 471	342	
				6 438.24	4.53		2 669.29	1.88	2.82	12.14		7 527	23	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1746:[ М-(1693.44=6.72*252) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			147.70				120%	1 793			
	Сметная прибыль		65%			80.00				65%	971			
	Всего с НР и СП					3 127.96					12 105			
	
27.	Цена поставщика. 
Рубероид наплавляемый нижний слой Стеклокром ЭПП 4,0 (полиэстр), м2	52.2396	26.49			1 383.60			1	1	5 811			
				26.49			1 383.60		4.2	1		5 811		
	Объем: 41.46*2.52/2													
	Поправки: М: =108*1.03/4.2	
	
28.	Цена поставщика. 
Рубероид наплавляемый верхний слой Эластобит  ЭКП 4,5 (полиэстр), м2	52.2396	28.45			1 486.09			1	1	6 242			
				28.45			1 486.09		4.2	1		6 242		
	Объем: 41.46*2.52/2													
	Поправки: М: =116*1.03/4.2	
	
29.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.5346	2 956.30	374.76	6.66	1 580.44	200.35	3.56	12.14	6.53	6 062	2 432	23	
				2 574.88	1.03		1 376.53	0.55	2.62	12.17		3 607	7	
	Накладные расходы		83%			166.75				83%	2 024			
	Сметная прибыль		65%			130.59				65%	1 585			
	Всего с НР и СП					1 877.77					9 672			
	
30.	ТЕРр 58-20-5 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м	0.4146	1 918.22	590.15	4.67	795.29	244.68	1.94	12.14	6.53	4 410	2 970	13	
				1 323.40	0.65		548.68	0.27	2.6	12.05		1 427	3	
	Накладные расходы		83%			203.31				83%	2 468			
	Сметная прибыль		65%			159.22				65%	1 932			
	Всего с НР и СП					1 157.82					8 810			
	
31.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	13.2	7.57		7.57	99.98		99.98		5.21	521		521	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
32.	Х403-1-5 
Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) на растояние 5км. классгруза1),т, т	13.2	27.35		27.35	361.01		361.01		5.21	1 881		1 881	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	13 286.44	875.51	640.93			52 700	10 676	3 092	
			11 770.03	6.43				38 931	80	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 286.44	875.51	640.93			52 700	10 676	3 092	
			11 770.03	6.43				38 931	80	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 22; %=83 - по стр. 23, 29, 30; %=120 - по стр. 24-26)	819.80					10 012			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 22; %=65 - по стр. 23-26, 29, 30)	575.73					7 021			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 681.97					69 733			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	14 681.97					69 733			
	НДС	2 642.75					12 552			
	Всего с НДС	17 324.72					82 285			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	819.80					10 012			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	575.73					7 021			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	245 204.99	17 869.73	4 069.24			987 343	218 475	18 179	
			223 266.03	186.00				750 687	2 335	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	241 047.74	16 934.68	4 000.17			965 695	207 123	17 824	
			220 112.90	185.57				740 747	2 330	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 17, 22; %=83 - по стр. 2, 10, 11, 13, 23, 29, 30; %=120 - по стр. 3-5, 24-26; %=79 - по стр. 16; %=118 - по стр. 18, 19)	16 002.24					196 203			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 17, 22; %=65 - по стр. 2-5, 10, 11, 13, 23-26, 29, 30; %=50 - по стр. 16; %=63 - по стр. 18, 19)	11 133.67					136 209			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	268 183.65					1 298 107			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 157.25	935.05	69.07			21 648	11 352	355	
			3 153.13	0.43				9 940	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 8, 14; %=103 - по стр. 12, 21)	1 065.47					12 935			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 8, 14; %=60 - по стр. 12, 21)	655.06					7 953			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 877.78					42 536			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	274 061.43					1 340 643			
	НДС	49 331.06					241 316			
	Всего с НДС	323 392.49					1 581 959			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 067.71					209 138			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 788.73					144 162			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)