«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 543 840	руб.	Смета на сумму:	1 543 840	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» КР МКД 	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
_________________________ /С.Б. Русович /	________________________ / Е.В. Шулепко /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение дополнительных работ по усилению несущих конструкций
 многоквартирного дома № 1-1а по ул.Розы Люксембург г.Калининграда  (во исполнение решения суда)	
Сметная стоимость:	1 543.840	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.204	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	307.122	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усиление фундамента участка с подвалом	
	
1.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	4.02	303.52	75.11	228.41	1 220.15	301.94	918.21	15.07	3.97	8 196	4 550	3 645	
					20.91			84.06	1	15.06			1 266	
	Объем: (14.1+6+6+14.1)*0.1													
	Накладные расходы		99%			382.14				84%	4 885			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			231.60				48%	2 792			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 833.89					15 873			
	
2.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	9.648	48.13	4.41	36.66	464.32	42.55	353.70	15.07	7.27	4 239	641	2 571	
									1	1				
	Объем: 4.02*2.4													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			42.55				100%	641			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			25.53				60%	385			
	
3.	ТССЦпг 03-01-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	9.648	17.33		17.33	167.20		167.20	1	7.87	1 316		1 316	
									1	1				
	
4.	ТЕРр 51-3-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта	0.0804	5 332.86	5 125.32	2.03	428.76	412.08	0.16	15.07	8.47	6 271	6 210	1	
				205.51			16.52		3.59	1		59		
	Объем: (14.1+6+6+14.1)*0.20													
	Накладные расходы		75%			309.06				64%	3 974			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			185.44				36%	2 236			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					923.26					12 481			
	
5.	ТССЦпг 03-01-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	12.864	17.33		17.33	222.93		222.93	1	7.87	1 754		1 754	
									1	1				
	Объем: 8.04*1.6													
	
6.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	4.02	218.98	43.11	49.74	880.30	173.31	199.95	15.08	4.37	5 865	2 613	874	
				126.13	5.06		507.04	20.32	4.69	15.07		2 378	306	
	Объем: (14.1+6+6+14.1)*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			214.93				94%	2 744			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			123.92				51%	1 489			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 219.15					10 098			
	
7.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	4.02	475.82	48.38	92.13	1 912.81	194.50	370.36	15.08	4.23	10 417	2 933	1 567	
				335.31	9.27		1 347.95	37.27	4.39	15.07		5 917	562	
	Объем: (14.1+6+6+14.1)*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			257.26				94%	3 285			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			148.33				51%	1 782			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 318.41					15 485			
	
8.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	4.5	737.79	44.95	0.45	3 320.04	202.26	2.03	15.07	5.6	16 769	3 048	11	
				692.39			3 115.76		4.4	1		13 709		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			224.51				94%	2 865			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			129.45				51%	1 554			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 674.00					21 189			
	
9.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.838	502.06	163.97	60.72	420.73	137.41	50.88	15.07	7.5	3 687	2 071	382	
				277.37	3.63		232.44	3.04	5.31	15.03		1 234	46	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			133.43				80%	1 694			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			77.25				44%	931			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					631.41					6 312			
	
10.	ТССЦ 204-0066 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм, т	0.838	10 623.00			8 902.07					37 979			
				10 623.00			8 902.07		45 320.85			37 979		
	
11.	ТЕР 06-01-001-15 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство фундаментных плит бетонных плоских, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.11	5 753.99	1 458.96	2 976.11	632.94	160.49	327.37	15.07	8.46	5 824	2 419	2 770	
				1 318.92	438.86		145.08	48.27	4.38	15.05		635	727	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			198.32				80%	2 517			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			114.82				44%	1 384			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					946.08					9 725			
	
12.	ТССЦ 401-0027 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250), м3	11	695.00			7 645.00					37 598			
				695.00			7 645.00		3 418			37 598		
	
13.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, в подвальной части здания, 100 м3 грунта	0.48735	1 466.39	1 466.39		714.64	714.64		15.07	1	10 770	10 770		
									1	1				
	Объем: (3.75+14.16+3.75)*1.5*1.5													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			514.54				61%	6 570			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			271.56				31%	3 339			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 500.74					20 678			
	
14.	ТЕР 08-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания	3.249	199.71	22.93	46.80	648.86	74.50	152.05	15.07	4.14	3 775	1 123	630	
				129.98	4.24		422.31	13.77	4.79	15.09		2 023	208	
	Объем: (3.75+14.16+3.75)*0.1*1.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			97.10				93%	1 238			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			60.02				54%	719			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					805.98					5 732			
	
15.	ТЕР 46-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками, 1 т	0.312	11 906.59	1 597.78	730.72	3 714.86	498.51	227.98	15.08	4.77	19 841	7 517	1 087	
				9 578.09	48.87		2 988.36	15.25	3.76	15.06		11 236	230	
	Накладные расходы		99%			508.62				84%	6 507			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			308.26				48%	3 719			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 531.74					30 067			
	
16.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12636	358.47	69.00	13.01	45.30	8.72	1.64	15.08	2.66	235	131	4	
				276.46	0.14		34.93	0.02	2.83	15.36		99		
	Объем: 40.5*0.312													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			7.08				69%	90			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.24				48%	63			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.62					388			
	
17.	ТЕР 46-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов, 1 м3	7	1 711.50	207.27	62.02	11 980.50	1 450.89	434.14	15.07	7.54	67 640	21 865	3 273	
				1 442.21	3.47		10 095.47	24.29	4.21	15.07		42 502	366	
	Накладные расходы		99%			1 460.43				84%	18 674			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			885.11				48%	10 671			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 326.04					96 985			
	
18.	ТССЦ 204-0069 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Арматурные сетки сварные, т	0.228	11 060.21			2 521.73					9 993			
				11 060.21			2 521.73		43 830.06			9 993		
	
19.	ТССЦ 204-0022 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т	0.0302	6 573.50			198.52					1 072			
				6 573.50			198.52		35 486.08			1 072		
	
20.	ТЕР 46-03-002-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий	0.15	2 003.83	237.89	1 015.94	300.57	35.68	152.39	15.07	8.47	2 312	538	1 291	
				750.00	284.24		112.50	42.64	4.3	15.1		484	644	
	Накладные расходы		99%			77.54				84%	993			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.99				48%	567			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.10					3 872			
	
21.	ТЕР 46-03-002-17 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01, 100 отверстий	0.15	10 784.80	491.40	5 418.40	1 617.72	73.71	812.76	15.06	8.46	11 130	1 110	6 876	
				4 875.00	1 847.30		731.25	277.10	4.3	15.1		3 144	4 184	
	Начисления: Н3= 130, Н4= 130, Н5= 130, Н48= 130	
	Накладные расходы		99%			347.30				84%	4 447			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			210.49				48%	2 541			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 175.51					18 118			
	
22.	ТЕР 46-03-002-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий	0.3	2 003.83	237.89	1 015.94	601.15	71.37	304.78	15.07	8.47	4 625	1 076	2 582	
				750.00	284.24		225.00	85.27	4.3	15.1		968	1 288	
	Накладные расходы		99%			155.07				84%	1 986			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			93.98				48%	1 135			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					850.21					7 745			
	
23.	ТЕР 46-03-002-17 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01, 100 отверстий	0.3	1 493.28	68.04	750.24	447.98	20.41	225.07	15.06	8.46	3 082	307	1 904	
				675.00	255.78		202.50	76.73	4.3	15.1		871	1 159	
	Начисления: Н3= 18, Н4= 18, Н5= 18, Н48= 18	
	Накладные расходы		99%			96.17				84%	1 231			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			58.28				48%	704			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					602.43					5 017			
	
24.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.3249	3 001.78	246.00	111.59	975.28	79.92	36.25	15.08	4.08	4 128	1 205	148	
				2 644.20			859.10		3.23	1		2 775		
	Объем: (3.75+14.16+3.75)*1.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			87.91				93%	1 121			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			54.35				54%	651			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 117.54					5 899			
	
25.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.38486	810.13	810.13		311.79	311.79		15.07	1	4 699	4 699		
									1	1				
	Объем: 48.735-3.249-7													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			224.49				61%	2 866			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			118.48				31%	1 457			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					654.76					9 022			
	
26.	ТССЦ 408-0121 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3	42.3346	110.43			4 675.01					22 615			
				110.43			4 675.01		534.2			22 615		
	Объем: 0.38486*110													
	
	Усиление фундамента участка без подвала	
	
27.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.38988	1 466.39	1 466.39		571.72	571.72		15.07	1	8 616	8 616		
									1	1				
	Объем: (3.75+14.16+3.75)*1.2*1.5													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			411.64				61%	5 256			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			217.25				31%	2 671			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 200.61					16 543			
	
28.	ТЕР 08-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания	3.249	187.36	19.94	37.44	608.73	64.79	121.64	15.07	4.14	3 503	976	504	
				129.98	3.39		422.31	11.01	4.79	15.09		2 023	166	
	Объем: (3.75+14.16+3.75)*0.1*1.5													
	Накладные расходы		110%			83.38				93%	1 062			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			51.54				54%	617			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					743.65					5 182			
	
29.	ТЕР 46-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными полосами, 1 т	0.11	4 571.34	1 597.78	730.72	502.85	175.76	80.38	15.08	4.77	3 961	2 650	383	
				2 242.84	48.87		246.71	5.38	3.76	15.06		928	81	
	Объем: 0.0754+0.0346													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1807:[ М-(7335.25=7191.42*1.02) ]	
	Накладные расходы		99%			179.33				84%	2 294			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			108.68				48%	1 311			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.86					7 566			
	
30.	ТССЦ 101-0978 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3пс, т	0.0754	6 107.07			460.47					2 042			
				6 107.07			460.47		27 081.91			2 042		
	
31.	ТССЦ 204-0022 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т	0.0346	6 573.50			227.44					1 228			
				6 573.50			227.44		35 486.08			1 228		
	
32.	ТЕР 46-03-002-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий	0.2	2 003.83	237.89	1 015.94	400.77	47.58	203.19	15.07	8.47	3 083	717	1 721	
				750.00	284.24		150.00	56.85	4.3	15.1		645	858	
	Накладные расходы		99%			103.39				84%	1 323			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			62.66				48%	756			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					566.81					5 162			
	
33.	ТЕР 46-03-002-17 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01, 100 отверстий	0.2	2 488.80	113.40	1 250.40	497.76	22.68	250.08	15.06	8.46	3 425	342	2 116	
				1 125.00	426.30		225.00	85.26	4.3	15.1		968	1 287	
	Начисления: Н3= 30, Н4= 30, Н5= 30, Н48= 30	
	Накладные расходы		99%			106.86				84%	1 368			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64.76				48%	782			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					669.38					5 575			
	
34.	ТЕР 46-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов, 1 м3	8.5	1 711.50	207.27	62.02	14 547.75	1 761.80	527.17	15.07	7.54	82 135	26 550	3 975	
				1 442.21	3.47		12 258.79	29.50	4.21	15.07		51 609	444	
	Накладные расходы		99%			1 773.39				84%	22 675			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 074.78				48%	12 957			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 395.92					117 767			
	
35.	ТССЦ 204-0022 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т	0.0266	6 573.50			174.86					944			
				6 573.50			174.86		35 486.08			944		
	
36.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.23826	3 001.78	246.00	111.59	715.21	58.61	26.59	15.08	4.08	3 027	884	108	
				2 644.20			630.01		3.23	1		2 035		
	Объем: (3.75+14.16+3.75)*1.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			64.47				93%	822			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			39.85				54%	477			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					819.54					4 326			
	
37.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.27239	810.13	810.13		220.67	220.67		15.07	1	3 326	3 326		
									1	1				
	Объем: 38.988-3.249-8.5													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			158.88				61%	2 029			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			83.85				31%	1 031			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					463.41					6 386			
	
38.	ТССЦ 408-0121 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3	29.9629	110.43			3 308.80					16 006			
				110.43			3 308.80		534.2			16 006		
	Объем: 0.27239*110													
	
	полы 1 этажа	
	
39.	ТЕРр 57-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса	0.56	31.22	31.22		17.48	17.48		15.07	1	263	263		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			13.98				68%	179			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			11.89				54%	142			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.35					584			
	
40.	ТЕРр 57-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания	0.44	144.40	144.40		63.54	63.54		15.07	1	957	957		
									1	1				
	Объем: 13.1+8.8+8.9+13.2													
	Накладные расходы		80%			50.83				68%	651			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			43.21				54%	517			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.58					2 125			
	
41.	ТЕРр 57-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания	0.44	63.51	63.51		27.94	27.94		15.07	1	421	421		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			22.35				68%	286			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			19.00				54%	227			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.29					935			
	
42.	ТЕР 11-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной, 1 м3 изоляции	8.8	200.44	34.97	50.34	1 763.86	307.73	442.99	15.07	6.04	12 065	4 637	2 676	
				115.13	8.04		1 013.14	70.75	4.69	16.16		4 752	1 143	
	Объем: 44*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			420.11				94%	5 433			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			242.23				51%	2 948			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 426.20					20 446			
	
43.	ТЕР 11-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 пола	0.44	5 772.91	558.27	95.18	2 540.08	245.64	41.88	15.07	7.77	11 033	3 702	325	
				5 119.47	2.36		2 252.57	1.04	3.11	15.1		7 005	16	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			273.81				94%	3 495			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			157.88				51%	1 896			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 971.77					16 424			
	
44.	ТЕР 11-01-033-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм, 100 м2 покрытия	0.44	11 321.29	758.34	166.97	4 981.37	333.67	73.46	15.07	8.41	22 708	5 028	618	
				10 395.99	11.24		4 574.24	4.94	3.73	17.61		17 062	87	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			375.86				94%	4 808			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			216.71				51%	2 609			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 573.94					30 125			
	
45.	ТЕР 11-01-036-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>, 100 м2 покрытия	0.44	10 239.64	516.08	93.11	4 505.44	227.07	40.97	15.07	8.56	16 061	3 422	351	
				9 630.46	6.78		4 237.40	2.98	2.9	17.61		12 288	53	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			255.36				94%	3 267			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			147.23				51%	1 772			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 908.03					21 100			
	
46.	ТЕР 11-01-040-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, 100 м плинтуса	0.56	2 114.14	128.53	4.56	1 183.92	71.98	2.55	15.08	8.49	3 171	1 085	22	
				1 981.05			1 109.39		1.86	1		2 063		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			79.90				94%	1 020			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			46.07				51%	553			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 309.89					4 744			
	
	усиление стен	
	
47.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.5	1 213.62	458.23	8.86	1 820.43	687.34	13.29	15.08	8.49	16 043	10 365	113	
				746.53			1 119.80		4.97	1		5 565		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			756.07				93%	9 639			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			467.39				54%	5 597			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 043.90					31 280			
	
48.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.5	4 688.98	197.81	4 246.36	7 033.47	296.72	6 369.54	15.08	3.66	29 076	4 474	23 313	
				244.81	143.10		367.22	214.65	3.51	14.12		1 289	3 031	
	Накладные расходы		78%			398.87				66%	4 953			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			255.69				40%	3 002			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 688.02					37 031			
	
49.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1.3	188.95	188.95		245.64	245.64		15.07	1	3 702	3 702		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			243.18				84%	3 110			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			147.38				48%	1 777			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					636.21					8 589			
	
50.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	7.5	1 615.27	301.17	30.24	12 114.53	2 258.78	226.80	15.07	6.92	71 814	34 040	1 569	
				1 283.86	5.99		9 628.95	44.93	3.76	16.32		36 205	733	
	Накладные расходы		86%			1 981.19				73%	25 384			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 612.60				56%	19 473			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 708.32					116 671			
	
51.	ТЕР 06-01-031-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной 100 мм, 100 м3 железобетона в деле	0.105	226 904.50	35 178.11	24 739.33	23 824.97	3 693.70	2 597.63	15.07	8.25	160 555	55 664	21 430	
				166 987.07	3 477.30		17 533.64	365.12	4.76	15.06		83 460	5 499	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 855.88				80%	48 930			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 232.35				44%	26 912			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29 913.20					236 397			
	
52.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.3	80.30	76.91	1.68	104.39	99.99	2.18	15.07	8.57	1 531	1 507	19	
				1.71	0.16		2.22	0.21	2.43	17.46		5	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			95.19				80%	1 209			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			47.09				37%	559			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					246.67					3 299			
	
53.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	16.9	15.82			267.36					874			
				15.82			267.36		51.69			874		
	Объем: (1.3)*0.013*1000													
	
54.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.3	2 074.12	832.23	83.91	2 696.36	1 081.90	109.09	15.07	9.43	22 617	16 304	1 029	
				1 157.98	39.06		1 505.37	50.78	3.51	13.35		5 284	678	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 076.05				80%	13 586			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			532.36				37%	6 283			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 304.77					42 486			
	
55.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.3	2 512.50	159.37	15.75	3 266.25	207.18	20.48	15.07	8.4	12 805	3 122	172	
				2 337.38			3 038.59		3.13	1		9 511		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			196.82				80%	2 498			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			97.37				37%	1 155			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 560.45					16 458			
	
56.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.28	2 956.30	374.76	6.66	827.76	104.93	1.86	15.07	8.64	3 515	1 581	16	
				2 574.88	1.03		720.97	0.29	2.66	17.66		1 918	5	
	Накладные расходы		83%			87.33				71%	1 126			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			68.39				52%	825			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					983.49					5 466			
	
57.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	7.167	48.13	4.41	36.66	344.93	31.61	262.74	15.07	7.27	3 148	476	1 910	
									1	1				
	Объем: 2.487+130*0.02*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			31.61				100%	476			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			18.97				60%	286			
	
58.	ТССЦпг 03-01-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	7.167	17.33		17.33	124.20		124.20	1	7.87	977		977	
									1	1				
	
	отмостка	
	
59.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	4.288	303.52	75.11	228.41	1 301.49	322.07	979.42	15.07	3.97	8 742	4 854	3 888	
					20.91			89.66	1	15.06			1 350	
	Объем: (14.16+7.28)*2*1*0.1													
	Накладные расходы		99%			407.61				84%	5 211			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			247.04				48%	2 978			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 956.14					16 931			
	
60.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	10.2912	48.13	4.41	36.66	495.27	45.38	377.28	15.07	7.27	4 521	684	2 743	
									1	1				
	Объем: 4.288*2.4													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			45.38				100%	684			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			27.23				60%	410			
	
61.	ТССЦпг 03-01-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	10.2912	17.33		17.33	178.35		178.35	1	7.87	1 404		1 404	
									1	1				
	
62.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	4.288	452.40	40.32	76.78	1 939.91	172.89	329.21	15.08	4.23	10 312	2 607	1 393	
				335.31	7.73		1 437.81	33.12	4.39	15.07		6 312	499	
	Объем: (14.16+7.28)*2*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			228.67				94%	2 920			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			131.85				51%	1 584			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 300.43					14 816			
	
63.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	4.288	730.22	37.46	0.38	3 131.19	160.61	1.61	15.07	5.6	15 493	2 420	9	
				692.39			2 968.97		4.4	1		13 063		
	Объем: (14.16+7.28)*2*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			178.28				94%	2 275			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			102.79				51%	1 234			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 412.26					19 002			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	152 008.32	18 592.08	18 364.43			870 936	280 202	105 470	
			114 860.57	1 794.50				482 375	26 920	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	150 011.12	18 472.54	16 678.03			853 577	278 401	92 795	
			114 860.57	1 794.50				482 375	26 920	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	28 381.26					130 351			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 15, 17, 20-23, 29, 32-34, 49, 59; %=64 - по стр. 4; %=94 - по стр. 6-8, 42-46, 62, 63; %=80 - по стр. 9, 11, 51, 52, 54, 55; %=61 - по стр. 13, 25, 27, 37; %=93 - по стр. 14, 24, 28, 36, 47; %=69 - по стр. 16; %=68 - по стр. 39-41; %=66 - по стр. 48; %=73 - по стр. 50; %=71 - по стр. 56)	19 174.59					244 497			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15-17, 20-23, 29, 32-34, 49, 59; %=36 - по стр. 4; %=51 - по стр. 6-8, 42-46, 62, 63; %=44 - по стр. 9, 11, 51; %=31 - по стр. 13, 25, 27, 37; %=54 - по стр. 14, 24, 28, 36, 39-41, 47; %=40 - по стр. 48; %=56 - по стр. 50; %=37 - по стр. 52, 54, 55; %=52 - по стр. 56)	11 653.47					140 378			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	180 839.18					1 238 452			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 997.20	119.54	1 686.40			17 359	1 801	12 675	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2, 57, 60)	119.54					1 801			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 57, 60)	71.73					1 081			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 997.20					17 359			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	182 836.38					1 255 811			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 912.70					26 874			
	ИТОГО	186 749.08					1 282 685			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 734.98					25 654			
	ИТОГО	190 484.06					1 308 339			
	НДС 18%	34 287.13					235 501			
	ВСЕГО С НДС	224 771.19					1 543 840			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)