«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 391 420	руб.	Смета на сумму:	2 391 420	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Мегадом»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Уланова О.В./	
		
«30»05. 2018 г.	«30»05. 2018 г.	

	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада без утепления  МКД  №№ 20-26  по ул. Дрожжевая  г. Калининград	
Сметная стоимость:	2 391.420	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	0.615	тыс. руб.	
монтажных работ:	32.367	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.801	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	473.772	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		7.4	7 987.76	59 109	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.518	229.990	119	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	321.9	163.200	52 534	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.518	1 037.49	537	
			(1)			229.99	119	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	25.16	239.98	6 038	
		Накладные расходы				93%	48 967	
		Сметная прибыль				54%	28 433	
		Всего с НР и СП					136 509	
	
2.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.259	127 561.33	33 038	
		Объем: (7.4)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.0666	18 270.82	1 217	
		Объем: (7.4)*0.009						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.74	887.02	656	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	4.0626	161.570	656	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00444			
		Накладные расходы				66%	433	
		Сметная прибыль				40%	262	
		Всего с НР и СП					1 351	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.74	23 539.30	17 419	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	6.1568	286.750	1 765	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	15.392	169.310	2 606	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	6.1568	2 307.87	14 209	
			(1)			286.75	1 765	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.296	2 040.43	604	
		Накладные расходы				66%	2 885	
		Сметная прибыль				40%	1 748	
		Всего с НР и СП					22 052	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных (в т.ч. откосы)	100 м2		6.77	3 361.61	22 758	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	154.4914	147.310	22 758	
		Накладные расходы				84%	19 117	
		Сметная прибыль				48%	10 924	
		Всего с НР и СП					52 799	
	
7.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		3.5	459.04	1 607	
7. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	9.485	169.310	1 606	
7. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.035	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	1 172	
		Сметная прибыль				56%	899	
		Всего с НР и СП					3 679	
	
8.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.07	2 983.71	209	
		Объем: (3.5)*0.02						
	
9.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.8	11 882.62	9 506	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.344	268.820	92	
9. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	28.312	151.380	4 286	
9. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.16	874.68	140	
			(1)			268.82	43	
9. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.184	308.04	57	
			(1)			268.82	49	
9. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0352	20.52	1	
9. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.253	0.2024	2 735.32	554	
9. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.402	0.3216	13 896.92	4 469	
		Накладные расходы				73%	3 196	
		Сметная прибыль				56%	2 452	
		Всего с НР и СП					15 154	
	
10.	ГЭСНр 53-15-1 
(прим)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.048	142 126.71	6 822	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.048	268.820	13	
10. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	19.0872	156.950	2 996	
10. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.048	874.68	42	
			(1)			268.82	13	
10. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.02832	20.52	1	
10. 5.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	2.4	0.1152	2 735.32	315	
10. 6.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	5.2	0.2496	13 896.92	3 469	
10. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	1.1904			
		Накладные расходы				73%	2 197	
		Сметная прибыль				56%	1 685	
		Всего с НР и СП					10 704	
	
11.	ГЭСН 15-04-006-03 
(прим)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2		6.77	1 208.93	8 184	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.1354	249.405	34	
11. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	44.3435	181.930	8 067	
11. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0677	308.04	21	
			(1)			268.82	18	
11. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0677	1 037.49	70	
			(1)			229.99	16	
11. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.677	38.33	26	
		Накладные расходы				80%	6 481	
		Сметная прибыль				37%	2 997	
		Всего с НР и СП					17 662	
	
12.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		88.01	61.73	5 433	
		Объем: (6.77)*0.013*1000						
	
13.	ГЭСН 15-02-001-01 
(прим)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен, откосов	100 м2		6.77	17 515.20	118 578	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	18.8206	177.720	3 345	
13. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	479.8576	181.930	87 300	
13. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	6.093	14.36	87	
13. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	18.8206	267.44	5 033	
			(1)			177.72	3 345	
13. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.3695	20.52	49	
13. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	12.7953	2 040.43	26 108	
		Накладные расходы				80%	72 516	
		Сметная прибыль				37%	33 539	
		Всего с НР и СП					224 633	
	
14.	08.1.02.17-0034	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм	м2		677	115.04	77 882	
	
15.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		6.77	46 975.53	318 024	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.8801	229.990	202	
15. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	552.432	147.310	81 379	
15. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.677	10.80	7	
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.8801	1 037.49	913	
			(1)			229.99	202	
15. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	1.2186	20.52	25	
15. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	1.6925	9 149.15	15 485	
15. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	744.7	295.71	220 215	
		Накладные расходы				67%	54 659	
		Сметная прибыль				40%	32 632	
		Всего с НР и СП					405 316	
	
16.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-1.6925	9 149.15	-15 485	
		Объем: (6.77)*(-0.25)						
	
17.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-744.7	295.71	-220 215	
		Объем: (6.77)*(-110.0)						
	
18.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		744.7	32.67	24 329	
		Объем: 6.77*110						
	
19.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		1692.5	24.25	41 043	
		Объем: 677*2.5						
	
20.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		6.77	12 655.67	85 679	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	2.8434	229.990	654	
20. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	416.8289	198.360	82 682	
20. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	3.4527	10.80	37	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	2.8434	1 037.49	2 950	
			(1)			229.99	654	
20. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.46036	20.52	9	
		Накладные расходы				80%	66 669	
		Сметная прибыль				37%	30 834	
		Всего с НР и СП					183 182	
	
21.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		2.708	58 562.01	158 586	
		Объем: (6.77)*0.4						
	
22.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.1219	61 897.52	7 545	
		Объем: (6.77)*0.018						
	
23.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		6.77	2 335.01	15 808	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.4062	229.990	93	
23. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	87.6038	175.550	15 379	
23. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.4739	10.80	5	
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.4062	1 037.49	421	
			(1)			229.99	93	
23. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0677	38.33	3	
		Накладные расходы				80%	12 378	
		Сметная прибыль				37%	5 725	
		Всего с НР и СП					33 910	
	
24.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		88.01	104.81	9 224	
		Объем: (6.77)*13						
	
25.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		257.26	185.21	47 647	
		Объем: (6.77)*38.0						
	
26.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (фасад, цоколь)	100 м		0.94	7 654.10	7 195	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.1128	255.877	29	
26. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	38.9254	161.570	6 289	
26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0752	308.04	23	
			(1)			268.82	20	
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0376	1 037.49	39	
			(1)			229.99	9	
26. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00376	57 689.15	217	
26. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00564	111 097.73	627	
26. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.21056			
		Накладные расходы				71%	4 486	
		Сметная прибыль				52%	3 285	
		Всего с НР и СП					14 966	
	
27.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		0.173	56 608.46	9 793	
		Объем: (0.94)*0.184						
	
28.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		12	302.90	3 635	
		Объем: 94*7.5/60						
	
29.	ГЭСН 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт.		16	290.36	4 646	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.16	229.990	37	
29. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1.46	23.36	169.310	3 955	
29. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.16	1 037.49	166	
			(1)			229.99	37	
29. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.12	1.92	43.43	83	
29. 5.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00176	73 890.48	130	
29. 6.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0003	0.0048	2 983.71	14	
29. 7.	08.4.03.02-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0.00043	0.00688	43 149.58	297	
29. 8.	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	шт.	1	16			
		Накладные расходы				98%	3 912	
		Сметная прибыль				56%	2 236	
		Всего с НР и СП					10 794	
	
30.	19.2.03.05-0041	Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм	м2		0.36	1 454.22	524	
		Объем: 0.15*0.15*16						
	
	Козырьки	
31.	ГЭСН 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2		0.02	11 282.44	226	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.94	0.0388	224.200	9	
31. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27.22	0.5444	163.200	89	
31. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.68	0.0136	1 126.02	15	
			(1)			268.82	4	
31. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1.26	0.0252	964.28	24	
			(1)			200.12	5	
31. 5.	91.07.07-001	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	2.36	0.0472	43.81	2	
31. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.85	0.077	20.52	2	
31. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	1.53	0.0306	2 983.71	91	
31. 8.	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	4.4	0.088	25.45	2	
		Накладные расходы				92%	90	
		Сметная прибыль				44%	43	
		Всего с НР и СП					359	
	
32.	ГЭСН 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до 30мм)	100 м2		0.02	7 471.26	149	
		Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 15	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.45	0.009	223.020	2	
32. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	15	0.3	163.200	49	
32. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.15	0.003	1 126.02	3	
			(1)			268.82	1	
32. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.3	0.006	964.28	6	
			(1)			200.12	1	
32. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	1.53	0.0306	2 983.71	91	
		Накладные расходы				92%	47	
		Сметная прибыль				44%	22	
		Всего с НР и СП					218	
	
33.	ГЭСН 12-01-017-01 
(прим)	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций	100 м2		0.02	5 221.11	104	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.552	0.03104	224.200	7	
33. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	21.776	0.43552	163.200	71	
33. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.544	0.01088	1 126.02	12	
			(1)			268.82	3	
33. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1.008	0.02016	964.28	19	
			(1)			200.12	4	
33. 5.	91.07.07-001	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1.888	0.03776	43.81	2	
		Накладные расходы				92%	72	
		Сметная прибыль				44%	34	
		Всего с НР и СП					210	
	
34.	ГЭСН 12-01-017-02 
(прим)	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до 30мм) Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций	100 м2		0.02	2 324.95	46	
		Начисления: Н3= 15*0.8, Н4= 15*0.8, Н5= 15*0.8, Н48= 15*0	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.0072	223.020	2	
34. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	12	0.24	163.200	39	
34. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.12	0.0024	1 126.02	3	
			(1)			268.82	1	
34. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.24	0.0048	964.28	5	
			(1)			200.12	1	
		Накладные расходы				92%	38	
		Сметная прибыль				44%	18	
		Всего с НР и СП					102	
	
35.	ГЭСН 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.04	64 313.56	2 573	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.0108	258.753	3	
35. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	4.51	161.570	729	
35. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.008	1 126.02	9	
			(1)			268.82	2	
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.0028	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
35. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.00016	60 190.64	10	
35. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.00048	107 511.00	52	
35. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.03128	56 608.46	1 771	
		Накладные расходы				92%	673	
		Сметная прибыль				44%	322	
		Всего с НР и СП					3 569	
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ.КАБЕЛЯ	
36.	ГЭСНр 67-3-1 
(прим)	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м		1.12	1 423.15	1 594	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0112	268.820	3	
36. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	10.7968	147.310	1 590	
36. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0112	308.04	3	
			(1)			268.82	3	
		Накладные расходы				72%	1 147	
		Сметная прибыль				52%	828	
		Всего с НР и СП					3 569	
	
37.	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0.24	3 135.48	753	
		Начисления: Н17= 2.0	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0024	268.820	1	
37. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	3.9096	179.760	703	
37. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0024	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
37. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.048	168.36	8	
37. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.00024	111 876.20	27	
		Накладные расходы				81%	570	
		Сметная прибыль				52%	366	
		Всего с НР и СП					1 689	
	
38.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.88	3 954.66	3 480	
		Начисления: Н17= 2.0	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0088	268.820	2	
38. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	17.8904	179.760	3 216	
38. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0088	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
38. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.352	168.36	59	
38. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.001232	111 876.20	138	
		Накладные расходы				81%	2 607	
		Сметная прибыль				52%	1 673	
		Всего с НР и СП					7 760	
	
39.	20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м		0.88	17 331.05	15 251	
	
40.	20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м		0.24	2 059.24	494	
	
41.	ГЭСНм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		0.24	646.42	155	
		Начисления: Н17= 2.0	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0048	249.405	1	
41. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	0.6768	177.590	120	
41. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0024	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0024	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
41. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0384	446.18	17	
41. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.05	0.012	797.64	10	
41. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.012	104.12	1	
		Накладные расходы				81%	98	
		Сметная прибыль				52%	63	
		Всего с НР и СП					316	
	
42.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.024	31 977.86	767	
	
43.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.88	820.68	722	
		Начисления: Н17= 2.0	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0176	249.405	4	
43. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	3.3088	177.590	588	
43. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0088	874.68	8	
			(1)			268.82	2	
43. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0088	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
43. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.1408	446.18	63	
43. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.0484	797.64	39	
43. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.044	104.12	5	
		Накладные расходы				81%	480	
		Сметная прибыль				52%	308	
		Всего с НР и СП					1 509	
	
	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВХОДЫ В ПОДЪЕЗД)	
44.	ГЭСНр 67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.		0.04	16 219.20	649	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0012	268.820		
44. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	89.1	3.564	181.930	648	
44. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0012	308.04		
			(1)			268.82		
44. 4.	20.3.03.03	Светильники с лампами накаливания	шт.	100	4			
		Накладные расходы				72%	467	
		Сметная прибыль				52%	337	
		Всего с НР и СП					1 453	
	
45.	20.3.03.04-0077	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской	шт.		4	239.88	960	
	
46.	20.3.02.10-0009	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.		0.4	104.19	42	
	
47.	ГЭСНм 08-03-526-01 
(прим)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		4	521.53	2 086	
		Начисления: Н17= 2.0	
47. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.56	6.24	179.760	1 122	
47. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.13	0.52	43.43	23	
47. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.024	113.97	3	
47. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.004	164.00	1	
47. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.048	446.18	21	
47. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.28	67.18	19	
47. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.196	89.25	17	
47. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.056	168.28	9	
47. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.004	396.43	2	
47. 10.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.004	118 936.03	476	
47. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.144	104.12	15	
47. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.024	110.38	3	
47. 13.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.4	884.78	354	
		Накладные расходы				81%	909	
		Сметная прибыль				52%	583	
		Всего с НР и СП					3 578	
	
48.	62.1.01.09-0010 
Оборудование	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.		4	153.64	615	
	
	ДВЕРИ И ВХОДЫ (КРЫЛЬЦА) В ПОДЪЕЗД. Главный и дворовой фасад.	
49.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.1024	18 255.44	1 869	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.792576	268.820	213	
49. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	10.640384	152.740	1 625	
49. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.792576	308.04	244	
			(1)			268.82	213	
		Накладные расходы				84%	1 544	
		Сметная прибыль				48%	882	
		Всего с НР и СП					4 295	
	
50.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		9.24	846.68	7 823	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	1.5708	229.990	361	
50. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	22.176	187.360	4 155	
50. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	1.5708	1 037.49	1 630	
			(1)			229.99	361	
50. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	3.696	43.43	161	
50. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.000924	60 390.76	56	
50. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.02772	55 107.93	1 528	
50. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.924	319.06	295	
		Накладные расходы				69%	3 116	
		Сметная прибыль				58%	2 619	
		Всего с НР и СП					13 558	
	
51.	С99.2-03.02-0014	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2		9.24	6 629.60	61 258	
	
52.	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.		4	2 123.05	8 492	
	
53.	01.7.04.04-0011	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом	компл.		4	404.66	1 619	
	
54.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.0636	46 940.19	2 985	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.131016	268.820	35	
54. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	12.978216	175.550	2 278	
54. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.131016	308.04	40	
			(1)			268.82	35	
54. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.27348	2 390.43	654	
54. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.00636	2 040.43	13	
		Накладные расходы				80%	1 850	
		Сметная прибыль				37%	856	
		Всего с НР и СП					5 691	
	
55.	ГЭСНр 62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2		0.0636	2 598.75	165	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.008268	259.859	2	
55. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14.3	0.90948	154.230	140	
55. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.00636	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
55. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.001908	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
55. 5.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.0005	0.0000318	138 958.17	4	
55. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.124	0.0078864	20.52		
55. 7.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.08	0.005088	162.00	1	
55. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.000636	38.33		
55. 9.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00002544	3 474.67		
55. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.019	0.0012084	11 636.25	14	
55. 11.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000318	46 966.96	1	
		Накладные расходы				68%	97	
		Сметная прибыль				40%	57	
		Всего с НР и СП					318	
	
56.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен	м3		2.02	1 510.91	3 052	
56. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	16.6448	167.270	2 784	
56. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	2.323	97.21	226	
56. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	4.646	9.05	42	
		Накладные расходы				84%	2 339	
		Сметная прибыль				48%	1 336	
		Всего с НР и СП					6 727	
	
57.	ГЭСН 08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (дворовые выходы из подвала)	м3		1.6	1 936.67	3 099	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.64	268.820	172	
57. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	5.4	8.64	156.950	1 356	
57. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.4	0.64	1 126.02	721	
			(1)			268.82	172	
57. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.44	0.704	20.52	14	
57. 5.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	0.24	0.384	2 615.05	1 004	
57. 6.	11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0005	0.0008	4 181.27	3	
		Накладные расходы				93%	1 421	
		Сметная прибыль				54%	825	
		Всего с НР и СП					5 345	
	
58.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.6304	13 896.92	8 761	
		Объем: (1.6)*0.394						
	
59.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (выходы из подвала)	100 м2		0.08	17 515.20	1 401	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.2224	177.720	40	
59. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	5.6704	181.930	1 032	
59. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.072	14.36	1	
59. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.2224	267.44	59	
			(1)			177.72	40	
59. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.028	20.52	1	
59. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.1512	2 040.43	309	
		Накладные расходы				80%	858	
		Сметная прибыль				37%	397	
		Всего с НР и СП					2 655	
	
	ОКНА	
60.	ГЭСН 46-04-012-01 
(прим)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (подъезды)	100 м2		0.108	31 181.83	3 368	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.83592	268.820	225	
60. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	20.36232	152.740	3 110	
60. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.83592	308.04	257	
			(1)			268.82	225	
		Накладные расходы				84%	2 801	
		Сметная прибыль				48%	1 601	
		Всего с НР и СП					7 770	
	
61.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (подвал)	100 м2		0.0768	28 771.59	2 210	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.594432	268.820	160	
61. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	13.267968	152.740	2 027	
61. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.594432	308.04	183	
			(1)			268.82	160	
		Накладные расходы				84%	1 837	
		Сметная прибыль				48%	1 050	
		Всего с НР и СП					5 097	
	
62.	ГЭСН 08-02-007-03 
(прим)	Демонтаж металлических решеток на окнах  Демонтаж (разборка) металлических конструкций	т		0.04	7 398.78	296	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.743	0.06972	240.750	17	
62. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	33.166	1.32664	167.270	222	
62. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.483	0.01932	1 126.02	22	
			(1)			268.82	5	
62. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.26	0.0504	1 037.49	52	
			(1)			229.99	12	
		Накладные расходы				93%	222	
		Сметная прибыль				54%	129	
		Всего с НР и СП					647	
	
63.	ГЭСН 08-02-007-03 
(прим)	Монтаж металлических решеток на окнах  (б/у)	т		0.04	15 807.38	632	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.49	0.0996	240.750	24	
63. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	47.38	1.8952	167.270	317	
63. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.69	0.0276	1 126.02	31	
			(1)			268.82	7	
63. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.8	0.072	1 037.49	75	
			(1)			229.99	17	
63. 5.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.75	0.03	2 067.77	62	
63. 6.	07.2.07.13	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)	т	1	0.04			
63. 7.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.06	0.0024	50 201.92	120	
63. 8.	14.4.03.03-0002	Лак битумный: БТ-123	т	0.005	0.0002	134 949.19	27	
		Накладные расходы				93%	317	
		Сметная прибыль				54%	184	
		Всего с НР и СП					1 133	
	
64.	ГЭСНр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2		0.0192	14 924.59	287	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.000192	229.990		
64. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	80.73	1.550016	163.200	253	
64. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000192	1 037.49		
			(1)			229.99		
64. 4.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.00192	38.33		
64. 5.	14.4.02.04-0015	Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0.0136	0.00026112	88 439.07	23	
64. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.007	0.0001344	76 067.68	10	
		Накладные расходы				68%	172	
		Сметная прибыль				40%	101	
		Всего с НР и СП					560	
	
65.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0192	2 141.39	41	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.000384	215.055		
65. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.101952	201.080	21	
65. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000192	10.80		
65. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000192	964.28		
			(1)			200.12		
65. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000192	1 037.49		
			(1)			229.99		
65. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.021504	18.56		
65. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0002304	72 855.64	17	
65. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0000384	79 235.11	3	
		Накладные расходы				69%	14	
		Сметная прибыль				48%	10	
		Всего с НР и СП					66	
	
66.	ГЭСН 46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3		0.5	2 375.40	1 188	
66. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	12.3	6.15	169.310	1 041	
66. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.54	1.27	97.21	123	
66. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	5.08	2.54	9.05	23	
		Накладные расходы				84%	874	
		Сметная прибыль				48%	500	
		Всего с НР и СП					2 562	
	
67.	ГЭСН 46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (дверные проемы со стороны дворового фасада)	м3		1.2	8 479.73	10 176	
67. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14.63	17.556	154.230	2 708	
67. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.32	0.384	25.31	10	
67. 3.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.24	0.288	2 735.32	788	
67. 4.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.4	0.48	13 896.92	6 671	
		Накладные расходы				84%	2 275	
		Сметная прибыль				48%	1 300	
		Всего с НР и СП					13 751	
	
68.	ГЭСН 10-01-034-03 
(прим)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (подвал)	100 м2		0.0768	95 241.87	7 315	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.4912128	242.812	119	
68. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	19.9139328	165.230	3 290	
68. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.1622016	308.04	50	
			(1)			268.82	44	
68. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.3290112	1 037.49	341	
			(1)			229.99	76	
68. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	32.9472	5.19	171	
68. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	5.4528	5.19	28	
68. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	2.08128	51.86	108	
68. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	5.48352	74.74	410	
68. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.6144	429.47	264	
68. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	8.7552	302.90	2 652	
		Накладные расходы				90%	3 068	
		Сметная прибыль				43%	1 466	
		Всего с НР и СП					11 849	
	
69.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		7.68	8 099.41	62 203	
	
70.	ГЭСН 10-01-034-03 
(прим)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (подъезды)	100 м2		0.108	95 241.87	10 286	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.690768	242.812	168	
70. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	28.003968	165.230	4 627	
70. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.228096	308.04	70	
			(1)			268.82	61	
70. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.462672	1 037.49	480	
			(1)			229.99	106	
70. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	46.332	5.19	240	
70. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	7.668	5.19	40	
70. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	2.9268	51.86	152	
70. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	7.7112	74.74	576	
70. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.864	429.47	371	
70. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	12.312	302.90	3 729	
		Накладные расходы				90%	4 316	
		Сметная прибыль				43%	2 062	
		Всего с НР и СП					16 663	
	
71.	11.3.02.02-0017	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		10.8	6 491.82	70 112	
	
72.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.12	23 171.96	2 781	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.228	0.02736	238.165	7	
72. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25.428	3.05136	161.570	493	
72. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.00576	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
72. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0216	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
72. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.48	429.47	206	
72. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	6.792	302.90	2 057	
		Накладные расходы				90%	450	
		Сметная прибыль				43%	215	
		Всего с НР и СП					3 446	
	
73.	11.3.03.01-0006	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м		12	310.93	3 731	
	
74.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (подвал)	100 м2		0.064	54 231.65	3 471	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.158208	268.820	43	
74. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	15.671808	175.550	2 751	
74. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.158208	308.04	49	
			(1)			268.82	43	
74. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.2752	2 390.43	658	
74. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0064	2 040.43	13	
		Накладные расходы				80%	2 235	
		Сметная прибыль				37%	1 034	
		Всего с НР и СП					6 740	
	
75.	ГЭСНр 62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке (подвал)	100 м2		0.064	2 598.75	166	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.00832	259.859	2	
75. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14.3	0.9152	154.230	141	
75. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.0064	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
75. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.00192	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
75. 5.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.0005	0.000032	138 958.17	4	
75. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.124	0.007936	20.52		
75. 7.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.08	0.00512	162.00	1	
75. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00064	38.33		
75. 9.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000256	3 474.67		
75. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.019	0.001216	11 636.25	14	
75. 11.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000032	46 966.96	2	
		Накладные расходы				68%	97	
		Сметная прибыль				40%	57	
		Всего с НР и СП					320	
	
76.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.096	54 096.88	5 193	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.336	0.320256	213.153	68	
76. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	207.936	19.961856	165.230	3 298	
76. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	0.035712	308.04	11	
			(1)			268.82	10	
76. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2.364	0.226944	224.34	51	
			(1)			200.12	45	
76. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	0.0576	1 037.49	60	
			(1)			229.99	13	
76. 6.	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2	105	10.08	111.39	1 123	
76. 7.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.000192	56 019.57	11	
76. 8.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.16416	306.04	50	
76. 9.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.04704	9 149.15	430	
76. 10.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.00288	2 390.43	7	
76. 11.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.0004608	330 431.94	152	
		Накладные расходы				80%	2 693	
		Сметная прибыль				37%	1 245	
		Всего с НР и СП					9 131	
	
77.	ГЭСН 15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.096	3 369.47	323	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.010368	234.304	2	
77. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	18.216	1.748736	169.310	296	
77. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.001152	308.04		
			(1)			268.82		
77. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.009216	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
77. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.3	0.0288	162.00	5	
77. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0096	38.33		
77. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.00048	25 917.44	12	
		Накладные расходы				80%	238	
		Сметная прибыль				37%	110	
		Всего с НР и СП					672	
	
78.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.005	54 822.34	274	
		Объем: (0.096)*0.052						
	
	КРЫЛЬЦО	
79.	ГЭСН 46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (лестничные марши, площадки. ступени, стенки)	м3		3.4	5 297.38	18 011	
79. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	23.94	81.396	161.570	13 151	
79. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.44	8.296	3.21	27	
79. 3.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	10.37	35.258	97.21	3 427	
79. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	20.74	70.516	9.05	638	
79. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.26	0.884	473.00	418	
79. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2	6.8	51.41	350	
		Накладные расходы				84%	11 047	
		Сметная прибыль				48%	6 312	
		Всего с НР и СП					35 370	
	
80.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.046	22 685.74	1 044	
80. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	7.084	147.310	1 044	
		Накладные расходы				61%	637	
		Сметная прибыль				31%	324	
		Всего с НР и СП					2 004	
	
81.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.046	7 577.13	349	
81. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	2.46376	141.470	349	
		Накладные расходы				61%	213	
		Сметная прибыль				31%	108	
		Всего с НР и СП					670	
	
82.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		7.36	151.56	1 115	
		Объем: 4.6*1.6						
	
83.	ГЭСН 11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2		0.0105	8 904.86	94	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.88	0.00924	208.980	2	
83. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	7.7	0.08085	158.310	13	
83. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.33	0.003465	964.28	3	
			(1)			200.12	1	
83. 4.	91.08.03-015	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т	маш.-ч	0.09	0.000945	681.05	1	
			(1)			286.75		
83. 5.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	0.009765	3.34		
83. 6.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.00483	493.44	2	
			(1)			200.12	1	
83. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.22	0.00231	20.52		
83. 8.	02.2.05.04-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	5.1	0.05355	1 386.62	74	
		Накладные расходы				94%	14	
		Сметная прибыль				51%	8	
		Всего с НР и СП					116	
	
84.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		1.05	746.76	784	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.315	200.120	63	
84. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	3.5805	163.200	584	
84. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.084	964.28	81	
			(1)			200.12	17	
84. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	0.462	3.34	2	
84. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.231	493.44	114	
			(1)			200.12	46	
84. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.1575	20.52	3	
		Накладные расходы				94%	608	
		Сметная прибыль				51%	330	
		Всего с НР и СП					1 722	
	
85.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.26	523.12	659	
		Объем: (1.05)*1.2						
	
86.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		0.42	3 975.80	1 670	
86. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	1.5372	158.310	243	
86. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.2016	3.18	1	
86. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00084	21 070.94	18	
86. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.147	20.52	3	
86. 5.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.02	0.4284	3 276.39	1 404	
86. 6.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00042	3 621.85	2	
		Накладные расходы				94%	228	
		Сметная прибыль				51%	124	
		Всего с НР и СП					2 022	
	
87.	ГЭСН 15-02-001-01 
(прим)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.033	17 515.20	578	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.09174	177.720	16	
87. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	2.33904	181.930	426	
87. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.0297	14.36		
87. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.09174	267.44	25	
			(1)			177.72	16	
87. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.01155	20.52		
87. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.06237	2 040.43	127	
		Накладные расходы				80%	354	
		Сметная прибыль				37%	164	
		Всего с НР и СП					1 095	
	
88.	ГЭСН 08-01-003-07 
(прим)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.033	12 304.92	406	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0066	229.990	2	
88. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	0.6996	179.760	126	
88. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.06435	116.06	7	
88. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0066	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
88. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.000528	25 327.06	13	
88. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.00792	26 382.45	209	
88. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.000792	54 972.66	44	
88. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0033	38.33		
		Накладные расходы				93%	119	
		Сметная прибыль				54%	69	
		Всего с НР и СП					594	
	
89.	ГЭСН 06-01-024-03 
(прим)	Устройство стен крылец и ступеней : железобетонных	100 м3		0.017	616 912.37	10 488	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.58	0.70686	264.891	187	
89. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	1051.83	17.88111	165.230	2 954	
89. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	34.99	0.59483	1 126.02	670	
			(1)			268.82	160	
89. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.59	0.04403	874.68	39	
			(1)			268.82	12	
89. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00459	964.28	4	
			(1)			200.12	1	
89. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	53.55	0.91035	11.58	11	
89. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.73	0.06341	1 037.49	66	
			(1)			229.99	15	
89. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	83.3	1.4161	43.43	62	
89. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.223	0.003791	20.52		
89. 10.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.1	0.0017	60 390.76	103	
89. 11.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.12	0.00204	89 253.46	182	
89. 12.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.086	0.001462	57 689.15	84	
89. 13.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.074	0.001258	11 636.25	15	
89. 14.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	101.5	1.7255	3 276.39	5 653	
89. 15.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.19	0.00323	5 768.85	19	
89. 16.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	2.2	0.0374	5 760.02	215	
89. 17.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	103	1.751	234.83	411	
		Накладные расходы				80%	2 513	
		Сметная прибыль				44%	1 382	
		Всего с НР и СП					14 383	
	
90.	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.0172	61 564.48	1 059	
		Объем: 17.2*1/1000						
	
91.	ГЭСН 06-01-001-16 
(прим)	Устройство площадок железобетонных плоских	100 м3		0.019	403 289.29	7 662	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.78	0.54682	266.192	146	
91. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	220.66	4.19254	161.570	677	
91. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	26.06	0.49514	1 126.02	558	
			(1)			268.82	133	
91. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.98	0.01862	874.68	16	
			(1)			268.82	5	
91. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00513	964.28	5	
			(1)			200.12	1	
91. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	10.71	0.20349	11.58	2	
91. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.47	0.02793	1 037.49	29	
			(1)			229.99	6	
91. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.3	0.0817	43.43	4	
91. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.73	0.01387	20.52		
91. 10.	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	30	0.57	11.16	6	
91. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.005	0.000095	60 390.76	6	
91. 12.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	0.000038	57 689.15	2	
91. 13.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.01	0.00019	11 636.25	2	
91. 14.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	101.5	1.9285	3 276.39	6 319	
91. 15.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0102	0.0001938	45 326.49	9	
91. 16.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.04	0.00076	5 760.02	4	
91. 17.	11.2.13.04-0012	Щиты: из досок толщиной 40 мм	м2	3.6	0.0684	336.10	23	
		Накладные расходы				80%	658	
		Сметная прибыль				44%	362	
		Всего с НР и СП					8 683	
	
92.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т		0.0691	50 965.05	3 522	
		Объем: 69.1/1000						
	
93.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.078	12 995.11	1 014	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.09906	268.820	27	
93. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	3.08178	150.030	462	
93. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.09906	308.04	31	
			(1)			268.82	27	
93. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.70746	3.18	2	
93. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.273	20.52	6	
93. 6.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2.04	0.15912	3 223.31	513	
		Накладные расходы				94%	460	
		Сметная прибыль				51%	249	
		Всего с НР и СП					1 723	
	
94.	ГЭСН 11-01-011-02 
(прим)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 30мм)	100 м2		0.078	3 581.94	279	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.03276	268.820	9	
94. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	1	0.078	150.030	12	
94. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.42	0.03276	308.04	10	
			(1)			268.82	9	
94. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.64	0.36192	3.18	1	
94. 5.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	1.02	0.07956	3 223.31	256	
		Накладные расходы				94%	20	
		Сметная прибыль				51%	11	
		Всего с НР и СП					309	
	
95.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.0078	3 799.01	30	
		Объем: 7.8*1/1000						
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.002964	246.339	1	
95. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	0.098592	167.270	16	
95. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.001248	874.68	1	
			(1)			268.82		
95. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.001716	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
95. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0002184	47 018.66	10	
95. 6.	08.4.03.04	Арматура	т	1	0.0078			
		Накладные расходы				80%	14	
		Сметная прибыль				44%	7	
		Всего с НР и СП					51	
	
96.	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.0078	61 564.48	480	
		Объем: 7.8*1/1000						
	
97.	ГЭСН 09-03-050-01 
(прим)	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (обрамление лестницы)	100 м		0.3	2 761.54	828	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.015	229.990	3	
97. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.8	3.84	175.550	674	
97. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.015	1 037.49	16	
			(1)			229.99	3	
97. 4.	01.7.15.14-0166	Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм	т	0.00075	0.000225	111 876.20	25	
97. 5.	07.2.07.13-0151	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	0.004	0.0012	94 680.28	114	
		Накладные расходы				69%	467	
		Сметная прибыль				58%	393	
		Всего с НР и СП					1 688	
	
98.	08.3.08.02-0052	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.1131	40 966.37	4 633	
		Объем: 113.1/1000						
	
99.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.01	12 520.10	125	
99. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	0.885	141.470	125	
		Накладные расходы				61%	76	
		Сметная прибыль				31%	39	
		Всего с НР и СП					240	
	
	ОТМОСТКА	
100.	ГЭСНр 68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3		0.096	31 377.16	3 012	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.6176	268.820	435	
100. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	7.46112	152.740	1 140	
100. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.43296	935.23	405	
			(1)			268.82	116	
100. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.18464	1 233.16	1 461	
			(1)			268.82	318	
100. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.19008	35.92	7	
		Накладные расходы				88%	1 386	
		Сметная прибыль				48%	756	
		Всего с НР и СП					5 154	
	
101.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		17.28	510.71	8 825	
		Объем: 9.6*1.8						
	
102.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		17.28	262.99	4 544	
		Объем: 9.6*1.8						
	
103.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.192	22 685.74	4 356	
103. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	29.568	147.310	4 356	
		Накладные расходы				61%	2 657	
		Сметная прибыль				31%	1 350	
		Всего с НР и СП					8 364	
	
104.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.192	7 577.13	1 455	
104. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	10.28352	141.470	1 455	
		Накладные расходы				61%	888	
		Сметная прибыль				31%	451	
		Всего с НР и СП					2 794	
	
105.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		30.72	151.56	4 656	
		Объем: 19.2*1.6						
	
106.	ГЭСН 15-02-001-01 
(прим)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.184	17 515.20	3 223	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.51152	177.720	91	
106. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	13.04192	181.930	2 373	
106. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.1656	14.36	2	
106. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.51152	267.44	137	
			(1)			177.72	91	
106. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0644	20.52	1	
106. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.34776	2 040.43	710	
		Накладные расходы				80%	1 971	
		Сметная прибыль				37%	912	
		Всего с НР и СП					6 106	
	
107.	ГЭСН 08-01-003-07 
(прим)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.184	12 304.92	2 264	
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0368	229.990	8	
107. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	3.9008	179.760	701	
107. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.3588	116.06	42	
107. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0368	1 037.49	38	
			(1)			229.99	8	
107. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.002944	25 327.06	75	
107. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.04416	26 382.45	1 165	
107. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.004416	54 972.66	243	
107. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0184	38.33	1	
		Накладные расходы				93%	659	
		Сметная прибыль				54%	383	
		Всего с НР и СП					3 306	
	
108.	ГЭСН 08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2		1.144	20 602.51	23 569	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.6292	229.990	145	
108. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14.3	16.3592	161.570	2 643	
108. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.79	2.04776	116.06	238	
108. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.55	0.6292	1 037.49	653	
			(1)			229.99	145	
108. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.008	0.009152	25 327.06	232	
108. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.22	0.25168	26 382.45	6 640	
108. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.016	0.018304	54 972.66	1 006	
108. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	2.5	2.86	2 590.83	7 410	
108. 9.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	110	125.84	37.73	4 748	
		Накладные расходы				93%	2 593	
		Сметная прибыль				54%	1 506	
		Всего с НР и СП					27 667	
	
109.	ГЭСН 11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2		0.096	8 904.86	855	
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.88	0.08448	208.980	18	
109. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	7.7	0.7392	158.310	117	
109. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.33	0.03168	964.28	31	
			(1)			200.12	6	
109. 4.	91.08.03-015	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т	маш.-ч	0.09	0.00864	681.05	6	
			(1)			286.75	2	
109. 5.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	0.08928	3.34		
109. 6.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.04416	493.44	22	
			(1)			200.12	9	
109. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.22	0.02112	20.52		
109. 8.	02.2.05.04-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	5.1	0.4896	1 386.62	679	
		Накладные расходы				94%	127	
		Сметная прибыль				51%	69	
		Всего с НР и СП					1 051	
	
110.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		9.6	746.76	7 169	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	2.88	200.120	576	
110. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	32.736	163.200	5 343	
110. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.768	964.28	741	
			(1)			200.12	154	
110. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	4.224	3.34	14	
110. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	2.112	493.44	1 042	
			(1)			200.12	423	
110. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.44	20.52	30	
		Накладные расходы				94%	5 564	
		Сметная прибыль				51%	3 019	
		Всего с НР и СП					15 752	
	
111.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.52	523.12	6 026	
		Объем: (9.6)*1.2						
	
112.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		9.6	3 975.80	38 168	
112. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	35.136	158.310	5 562	
112. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	4.608	3.18	15	
112. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0192	21 070.94	405	
112. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.36	20.52	69	
112. 5.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.02	9.792	3 276.39	32 082	
112. 6.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0096	3 621.85	35	
		Накладные расходы				94%	5 228	
		Сметная прибыль				51%	2 837	
		Всего с НР и СП					46 233	
	
113.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		35.698	510.71	18 231	
		Объем: 677*0.02*1.8+0.21+2.02*1.8+3.4*2.2						
	
114.	03-21-01-040	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		35.698	262.99	9 388	
		Объем: 677*0.02*1.8+0.21+2.02*1.8+3.4*2.2						

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 366 210	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					615	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					615	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					24 710	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					17 514	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 37, 38, 41, 43, 47)					4 663	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 37, 38, 41, 43, 47)					2 994	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					32 367	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 278 686	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					635 651	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 57, 62, 63, 88, 107, 108; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 49, 56, 60, 61, 66, 67, 79; %=73 - по стр. 7, 9, 10; %=80 - по стр. 11, 13, 20, 23, 54, 59, 74, 76, 77, 87, 89, 91, 95, 106; %=67 - по стр. 15; %=71 - по стр. 26; %=92 - по стр. 31-35; %=72 - по стр. 36, 44; %=68 - по стр. 55, 64, 75; %=69 - по стр. 65; %=90 - по стр. 68, 70, 72; %=61 - по стр. 80, 81, 99, 103, 104; %=94 - по стр. 83, 84, 86, 93, 94, 109, 110, 112; %=88 - по стр. 100)					365 441	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 57, 62, 63, 88, 107, 108; %=40 - по стр. 4, 5, 15, 55, 64, 75; %=48 - по стр. 6, 49, 56, 60, 61, 65-67, 79, 100; %=56 - по стр. 7, 9, 10; %=37 - по стр. 11, 13, 20, 23, 54, 59, 74, 76, 77, 87, 106; %=52 - по стр. 26, 36, 44; %=44 - по стр. 31-35, 89, 91, 95; %=43 - по стр. 68, 70, 72; %=31 - по стр. 80, 81, 99, 103, 104; %=51 - по стр. 83, 84, 86, 93, 94, 109, 110, 112)					193 209	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 837 336	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 270	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 50, 97)					3 583	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 50, 97)					3 012	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					16 865	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 170	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 29)					3 912	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 29)					2 236	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					11 318	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					46 759	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					46 759	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 945 260	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	41 629	
	ИТОГО					1 986 889	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	39 738	
	ИТОГО					2 026 627	
	НДС 18%				18	364 793	
	ВСЕГО С НДС					2 391 420	

Составил:	Вед. инженер СО МКУ "КР МКД"                              Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ "КР МКД"                                Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)