«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 214 386	руб.	Смета на сумму:	1 214 386	руб.	
Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.С. Гадаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Красная 280-282 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	1 214.386	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.882	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	206.331	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	4.75	553.31	459.71	93.60	2 628.22	2 183.62	444.60	12.51	4.4	29 273	27 317	1 956	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 161.78				84%	22 946			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 310.17				48%	13 112			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 100.18					65 331			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.75	2 875.85	685.02	51.83	13 660.29	3 253.85	246.19	12.51	7.1	72 325	40 706	1 748	
				2 139.00			10 160.25		2.94	1		29 871		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 700.70				71%	28 901			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 115.00				52%	21 167			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 475.99					122 393			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.28	5 502.93	806.67	80.64	23 552.54	3 452.55	345.14	12.51	7.11	108 663	43 191	2 454	
				4 615.62			19 754.85		3.19	1		63 018		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 865.62				71%	30 666			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 244.16				52%	22 459			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 662.31					161 788			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.09	6 775.72	1 449.90	67.19	609.81	130.49	6.05	12.51	7.02	3 615	1 632	42	
				5 258.63			473.28		4.1	1		1 940		
	Накладные расходы		83%			108.31				71%	1 159			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.82				52%	849			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					802.94					5 622			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.72	9 291.30	1 358.31	34.61	6 689.74	977.98	24.92	12.51	6.98	29 242	12 235	174	
				7 898.38			5 686.83		2.96	1		16 833		
	Накладные расходы		83%			811.72				71%	8 687			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			635.69				52%	6 362			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 137.15					44 291			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.68	4 519.16	360.82	36.65	3 073.03	245.36	24.92	12.51	7.07	14 737	3 069	176	
				4 121.69			2 802.75		4.1	1		11 491		
	Накладные расходы		83%			203.65				71%	2 179			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			159.48				52%	1 596			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 436.16					18 512			
	
7.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	12.825	221.62	101.80	102.69	2 842.22	1 305.56	1 316.97	12.51	3.39	21 188	16 333	4 465	
				17.13	1.45		219.69	18.60	1.78	12.56		391	234	
	Объем: 475*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 191.74				77%	12 757			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			794.50				48%	7 952			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 828.46					41 897			
	
8.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	265.4775	36.04			9 567.81					39 957			
				36.04			9 567.81		150.51			39 957		
	Объем: 20.7*12.825													
	
9.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.75	286.73	122.64	1.26	1 361.96	582.52	6.00	12.51	7.2	9 457	7 287	43	
				162.83			773.44		2.75	1		2 127		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			541.74				79%	5 757			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			372.81				51%	3 716			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 276.52					18 930			
	
10.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	593.75	13.13			7 795.94					25 413			
				13.13			7 795.94		42.8			25 413		
	Объем: 475*1.25													
	
11.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.05	2 618.75	2 607.40	11.35	130.94	130.37	0.57	12.51	4.05	1 633	1 631	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			108.21				71%	1 158			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.74				52%	848			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.89					3 639			
	
12.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	394.62	69.00	29.78	1 973.08	345.00	148.88	12.51	6.53	9 519	4 316	972	
				295.84	2.08		1 479.20	10.38	2.86	12.51		4 231	130	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			376.70				90%	4 001			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			191.91				43%	1 912			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 541.69					15 432			
	
13.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	2.4	3 070.76			7 369.82					12 613			
				3 070.76			7 369.82		5 255.58			12 613		
	Объем: 0.8*0.6*5													
	
14.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной (прим.), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0892	373.54	335.71	26.60	33.32	29.95	2.37	12.52	7.17	396	375	17	
				11.23			1.00		4.14	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			31.75				90%	338			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			16.17				43%	161			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81.24					895			
	
15.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.039248	23 811.97			934.57					1 878			
				23 811.97			934.57		47 861.13			1 878		
	Объем: 0.0892*0.44													
	
16.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	1	88.07	12.17		88.07	12.17		12.51	1	357	152		
				75.90			75.90		2.7	1		205		
	Накладные расходы		103%			12.54				88%	134			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.30				48%	73			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.91					564			
	
17.	ТЕРр 65-38-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	1	281.32	27.78		281.32	27.78		12.51	1	1 925	348		
				253.54			253.54		6.22	1		1 577		
	Накладные расходы		103%			28.61				88%	306			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.67				48%	167			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.60					2 398			
	
18.	ТЕР 12-01-023-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	4.75	9 809.79	434.32	165.99	46 596.49	2 063.02	788.44	12.52	6.6	228 323	25 829	5 204	
				9 209.48	14.91		43 745.03	70.83	4.51	12.5		197 290	885	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 304.56				92%	24 577			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 173.62				44%	11 754			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50 074.67					264 654			
	
19.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	49	137.86			6 755.14					29 388			
				137.86			6 755.14		599.75			29 388		
	
20.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.84	75.57	75.35	0.22	63.48	63.29	0.18	12.51	4.09	793	792	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			52.53				71%	562			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.14				52%	412			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.15					1 767			
	
21.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.6	4 972.00	72.11	75.20	2 983.20	43.26	45.12	12.51	6.29	10 870	541	284	
				4 824.69	5.48		2 894.81	3.29	3.47	12.5		10 045	41	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			50.27				92%	535			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.60				44%	256			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 059.08					11 662			
	
22.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.84	2 956.30	374.76	6.66	2 483.29	314.80	5.59	12.51	6.9	9 687	3 938	39	
				2 574.88	1.03		2 162.90	0.87	2.64	12.57		5 710	11	
	Накладные расходы		83%			262.01				71%	2 804			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			205.19				52%	2 053			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 950.48					14 544			
	
23.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.84	8 813.16	326.90	31.86	7 403.06	274.60	26.76	12.51	6.89	26 061	3 435	184	
				8 454.40	3.03		7 101.70	2.54	3.16	12.48		22 441	32	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			299.31				92%	3 190			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			152.43				44%	1 525			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 854.80					30 776			
	
24.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.58	7 415.77	333.04	13.17	4 301.15	193.16	7.64	12.51	7.18	13 173	2 416	55	
				7 069.56			4 100.34		2.61	1		10 702		
	Накладные расходы		83%			160.32				71%	1 715			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			125.55				52%	1 256			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 587.03					16 145			
	
25.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
	
26.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
	
27.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
	
28.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.48	1 357.93	327.73	1.01	651.81	157.31	0.48	12.51	7.2	4 061	1 968	3	
				1 029.19			494.01		4.23	1		2 090		
	Накладные расходы		83%			130.57				71%	1 397			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			102.25				52%	1 023			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					884.63					6 482			
	
29.	ТЕРр 53-16-1 
(мауэрлат. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	0.072	1 615.27	301.17	30.24	116.30	21.68	2.18	12.51	6.11	632	271	13	
				1 283.86	5.99		92.44	0.43	3.76	12.52		348	5	
	Накладные расходы		86%			19.01				73%	201			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			15.48				56%	155			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.79					988			
	
30.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разборка обивки стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку (прим.), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.028	250.56	233.54	17.02	7.02	6.54	0.48	12.52	7.17	85	82	3	
									4.14	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			6.93				90%	74			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.53				43%	35			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.48					194			
	
31.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивки вент. каналов кровельной сталью оцинкованной по войлоку (прим.), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.028	5 112.78	335.71	26.60	143.16	9.40	0.74	12.52	7.17	674	118	5	
				4 750.47			133.01		4.14	1		551		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			9.96				90%	106			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.08				43%	51			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.20					831			
	
32.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.012	8 572.20	5 513.35	252.31	102.87	66.16	3.03	12.51	6.18	1 010	828	19	
				2 806.54	60.12		33.68	0.72	4.86	12.52		164	9	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			52.17				66%	552			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			42.13				50%	419			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					197.17					1 981			
	
33.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0504	3 649.31			183.93					695			
				3 649.31			183.93		13 782.4			695		
	Объем: 0.012*4200													
	
34.	ТЕРр 60-7-8 
(6 каналов. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.012	23 217.20	15 220.75	473.40	278.61	182.65	5.68	12.51	6.18	2 759	2 285	35	
				7 523.05	112.70		90.28	1.35	4.86	12.52		439	17	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 519			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 151			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					5 429			
	
35.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.132	3 649.31			481.71					1 819			
				3 649.31			481.71		13 782.4			1 819		
	Объем: 0.012*2200*5													
	
36.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.1294	2 412.79	1 295.60	2.05	312.22	167.65	0.27	12.51	4.04	2 709	2 097	1	
				1 115.14			144.30		4.23	1		610		
	Накладные расходы		79%			132.44				67%	1 405			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			83.83				40%	839			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					528.49					4 953			
	
37.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1294	2 291.60	114.18	14.24	296.53	14.78	1.84	12.51	7.11	968	185	13	
				2 163.18			279.92		2.75	1		770		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			14.04				80%	148			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.95				37%	68			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					317.52					1 184			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	157 239.90	16 382.56	3 456.99			720 161	204 967	17 921	
			137 400.32	109.01				497 270	1 364	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	156 870.51	16 342.61	3 456.99			717 879	204 467	17 921	
			137 070.88	109.01				495 488	1 364	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	33 088.92					111 763			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 11, 20, 22, 24-28; %=77 - по стр. 7; %=79 - по стр. 9; %=90 - по стр. 12, 14, 30, 31; %=92 - по стр. 18, 21, 23; %=73 - по стр. 29; %=66 - по стр. 32, 34; %=67 - по стр. 36; %=80 - по стр. 37)	14 845.03					158 464			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=52 - по стр. 2-6, 11, 20, 22, 24-28; %=51 - по стр. 9; %=43 - по стр. 12, 14, 30, 31; %=44 - по стр. 18, 21, 23; %=56 - по стр. 29; %=50 - по стр. 32, 34; %=40 - по стр. 36; %=37 - по стр. 37)	10 190.73					101 960			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	181 906.27					978 303			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	369.39	39.95				2 282	500		
			329.44					1 782		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 16, 17)	41.15					440			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16, 17)	23.97					240			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	434.51					2 962			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	182 340.78					981 265			
	Строительный контроль 2,14%	3 902.09					20 999			
	Всего со строительным контролем	186 242.87					1 002 264			
	Непредвиденные расходы 2%	3 724.86					20 045			
	Итог с непредвиденными	189 967.73					1 022 309			
	НДС	34 194.19					184 016			
	Всего с НДС	224 161.92					1 206 325			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 886.18					158 904			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 214.70					102 200			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
38.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	34.98	7.34		7.34	256.60		256.60		5.54	1 422		1 422	
										1				
	Объем: 0.88+16+18.1													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
39.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	34.98	26.50		26.50	927.00		927.00		5.54	5 136		5 136	
										1				
	Объем: 0.88+16+18.1													
	Поправки: ЭМ: =146.814/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 183.60		1 183.60			6 558		6 558	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 183.60		1 183.60			6 558		6 558	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 183.60					6 558			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 183.60					6 558			
	Строительный контроль 2,14%	25.33					140			
	Всего со строительным контролем	1 208.93					6 698			
	Непредвиденные расходы 2%	24.18					134			
	Итог с непредвиденными	1 233.11					6 832			
	НДС	221.96					1 230			
	Всего с НДС	1 455.07					8 062			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	158 423.50	16 382.56	4 640.59			726 719	204 967	24 479	
			137 400.32	109.01				497 270	1 364	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	158 054.11	16 342.61	4 640.59			724 437	204 467	24 479	
			137 070.88	109.01				495 488	1 364	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	33 088.92					111 763			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 11, 20, 22, 24-28; %=77 - по стр. 7; %=79 - по стр. 9; %=90 - по стр. 12, 14, 30, 31; %=92 - по стр. 18, 21, 23; %=73 - по стр. 29; %=66 - по стр. 32, 34; %=67 - по стр. 36; %=80 - по стр. 37)	14 845.03					158 464			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=52 - по стр. 2-6, 11, 20, 22, 24-28; %=51 - по стр. 9; %=43 - по стр. 12, 14, 30, 31; %=44 - по стр. 18, 21, 23; %=56 - по стр. 29; %=50 - по стр. 32, 34; %=40 - по стр. 36; %=37 - по стр. 37)	10 190.73					101 960			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	183 089.87					984 861			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	369.39	39.95				2 282	500		
			329.44					1 782		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 16, 17)	41.15					440			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16, 17)	23.97					240			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	434.51					2 962			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	183 524.38					987 823			
	Строительный контроль 2,14%	3 927.42					21 139			
	Всего со строительным контролем	187 451.80					1 008 962			
	Непредвиденные расходы 2%	3 749.04					20 179			
	Итог с непредвиденными	191 200.84					1 029 141			
	НДС	34 416.15					185 245			
	Всего с НДС	225 616.99					1 214 386			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 886.18					158 904			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 214.70					102 200			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)