«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 852 841	руб.	Смета на сумму:	1 852 841	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Разина, 24	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Разина, 24	
Сметная стоимость:	1 852.841	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.822	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	362.782	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	5.08	553.31	459.71	93.60	2 810.81	2 335.33	475.49	14.4	6.44	36 691	33 629	3 062	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 311.98				84%	28 248			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 401.20				48%	16 142			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 523.98					81 081			
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.08	172.51	127.80	44.71	876.35	649.22	227.13	14.41	8.08	11 191	9 355	1 835	
					6.95			35.31	1	14.38			508	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			568.16				71%	7 003			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			444.94				52%	5 129			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 889.45					23 322			
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.572	5 502.93	806.67	80.64	25 159.40	3 688.10	368.69	14.41	8.19	123 060	53 145	3 020	
				4 615.62			21 102.61		3.17	1		66 895		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			3 061.12				71%	37 733			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 397.27				52%	27 635			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 617.79					188 428			
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.3	6 775.72	1 449.90	67.19	2 032.72	434.97	20.16	14.4	8.12	12 769	6 264	164	
				5 258.63			1 577.59		4.02	1		6 342		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			361.03				71%	4 447			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			282.73				52%	3 257			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 676.48					20 474			
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	2.1	9 291.30	1 358.31	34.61	19 511.73	2 852.45	72.68	14.4	8.08	90 095	41 075	587	
				7 898.38			16 586.60		2.92	1		48 433		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 367.53				71%	29 163			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 854.09				52%	21 359			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 733.36					140 617			
6.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ( смена кобылок) 1,2*93 ( применительно), 100 м	1.12	3 176.89	1 205.91	20.22	3 558.12	1 350.62	22.65	14.4	8.12	27 039	19 449	184	
				1 950.76			2 184.85		3.39	1		7 407		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 121.01				71%	13 809			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			877.90				52%	10 113			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 557.04					50 961			
7.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	1.75	1 615.27	301.17	30.24	2 826.72	527.05	52.92	14.4	6.76	16 552	7 589	358	
				1 283.86	5.99		2 246.76	10.48	3.83	15.59		8 605	163	
	Накладные расходы		86%			462.28				73%	5 659			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			376.27				56%	4 341			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 665.27					26 552			
8.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.16	8 572.20	5 513.35	252.31	1 371.55	882.14	40.37	14.4	7.12	15 047	12 703	287	
				2 806.54	60.12		449.05	9.62	4.58	16.01		2 057	154	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			695.57				66%	8 486			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			561.81				50%	6 429			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 628.93					29 961			
9.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.672	3 086.00			2 073.79					8 716			
				3 086.00			2 073.79		12 970.32			8 716		
	Объем: 0.16*4200													
10.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 6 каналов), 100 м труб	0.066	23 217.20	15 220.75	473.40	1 532.34	1 004.57	31.24	14.4	7.12	16 962	14 466	222	
				7 523.05	112.70		496.52	7.44	4.58	16		2 274	119	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			789.37				66%	9 626			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			637.57				50%	7 293			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 959.27					33 881			
11.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.726	3 086.00			2 240.44					9 416			
				3 086.00			2 240.44		12 970.32			9 416		
	Объем: 0.066*2200*5													
12.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 10 каналов), 100 м труб	0.094	41 790.96	27 397.35	852.12	3 928.35	2 575.35	80.10	14.4	7.12	43 485	37 085	570	
				13 541.49	202.86		1 272.90	19.07	4.58	16		5 830	305	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		78%			2 023.65				66%	24 677			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 634.48				50%	18 695			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 586.48					86 857			
13.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.8612	3 086.00			5 743.66					24 140			
				3 086.00			5 743.66		12 970.32			24 140		
	Объем: 0.094*2200*9													
14.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.523	1 567.41	240.58	37.36	819.76	125.82	19.54	14.41	7.35	5 126	1 813	144	
				1 289.47	2.11		674.39	1.10	4.7	14.41		3 170	16	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			125.65				84%	1 536			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			76.15				48%	878			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 021.56					7 540			
15.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.612	2 412.79	1 295.60	2.05	1 476.63	792.91	1.25	14.4	5.73	13 943	11 418	7	
				1 115.14			682.47		3.69	1		2 518		
	Накладные расходы		79%			626.40				67%	7 650			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			396.46				40%	4 567			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 499.48					26 160			
16.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.612	2 291.60	114.18	14.24	1 402.46	69.88	8.71	14.4	8.19	4 798	1 006	71	
				2 163.18			1 323.87		2.81	1		3 720		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			66.39				80%	805			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			32.84				37%	372			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 501.69					5 975			
17.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон треугольных, 100 окон	0.03	1 174.67	1 166.71	7.96	35.24	35.00	0.24	14.41	5.74	506	504	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			29.05				71%	358			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.75				52%	262			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.04					1 126			
18.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон прямоугольных, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	14.4	7.13	6 129	2 981	637	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.83	14.4		2 512	90	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 764			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 321			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					10 213			
19.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.44	3 070.76			4 421.89					7 561			
				3 070.76			4 421.89		5 250.96			7 561		
	Объем: 0.48*3													
20.	ТЕР 20-02-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм, 1 решетка	6	85.20	12.80	4.04	511.18	76.80	24.23	14.41	5.37	5 457	1 107	130	
				68.36			410.16		10.29	1		4 221		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			88.32				98%	1 085			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			54.53				56%	620			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					654.03					7 162			
21.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	0.93	75.57	75.35	0.22	70.28	70.08	0.20	14.4	5.82	1 010	1 009	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			58.17				71%	716			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.55				52%	525			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					174.00					2 251			
22.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.93	8 813.16	326.90	31.86	8 196.24	304.02	29.63	14.4	7.72	29 295	4 378	229	
				8 454.40	3.03		7 862.59	2.81	3.14	14.36		24 689	40	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			331.38				92%	4 065			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			168.76				44%	1 944			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 696.37					35 303			
23.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ( капельник), 100 м	0.93	2 956.30	374.76	6.66	2 749.36	348.53	6.19	14.4	8.36	11 464	5 019	52	
				2 574.88	1.03		2 394.64	0.96	2.67	16.87		6 394	16	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			290.08				71%	3 575			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			227.17				52%	2 618			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 266.61					17 657			
24.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	12.7	221.62	101.80	102.69	2 814.52	1 292.83	1 304.13	14.4	3.56	23 764	18 617	4 643	
				17.13	1.45		217.55	18.42	2.32	14.47		505	266	
	Объем: 457.2*2+508*0.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 180.13				77%	14 540			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			786.75				48%	9 064			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 781.40					47 368			
25.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	262.89	36.04			9 474.56					50 924			
				36.04			9 474.56		193.71			50 924		
	Объем: 12.7*20.7													
26.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	5.08	286.73	122.64	1.26	1 456.58	622.99	6.41	14.4	8.27	11 473	8 971	53	
				162.83			827.18		2.96	1		2 448		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			579.38				79%	7 087			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			398.71				51%	4 575			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 434.67					23 135			
27.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	635	13.13			8 337.55					26 962			
				13.13			8 337.55		42.46			26 962		
	Объем: 508*1.25													
28.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	5.08	2 713.25	179.98	29.68	13 783.31	914.30	150.77	14.41	8.35	54 242	13 175	1 259	
				2 503.59	4.13		12 718.24	20.98	3.13	16.83		39 808	353	
	Накладные расходы		83%			776.28				71%	9 605			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			607.93				52%	7 035			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 167.52					70 881			
29.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	5.08	8 171.06	405.87	165.99	41 508.97	2 061.82	843.22	14.41	7.28	218 832	29 711	6 139	
				7 599.20	14.91		38 603.94	75.76	4.74	14.39		182 983	1 090	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 308.59				92%	28 337			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 175.67				44%	13 552			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44 993.23					260 721			
30.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	49.59	137.86			6 836.48					26 906			
				137.86			6 836.48		542.56			26 906		
31.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	0.93	4 972.00	72.11	75.20	4 623.96	67.06	69.94	14.4	6.88	19 440	966	481	
				4 824.69	5.48		4 486.96	5.09	4.01	14.38		17 993	73	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			77.92				92%	956			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			39.68				44%	457			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 741.56					20 853			
32.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ограждений кровли ( применительно), 100 м ограждения	0.93	4 972.00	72.11	75.20	4 623.96	67.06	69.94	14.4	6.88	19 440	966	481	
				4 824.69	5.48		4 486.96	5.09	4.01	14.38		17 993	73	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			77.92				92%	956			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			39.68				44%	457			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 741.56					20 853			
33.	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска ограждения ( применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0837	1 288.77	768.15	4.21	107.87	64.29	0.35	14.4	8.26	1 039	926	3	
				516.40	0.16		43.22	0.01	2.55	16.69		110		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			61.09				80%	741			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			30.22				37%	343			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					199.18					2 122			
34.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.16	75.57	75.35	0.22	12.09	12.06	0.04	14.4	5.82	174	174		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			10.01				71%	124			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.84				52%	90			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.94					388			
35.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.07342	373.54	335.71	26.60	27.43	24.65	1.95	14.41	8.24	375	355	16	
				11.23			0.82		4.11	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			26.13				90%	320			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			13.31				43%	153			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.87					847			
36.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0323048	23 811.97			769.24					1 486			
				23 811.97			769.24		45 984.42			1 486		
	Объем: 0.07342*0.44													
37.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.265	7 415.77	333.04	13.17	9 380.95	421.30	16.66	14.4	8.24	29 903	6 067	137	
				7 069.56			8 942.99		2.65	1		23 699		
	Накладные расходы		83%			349.68				71%	4 308			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			273.85				52%	3 155			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 004.47					37 365			
38.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.22	5 731.49	578.30	8.10	1 260.93	127.23	1.78	14.4	8.25	4 473	1 832	15	
				5 145.09			1 131.92		2.32	1		2 626		
	Накладные расходы		83%			105.60				71%	1 301			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			82.70				52%	953			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 449.23					6 726			
39.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.11	8 719.75	480.56	8.10	959.17	52.86	0.89	14.4	8.25	1 900	761	7	
				8 231.09			905.42		1.25	1		1 132		
	Накладные расходы		83%			43.87				71%	540			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.36				52%	396			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 037.40					2 836			
40.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.11	4 604.75	480.56	8.10	506.52	52.86	0.89	14.4	8.25	1 900	761	7	
				4 116.09			452.77		2.5	1		1 132		
	Накладные расходы		83%			43.87				71%	540			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.36				52%	396			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					584.75					2 836			
41.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.2	1 357.93	327.73	1.01	1 629.52	393.28	1.21	14.4	8.27	10 724	5 663	10	
				1 029.19			1 235.03		4.09	1		5 051		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			326.42				71%	4 021			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			255.63				52%	2 945			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 211.57					17 689			
42.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.04	775.58	765.14	10.44	31.02	30.61	0.42	14.41	8.53	445	441	4	
					4.13			0.17	1	16.83			3	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			22.78				63%	280			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15.39				40%	178			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.19					902			
43.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.04	12 984.16	894.28	10.83	519.37	35.77	0.43	14.41	7.52	1 408	515	3	
				12 079.05	1.14		483.16	0.05	1.84	14.29		889	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			41.19				98%	506			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			25.43				56%	289			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					586.00					2 203			
44.	Цена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	4	426.23			1 704.92			1	1	7 280			
				426.23			1 704.92		4.27	1		7 280		
	Поправки: М: =1750*1.04/4.27	
45.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	4	88.07	12.17		352.28	48.68		14.41	1	1 527	701		
				75.90			303.60		2.72	1		826		
	Накладные расходы		103%			50.14				88%	617			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.21				48%	336			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					431.63					2 480			
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия ( кровельного скоса в лестничной клетке)	
46.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя ( применительно), 1 м3 утеплителя	2.25	47.52	20.14	27.38	106.92	45.31	61.61	14.4	6.2	1 034	652	382	
					3.42			7.70	2.08	14.4			111	
	Объем: 15*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			57.25				92%	702			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			29.16				44%	336			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					193.33					2 072			
47.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.15	286.73	122.64	1.26	43.01	18.40	0.19	14.4	8.27	339	265	2	
				162.83			24.42		2.96	1		72		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			17.11				79%	209			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			11.78				51%	135			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.90					684			
48.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	18.75	7.04			132.00					420			
				7.04			132.00		22.38			420		
	Объем: 15*1.25													
49.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	2.25	202.86	119.97	82.89	456.42	269.93	186.50	14.4	8.09	5 396	3 887	1 509	
									17.69	1				
	Объем: 15*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			242.94				77%	2 993			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			161.96				48%	1 866			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					861.32					10 255			
50.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	45.9	26.54			1 218.19					3 977			
				26.54			1 218.19		86.65			3 977		
	Объем: 15*3*1.02													
51.	Т01-01-01-041 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	25.38	66.71		66.71	1 693.10		1 693.10	1	6.28	10 633		10 633	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
52.	Т03-21-01-015 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	25.38	18.71		18.71	474.78		474.78	1	6.28	2 982		2 982	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	209 378.49	24 953.13	6 455.96			1 059 850	359 401	40 327	
			177 969.42	226.29				660 125	3 381	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	205 796.76	24 761.27	4 263.00			1 037 398	356 637	26 575	
			176 772.50	226.07				654 189	3 377	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	42 952.72					167 788			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 14; %=71 - по стр. 2-6, 17, 21, 23, 28, 34, 37-41; %=73 - по стр. 7; %=66 - по стр. 8, 10, 12; %=67 - по стр. 15; %=80 - по стр. 16, 33; %=90 - по стр. 18, 35; %=92 - по стр. 22, 29, 31, 32, 46; %=77 - по стр. 24, 49; %=79 - по стр. 26, 47)	21 799.02					267 599			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 14, 24, 49; %=52 - по стр. 2-6, 17, 21, 23, 28, 34, 37-41; %=56 - по стр. 7; %=50 - по стр. 8, 10, 12; %=40 - по стр. 15; %=37 - по стр. 16, 33; %=43 - по стр. 18, 35; %=44 - по стр. 22, 29, 31, 32, 46; %=51 - по стр. 26, 47)	15 536.67					178 786			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	243 132.45					1 483 783			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 413.85	191.86	25.08			8 837	2 764	137	
			1 196.92	0.22				5 936	4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 20, 43; %=63 - по стр. 42; %=88 - по стр. 45)	202.43					2 487			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 20, 43; %=40 - по стр. 42; %=48 - по стр. 45)	124.56					1 423			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 740.84					12 747			
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -	1 693.10		1 693.10			10 633		10 633	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -	1 693.10					10 633			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	246 566.39					1 507 163			
	Строительный контроль 2,14%	5 276.52					32 253			
	Итого со строительным контролем	251 842.91					1 539 416			
	Непредвиденные расходы 2%	5 036.86					30 788			
	Итого с непредвиденными расходами	256 879.77					1 570 204			
	НДС	46 238.36					282 637			
	Всего с НДС	303 118.13					1 852 841			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	22 001.45					270 086			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	15 661.23					180 209			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)