«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	12 351 394	руб.	Смета на сумму:	12 351 394	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.О. Манойло /	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
	
на капитальный ремонт фасада с утеплением, МКД №10-24 по ул. Березовая, г.Калининград	
Сметная стоимость:	12 351.394	тыс. руб.	
монтажных работ:	40.035	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	12.718	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 246.945	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2		29.5	9 945.52	293 393	
		Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	2.065	236.670	489	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	52.2	1539.9	167.930	258 595	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	2.065	1 080.04	2 230	
			(1)			236.67	489	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	4.08	120.36	270.58	32 567	
		Накладные расходы				110%	284 992	
		Сметная прибыль				68%	176 177	
		Всего с НР и СП					754 563	
	
2.	01.7.16.02-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		1.0325	131 574.69	135 851	
		Объем: (29.5)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.2655	10 800.13	2 867	
		Объем: (29.5)*0.009						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.3	912.71	274	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	1.647	166.250	274	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.0018			
		Накладные расходы				78%	214	
		Сметная прибыль				50%	137	
		Всего с НР и СП					625	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.3	24 232.51	7 270	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	2.496	295.070	736	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	6.24	174.220	1 087	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	2.496	2 378.72	5 937	
			(1)			295.07	736	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.12	2 044.45	245	
		Накладные расходы				78%	1 422	
		Сметная прибыль				50%	912	
		Всего с НР и СП					9 603	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных (в т.ч. откосы)	100 м2		22.06	3 459.28	76 312	
		Объем: 2066+140						
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	503.4092	151.590	76 312	
		Накладные расходы				99%	75 549	
		Сметная прибыль				60%	45 787	
		Всего с НР и СП					197 648	
	
7.	ГЭСНр 53-16-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		1.7	5 777.40	9 822	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.731	276.630	202	
7. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	60.163	155.780	9 372	
7. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.34	951.88	324	
			(1)			276.63	94	
7. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.391	317.68	124	
			(1)			276.63	108	
7. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0748	20.52	2	
		Накладные расходы				86%	8 234	
		Сметная прибыль				70%	6 702	
		Всего с НР и СП					24 757	
	
8.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.6834	14 291.11	9 767	
		Объем: (1.7)*(0.402)						
	
9.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.4301	2 824.83	1 215	
		Объем: (1.7)*(0.253)						
	
10.	ГЭСНр 53-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		15	472.34	7 085	
10. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	40.65	174.220	7 082	
10. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.15	20.52	3	
		Накладные расходы				86%	6 091	
		Сметная прибыль				70%	4 957	
		Всего с НР и СП					18 133	
	
11.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.3	3 069.65	921	
		Объем: (15)*0.02						
	
12.	ГЭСНр 53-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.3	65 184.46	19 555	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.3	276.630	83	
12. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	119.295	161.500	19 266	
12. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.3	951.88	286	
			(1)			276.63	83	
12. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.177	20.52	4	
12. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	7.44			
		Накладные расходы				86%	16 640	
		Сметная прибыль				70%	13 544	
		Всего с НР и СП					49 739	
	
13.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.72	2 824.83	2 034	
		Объем: (0.3)*2.4						
	
14.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		1.56	14 335.89	22 364	
		Объем: (0.3)*5.2						
	
15.	ГЭСН 15-01-080-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2		20.5	168 191.98	3 447 936	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.28	579.74	268.039	155 393	
15. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	361.17	7403.985	174.220	1 289 922	
15. 3.	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6.08	124.64	439.79	54 815	
			(1)			236.67	29 499	
15. 4.	91.06.05-052	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	11.1	227.55	795.13	180 932	
			(1)			276.63	62 947	
15. 5.	91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	11.1	227.55	1 434.61	326 446	
			(1)			276.63	62 947	
15. 6.	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0.2	4.1	41.70	171	
15. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	2.05	20.52	42	
15. 8.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	4.492	92.086	247.72	22 812	
15. 9.	01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.89	18.245	7.55	138	
15. 10.	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	120	2460	49.15	120 909	
15. 11.	01.7.15.08-0003	Заклепка СТД-985	кг	0.006	0.123	229.97	28	
15. 12.	01.7.17.09-0061	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0.36	7.38	658.71	4 861	
15. 13.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	134.75	2762.375	40.13	110 854	
15. 14.	04.3.02.09-1526	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	400	8200	29.81	244 442	
15. 15.	07.2.06.06-0072	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м	3.26	66.83	96.79	6 468	
15. 16.	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0.004	0.082	58 942.11	4 833	
15. 17.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	123	20.77	2 555	
15. 18.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	12300	21.37	262 851	
15. 19.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831.95	17054.975	24.27	413 924	
15. 20.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44.92	920.86	284.65	262 123	
15. 21.	14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25.42	521.11	173.15	90 230	
15. 22.	14.4.01.15-0004	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12.71	260.555	130.50	34 002	
15. 23.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.96	40.18	362.78	14 577	
		Накладные расходы				95%	1 373 049	
		Сметная прибыль				47%	679 298	
		Всего с НР и СП					5 500 283	
	
16.	12.2.05.02-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3		229.6	4 962.00	1 139 275	
		Объем: 20.5*11.2						
	
17.	ГЭСНр 58-20-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		3	7 894.95	23 685	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.36	263.310	95	
17. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	124.23	166.250	20 653	
17. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.24	317.68	76	
			(1)			276.63	66	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.12	1 080.04	130	
			(1)			236.67	28	
17. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.012	61 618.16	739	
17. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.018	115 908.09	2 086	
17. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.672			
		Накладные расходы				83%	17 221	
		Сметная прибыль				65%	13 486	
		Всего с НР и СП					54 392	
	
18.	08.3.05.05-0081 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.552	62 757.96	34 642	
		Объем: (3.0)*(0.184)						
	
19.	14.5.01.05-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		38	344.41	13 088	
		Объем: 300*7.5/60						
	
20.	ГЭСНр 58-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		2.31	10 258.88	23 698	
20. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	139.524	167.930	23 430	
20. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.00231	115 908.09	268	
		Накладные расходы				83%	19 447	
		Сметная прибыль				65%	15 230	
		Всего с НР и СП					58 374	
	
21.	ГЭСНр 58-22-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		1.9	11 468.87	21 791	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.019	236.670	4	
21. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	71.82	158.710	11 399	
21. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.019	1 080.04	21	
			(1)			236.67	4	
21. 4.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.092	0.1748	58 831.13	10 284	
21. 5.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.0004	0.00076	115 908.09	88	
21. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.01	0.019			
		Накладные расходы				83%	9 464	
		Сметная прибыль				65%	7 412	
		Всего с НР и СП					38 667	
	
22.	ГЭСН 13-06-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками	м2		6	149.63	898	
22. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	5.4	166.250	898	
		Накладные расходы				81%	727	
		Сметная прибыль				60%	539	
		Всего с НР и СП					2 164	
	
23.	ГЭСН 15-04-030-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Масляная окраска металлических поверхностей: пожарной лестницы., количество окрасок 2	100 м2		0.06	12 692.01	762	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0024	246.660	1	
23. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	71.06	4.2636	172.120	734	
23. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0006	317.68		
			(1)			276.63		
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0018	1 080.04	2	
			(1)			236.67		
23. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.3	0.018	41.34	1	
23. 6.	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2.7	0.162	153.03	25	
		Накладные расходы				95%	698	
		Сметная прибыль				47%	345	
		Всего с НР и СП					1 806	
	
24.	14.4.02.04-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска для наружных работ: коричневая	т		0.0015	79 949.23	120	
		Объем: (0.06)*0.0246						
	
25.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.06	2 233.44	134	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0012	221.300		
25. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.3186	206.910	66	
25. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0006	11.72		
25. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0006	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
25. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0006	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
25. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0672	20.00	1	
25. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00072	75 972.52	55	
25. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00012	89 619.66	11	
		Накладные расходы				81%	53	
		Сметная прибыль				60%	40	
		Всего с НР и СП					227	
	
26.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.06	2 706.43	162	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0012	221.300		
26. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.2298	176.450	41	
26. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0006	11.72		
26. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0006	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
26. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0006	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
26. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.039	20.00	1	
26. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00114	99 822.46	114	
26. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000084	71 114.10	6	
		Накладные расходы				81%	33	
		Сметная прибыль				60%	25	
		Всего с НР и СП					220	
	
27.	ГЭСН 20-02-002-08 
(Приказ № 1575/пр от 24.11.2017 
прим)	Демонтаж пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0.61	3 316.44	2 023	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0184	0.011224	241.882	3	
27. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19.84	12.1024	166.250	2 012	
27. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0024	0.001464	317.68		
			(1)			276.63		
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.016	0.00976	1 080.04	11	
			(1)			236.67	2	
		Накладные расходы				115%	2 317	
		Сметная прибыль				71%	1 431	
		Всего с НР и СП					5 771	
	
28.	ГЭСН 20-02-002-08 
(Приказ № 1575/пр от 24.11.2017 
прим)	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0.61	5 455.73	3 328	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.023	0.01403	241.882	3	
28. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24.8	15.128	166.250	2 515	
28. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.003	0.00183	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
28. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0122	1 080.04	13	
			(1)			236.67	3	
28. 5.	01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	4.04	2.4644	40.07	99	
28. 6.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	2.1267	1.297287	539.94	700	
		Накладные расходы				115%	2 896	
		Сметная прибыль				71%	1 788	
		Всего с НР и СП					8 011	
	
29.	С1 цена поставщ.	Пластиковая вентиляционная решетка 154х154мм	шт		61	110.00	6 710	
		Поправки: М: =132/1.2	
	
30.	ГЭСНр 60-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	100 м		0.1082	27 367.40	2 961	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.98	0.430636	276.630	119	
30. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	164.47	17.795654	158.710	2 824	
30. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.98	0.430636	317.68	137	
			(1)			276.63	119	
30. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	31.1	3.36502			
		Накладные расходы				78%	2 296	
		Сметная прибыль				63%	1 854	
		Всего с НР и СП					7 111	
	
31.	ГЭСН 46-04-001-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка: кирпичных стен (атиков)	м3		11.5	1 552.91	17 858	
31. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	94.76	172.120	16 310	
31. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	13.225	98.14	1 298	
31. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	26.45	9.47	250	
		Накладные расходы				99%	16 147	
		Сметная прибыль				60%	9 786	
		Всего с НР и СП					43 791	
	
32.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: атиков	100 м2		0.07	17 926.25	1 255	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.1946	182.880	36	
32. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	4.9616	187.210	929	
32. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.063	15.18	1	
32. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.1946	277.68	54	
			(1)			182.88	36	
32. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0245	20.52	1	
32. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.1323	2 044.45	270	
		Накладные расходы				95%	917	
		Сметная прибыль				47%	454	
		Всего с НР и СП					2 625	
	
33.	ГЭСН 12-01-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали , атики	100 м2		0.1	66 227.08	6 623	
		Объем: 25*0.4						
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.027	266.270	7	
33. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	11.275	166.250	1 874	
33. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.02	1 078.07	22	
			(1)			276.63	6	
33. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.007	1 080.04	8	
			(1)			236.67	2	
33. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.0004	57 234.39	23	
33. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.0012	112 165.79	135	
33. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.0782	58 332.80	4 562	
		Накладные расходы				108%	2 031	
		Сметная прибыль				55%	1 035	
		Всего с НР и СП					9 689	
	
	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ	
34.	ГЭСН 46-04-008-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		0.02	2 537.61	51	
34. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	0.318	151.590	48	
34. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	0.092	27.68	3	
		Накладные расходы				99%	48	
		Сметная прибыль				60%	29	
		Всего с НР и СП					127	
	
35.	ГЭСН 12-01-007-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам	100 м2		0.02	13 385.37	268	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.19	0.0238	263.198	6	
35. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	47.23	0.9446	167.930	159	
35. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.5	0.01	1 078.07	11	
			(1)			276.63	3	
35. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.29	0.0058	951.88	6	
			(1)			276.63	2	
35. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.008	1 080.04	9	
			(1)			236.67	2	
35. 6.	01.7.15.02-0062	Болты оцинкованные диаметром резьбы: 8 мм	т	0.004	0.00008	110 239.12	9	
35. 7.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00014	0.0000028	61 618.16		
35. 8.	08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0.027	0.00054	79 246.16	43	
35. 9.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.027	0.00054	58 332.80	31	
35. 10.	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	1.58	0.0316	27.04	1	
		Накладные расходы				108%	178	
		Сметная прибыль				55%	91	
		Всего с НР и СП					537	
	
36.	01.1.02.07-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Примеси волокнистых веществ	кг		0.002	109.81		
		Объем: (0.02)*0.1						
	
37.	04.3.01.09-0012 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3		0.0004	2 732.53	1	
		Объем: (0.02)*0.02						
	
	Козырек из поликарбоната	
38.	ГЭСН 09-03-022-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Демонтаж козырька из поликарбонатных (б/у)	100 м2		0.02	33 620.24	672	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14.8	0.296	275.356	82	
38. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	90.408	1.80816	182.740	330	
38. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.264	0.00528	951.88	5	
			(1)			276.63	1	
38. 4.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	14.064	0.28128	1 161.69	327	
			(1)			276.63	78	
38. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.472	0.00944	1 080.04	10	
			(1)			236.67	2	
		Накладные расходы				81%	334	
		Сметная прибыль				72%	297	
		Всего с НР и СП					1 302	
	
39.	ГЭСН 46-03-013-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.		0.04	831.25	33	
39. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	0.2	166.250	33	
		Накладные расходы				99%	33	
		Сметная прибыль				60%	20	
		Всего с НР и СП					85	
	
40.	ГЭСН 09-03-022-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Монтаж козырька из поликарбонатных (б/у)	100 м2		0.02	42 331.65	847	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.5	0.37	275.356	102	
40. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	113.01	2.2602	182.740	413	
40. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.33	0.0066	951.88	6	
			(1)			276.63	2	
40. 4.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	17.58	0.3516	1 161.69	408	
			(1)			276.63	97	
40. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.59	0.0118	1 080.04	13	
			(1)			236.67	3	
40. 6.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.001	0.00002	88 866.67	2	
40. 7.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000002	61 618.16		
40. 8.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000002	204 667.13		
40. 9.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.000374	349.64		
40. 10.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000006	48 518.73		
40. 11.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0000388	56 858.79	2	
40. 12.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000062	75 972.52		
40. 13.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000012	90 920.75	1	
		Накладные расходы				81%	417	
		Сметная прибыль				72%	371	
		Всего с НР и СП					1 635	
	
41.	01.7.19.04-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг		1.5	73.61	110	
	
42.	01.7.15.04-0045 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т		0.002	185 110.09	370	
	
	Карниз	
43.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: карниза	100 м2		1.8	3 459.28	6 227	
43. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	41.076	151.590	6 227	
		Накладные расходы				99%	6 165	
		Сметная прибыль				60%	3 736	
		Всего с НР и СП					16 128	
	
44.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.8	1 244.34	2 240	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.036	256.650	9	
44. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	11.79	187.210	2 207	
44. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.018	317.68	6	
			(1)			276.63	5	
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.018	1 080.04	19	
			(1)			236.67	4	
44. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.18	41.34	7	
		Накладные расходы				95%	2 105	
		Сметная прибыль				47%	1 042	
		Всего с НР и СП					5 387	
	
45.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		23.4	55.56	1 300	
		Объем: 1.8*0.013*1000						
		Поправки: М: =55.56	
	
46.	ГЭСНр 61-22-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2		0.5	111 162.06	55 581	
46. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	549.55	274.775	180.650	49 638	
46. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.78	0.89	11.72	10	
46. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.175	20.52	4	
46. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.8	2.9	2 044.45	5 929	
46. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	12.8	6.4			
		Накладные расходы				79%	39 214	
		Сметная прибыль				50%	24 819	
		Всего с НР и СП					119 614	
	
47.	ГЭСНр 61-28-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Нанесение клеевого состава по  сетке	100 м2		1.8	12 515.01	22 527	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.234	236.670	55	
47. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	146.88	151.590	22 266	
47. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.18	11.72	2	
47. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.234	1 080.04	253	
			(1)			236.67	55	
47. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.324	20.52	7	
		Накладные расходы				79%	17 634	
		Сметная прибыль				50%	11 161	
		Всего с НР и СП					51 321	
	
48.	01.8.01.06-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		198	32.49	6 433	
		Объем: 1.8*110						
	
49.	14.1.06.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)	т		0.045	13 160.76	592	
		Объем: 18*2.5/1000						
	
50.	ГЭСНр 61-1-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		1.8	8 155.75	14 680	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.522	276.630	144	
50. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35.73	64.314	162.900	10 477	
50. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.522	317.68	166	
			(1)			276.63	144	
50. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.63	20.52	13	
50. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0253	0.04554	88 380.23	4 025	
		Накладные расходы				79%	8 391	
		Сметная прибыль				50%	5 311	
		Всего с НР и СП					28 381	
	
51.	04.3.02.13-0364	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т		1.0224	2 177.22	2 226	
		Объем: (1.8)*0.568						
	
52.	ГЭСН 15-04-019-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен	100 м2		1.8	2 403.65	4 327	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.108	236.670	26	
52. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	23.292	180.650	4 208	
52. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.126	11.72	1	
52. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.108	1 080.04	117	
			(1)			236.67	26	
52. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.018	41.34	1	
		Накладные расходы				95%	4 022	
		Сметная прибыль				47%	1 990	
		Всего с НР и СП					10 339	
	
53.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая	кг		23.4	101.59	2 377	
		Объем: (1.8)*13						
	
54.	С2 цена поставщ.	Краска акриловая типа Marshall с колером	кг		68.4	170.00	11 628	
		Объем: 180*0.38						
		Поправки: М: =170	
	
	Перенавеска эл.кабеля	
55.	ГЭСНр 67-3-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м		1.4	1 464.50	2 050	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.014	276.630	4	
55. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	13.496	151.590	2 046	
55. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.014	317.68	4	
			(1)			276.63	4	
		Накладные расходы				85%	1 743	
		Сметная прибыль				65%	1 333	
		Всего с НР и СП					5 125	
	
56.	ГЭСНм 08-02-390-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		1.4	4 058.25	5 682	
		Начисления: Н17= 2	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.014	276.630	4	
56. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	28.462	184.980	5 265	
56. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.014	317.68	4	
			(1)			276.63	4	
56. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.56	180.86	101	
56. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.00196	104 906.34	206	
		Накладные расходы				95%	5 006	
		Сметная прибыль				65%	3 425	
		Всего с НР и СП					14 112	
	
57.	20.2.05.04-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель-канал 80x40 мм	100 м		1.428	14 129.59	20 177	
		Объем: 140*1.02						
	
58.	ГЭСНм 08-02-399-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		1.4	857.71	1 201	
		Начисления: Н17= 2	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.028	256.650	7	
58. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	5.264	182.740	962	
58. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.014	951.88	13	
			(1)			276.63	4	
58. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.014	1 080.04	15	
			(1)			236.67	3	
58. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.224	553.58	124	
58. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.077	755.61	58	
58. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.07	128.30	9	
		Накладные расходы				95%	921	
		Сметная прибыль				65%	630	
		Всего с НР и СП					2 751	
	
	Перенавеска газопровода	
59.	ГЭСН 24-02-100-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	10 шт.		0.7	9 291.21	6 504	
59. 1.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	29.16	20.412	201.320	4 109	
59. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	28.13	19.691	3.25	64	
59. 3.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	20.61	14.427	45.10	651	
59. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	10.58	7.406	51.61	382	
59. 5.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	10.84	7.588	48.38	367	
59. 6.	01.7.11.07-0055	Электроды диаметром: 6 мм Э42А	т	0.006	0.0042	54 894.74	231	
59. 7.	17.4.05.01-0051	Глина шамотная	кг	5.85	4.095	7.94	33	
59. 8.	23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	2.1	1.47	181.76	267	
59. 9.	23.8.04.01-0017	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	20	14	28.59	400	
		Накладные расходы				117%	4 808	
		Сметная прибыль				76%	3 123	
		Всего с НР и СП					14 434	
	
60.	ГЭСНр 65-1-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м		0.27	10 295.57	2 780	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0459	276.630	13	
60. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59.62	16.0974	161.500	2 600	
60. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17	0.0459	317.68	15	
			(1)			276.63	13	
60. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	1.539	3.25	5	
60. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.1998	473.37	95	
60. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	1.2771	51.61	66	
60. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.34	0.0918			
		Накладные расходы				74%	1 934	
		Сметная прибыль				50%	1 307	
		Всего с НР и СП					6 020	
	
61.	ГЭСН 16-02-003-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.27	9 011.36	2 433	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.06	0.2862	243.833	70	
61. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	39.16	10.5732	187.210	1 979	
61. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.12	0.0324	1 078.07	35	
			(1)			276.63	9	
61. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.07	0.0189	951.88	18	
			(1)			276.63	5	
61. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	0.2349	1 080.04	254	
			(1)			236.67	56	
61. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10.21	2.7567	3.25	9	
61. 7.	01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0.00044	0.0001188	486 483.60	58	
61. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.44	0.1188	51.61	6	
61. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.75	0.7425	20.52	15	
61. 10.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.03	0.0081	139.94	1	
61. 11.	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	0.0026	0.000702	53 979.97	38	
61. 12.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.002673	50.77		
61. 13.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00055	0.0001485	42 860.11	6	
61. 14.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00062	0.0001674	79 974.27	13	
		Накладные расходы				115%	2 356	
		Сметная прибыль				71%	1 455	
		Всего с НР и СП					6 244	
	
62.	18.1.10.01-0150 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами	шт.		7	3 470.77	24 295	
	
63.	23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м		27	181.76	4 908	
	
64.	ГЭСН 22-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	шт.		14	323.83	4 534	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	3.5	276.630	968	
64. 2.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	0.37	5.18	215.150	1 114	
64. 3.	91.17.04-033	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.25	3.5	952.34	3 333	
			(1)			276.63	968	
64. 4.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.0014	61 373.22	86	
		Накладные расходы				117%	2 436	
		Сметная прибыль				76%	1 582	
		Всего с НР и СП					8 552	
	
65.	23.8.03.11-0653	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.		14	213.86	2 994	
	
66.	ГЭСН 13-03-002-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К	100 м2		0.09	2 209.29	199	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0018	221.300		
66. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.4779	206.910	99	
66. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0009	11.72		
66. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0009	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
66. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0009	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
66. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.1008	20.00	2	
66. 7.	14.4.01.18-0002	Грунтовка: ФЛ-03К коричневая	т	0.009	0.00081	104 588.04	85	
66. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0014	0.000126	89 619.66	11	
		Накладные расходы				81%	80	
		Сметная прибыль				60%	59	
		Всего с НР и СП					339	
	
67.	ГЭСН 13-03-004-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785	100 м2		0.09	4 256.03	383	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0027	226.423	1	
67. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2.47	0.2223	176.450	39	
67. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0009	11.72		
67. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0009	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
67. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0018	1 080.04	2	
			(1)			236.67		
67. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0585	20.00	1	
67. 7.	14.4.04.09-0022	Эмаль ХВ-785 белая	т	0.022	0.00198	134 393.82	266	
67. 8.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.009	0.00081	90 920.75	74	
		Накладные расходы				81%	32	
		Сметная прибыль				60%	24	
		Всего с НР и СП					439	
	
68.	ГЭСН 24-02-090-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода 50 мм	10 шт.		0.7	13 569.54	9 499	
68. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	33.82	23.674	192.800	4 564	
68. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	22.47	15.729	3.25	51	
68. 3.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	17.45	12.215	45.10	551	
68. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	8.95	6.265	51.61	323	
68. 5.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	7.57	5.299	48.38	256	
68. 6.	01.7.11.07-0033	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	т	0.0043	0.00301	68 284.29	206	
68. 7.	17.4.05.01-0051	Глина шамотная	кг	510	357	7.94	2 835	
68. 8.	23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	5.6	3.92	181.76	712	
		Накладные расходы				117%	5 340	
		Сметная прибыль				76%	3 469	
		Всего с НР и СП					18 308	
	
	Цоколь	
69.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных	100 м2		2.62	3 459.28	9 063	
69. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	59.7884	151.590	9 063	
		Накладные расходы				99%	8 972	
		Сметная прибыль				60%	5 438	
		Всего с НР и СП					23 473	
	
70.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		2.62	1 244.34	3 260	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0524	256.650	13	
70. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	17.161	187.210	3 213	
70. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0262	317.68	8	
			(1)			276.63	7	
70. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0262	1 080.04	28	
			(1)			236.67	6	
70. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.262	41.34	11	
		Накладные расходы				95%	3 065	
		Сметная прибыль				47%	1 516	
		Всего с НР и СП					7 841	
	
71.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		34.06	55.56	1 892	
		Объем: 2.62*0.013*1000						
		Поправки: М: =55.56	
	
72.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: атиков	100 м2		2.62	17 926.25	46 967	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	7.2836	182.880	1 332	
72. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	185.7056	187.210	34 766	
72. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	2.358	15.18	36	
72. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	7.2836	277.68	2 023	
			(1)			182.88	1 332	
72. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.917	20.52	19	
72. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	4.9518	2 044.45	10 124	
		Накладные расходы				95%	34 293	
		Сметная прибыль				47%	16 966	
		Всего с НР и СП					98 226	
	
73.	ГЭСН 15-04-019-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		2.62	2 403.65	6 298	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.1572	236.670	37	
73. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	33.9028	180.650	6 125	
73. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.1834	11.72	2	
73. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.1572	1 080.04	170	
			(1)			236.67	37	
73. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0262	41.34	1	
		Накладные расходы				95%	5 854	
		Сметная прибыль				47%	2 896	
		Всего с НР и СП					15 048	
	
74.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая	кг		34.06	101.59	3 460	
		Объем: (2.62)*13						
	
75.	С3 цена поставщи.	Краска акриловая типа Маршал с колером	кг		99.56	170.00	16 925	
		Объем: (2.62)*38						
		Поправки: М: =170	
	
76.	ГЭСН 46-01-004-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами ( накладка уголков на перемычки)	т		0.15	45 131.93	6 770	
		Начисления: Н48= 0	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.45	0.9675	268.390	260	
76. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	195.63	29.3445	189.870	5 572	
76. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5.12	0.768	951.88	731	
			(1)			276.63	212	
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.33	0.1995	1 080.04	215	
			(1)			236.67	47	
76. 5.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.9	0.285	3.25	1	
76. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	37.06	5.559	45.10	251	
		Накладные расходы				99%	5 774	
		Сметная прибыль				60%	3 499	
		Всего с НР и СП					16 043	
	
77.	08.3.08.02-0022	Сталь угловая: 50х50 мм	т		0.15	48 057.11	7 209	
	
	ОКОННЫЕ БЛОКИ (МОП)	
78.	ГЭСН 46-04-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.383	32 091.68	12 291	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	2.96442	276.630	820	
78. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	72.21082	157.170	11 349	
78. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	2.96442	317.68	942	
			(1)			276.63	820	
		Накладные расходы				99%	12 047	
		Сметная прибыль				60%	7 301	
		Всего с НР и СП					31 640	
	
79.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0012	116 461.62	140	
		Объем: 0.4*0.3						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.0076752	249.865	2	
79. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	0.3111552	170.030	53	
79. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.0025344	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
79. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.0051408	1 080.04	6	
			(1)			236.67	1	
79. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	0.5148	22.23	11	
79. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.0852	21.15	2	
79. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.03252	247.72	8	
79. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.08568	95.64	8	
79. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.0096	404.09	4	
79. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	0.1368	344.41	47	
		Накладные расходы				106%	58	
		Сметная прибыль				54%	30	
		Всего с НР и СП					228	
	
80.	11.3.02.02-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		0.12	8 099.98	972	
	
81.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0814	116 461.62	9 480	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.5206344	249.865	130	
81. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	21.1066944	170.030	3 589	
81. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.1719168	317.68	55	
			(1)			276.63	48	
81. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.3487176	1 080.04	377	
			(1)			236.67	83	
81. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	34.9206	22.23	776	
81. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	5.7794	21.15	122	
81. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	2.20594	247.72	546	
81. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	5.81196	95.64	556	
81. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.6512	404.09	263	
81. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	9.2796	344.41	3 196	
		Накладные расходы				106%	3 942	
		Сметная прибыль				54%	2 008	
		Всего с НР и СП					15 430	
	
82.	11.3.02.02-0018 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2		8.14	4 493.51	36 577	
		Объем: 1.25*0.93*7						
	
83.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.2995	116 461.62	34 880	
		Объем: 1.17*1.6*16						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	1.915602	249.865	479	
83. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	77.659152	170.030	13 204	
83. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.632544	317.68	201	
			(1)			276.63	175	
83. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	1.283058	1 080.04	1 386	
			(1)			236.67	304	
83. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	128.4855	22.23	2 856	
83. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	21.2645	21.15	450	
83. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	8.11645	247.72	2 011	
83. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	21.3843	95.64	2 045	
83. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	2.396	404.09	968	
83. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	34.143	344.41	11 759	
		Накладные расходы				106%	14 504	
		Сметная прибыль				54%	7 389	
		Всего с НР и СП					56 773	
	
84.	11.3.02.02-0024 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	м2		29.95	3 786.31	113 400	
	
85.	ГЭСН 10-01-035-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.25	25 547.03	6 387	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.228	0.057	245.083	14	
85. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25.428	6.357	166.250	1 057	
85. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.012	317.68	4	
			(1)			276.63	3	
85. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.045	1 080.04	49	
			(1)			236.67	11	
85. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	1	404.09	404	
85. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	14.15	344.41	4 873	
		Накладные расходы				106%	1 135	
		Сметная прибыль				54%	578	
		Всего с НР и СП					8 101	
	
86.	11.3.03.01-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м		25	226.39	5 660	
	
87.	ГЭСН 15-02-024-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.3	44 733.72	13 420	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.336	1.0008	219.343	220	
87. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	207.936	62.3808	170.030	10 607	
87. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	0.1116	317.68	35	
			(1)			276.63	31	
87. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2.364	0.7092	231.24	164	
			(1)			205.93	146	
87. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	0.18	1 080.04	194	
			(1)			236.67	43	
87. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.0006	56 030.59	34	
87. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.513	331.67	170	
87. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.147	8 729.67	1 283	
87. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.009	2 393.49	22	
87. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.00144	632 697.28	911	
		Накладные расходы				95%	10 286	
		Сметная прибыль				47%	5 089	
		Всего с НР и СП					28 794	
	
88.	01.6.01.02-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2		31.5	73.11	2 303	
		Объем: (0.3)*(105.0)						
	
89.	07.2.06.03-0228 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м		85	11.89	1 011	
	
90.	ГЭСН 15-04-027-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску	100 м2		0.3	4 310.85	1 293	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0144	246.660	4	
90. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	14.388	4.3164	184.980	798	
90. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0036	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
90. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.0108	1 080.04	12	
			(1)			236.67	3	
90. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	1.32	148.81	196	
90. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.045	41.34	2	
90. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0087	32 610.22	284	
		Накладные расходы				95%	762	
		Сметная прибыль				47%	377	
		Всего с НР и СП					2 432	
	
91.	ГЭСН 15-04-007-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	100 м2		0.3	7 166.47	2 150	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.0396	236.670	9	
91. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	39.276	11.7828	172.120	2 028	
91. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.012	0.0036	273.05	1	
			(1)			236.67	1	
91. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.036	1 080.04	39	
			(1)			236.67	9	
91. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.252	148.81	38	
91. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.093	41.34	4	
91. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.005	0.0015	27 116.62	41	
		Накладные расходы				95%	1 935	
		Сметная прибыль				47%	957	
		Всего с НР и СП					5 043	
	
92.	14.3.02.03-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224	т		0.009	39 905.81	359	
		Объем: (0.3)*0.03						
	
93.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая	кг		6	101.59	610	
		Объем: (0.3)*20.0						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					5 898 585	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					30 054	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					23 171	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 56, 58)					5 926	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 56, 58)					4 055	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					40 035	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 826 234	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 550 803	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5, 30; %=99 - по стр. 6, 31, 34, 39, 43, 69, 76, 78; %=86 - по стр. 7, 10, 12; %=95 - по стр. 15, 23, 32, 44, 52, 70, 72, 73, 87, 90, 91; %=83 - по стр. 17, 20, 21; %=81 - по стр. 22, 25, 26, 66, 67; %=108 - по стр. 33, 35; %=79 - по стр. 46, 47, 50; %=85 - по стр. 55; %=117 - по стр. 59, 64, 68; %=106 - по стр. 79, 81, 83, 85)					2 030 080	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 46, 47, 50; %=60 - по стр. 6, 22, 25, 26, 31, 34, 39, 43, 66, 67, 69, 76, 78; %=70 - по стр. 7, 10, 12; %=47 - по стр. 15, 23, 32, 44, 52, 70, 72, 73, 87, 90, 91; %=65 - по стр. 17, 20, 21, 55; %=63 - по стр. 30; %=55 - по стр. 33, 35; %=76 - по стр. 59, 64, 68; %=54 - по стр. 79, 81, 83, 85)					1 089 550	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 945 864	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 530	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 38, 40)					751	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 38, 40)					667	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 948	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					39 767	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 27, 28, 61; %=74 - по стр. 60)					9 503	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 27, 28, 61; %=50 - по стр. 60)					5 980	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					55 250	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					9 045 097	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	193 565	
	Итого со строительным контролем					9 238 662	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	184 773	
	Итого с непредвиденными расходами					9 423 435	
	НДС 20%				20	1 884 687	
	ВСЕГО С НДС					11 308 122	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 046 260	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 100 252	
	
	Раздел 2.  Дверные блоки в подъезды (двор)	
	
94.	ГЭСН 46-04-012-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2		0.16	18 790.38	3 006	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.2384	276.630	343	
94. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	16.6256	157.170	2 613	
94. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.2384	317.68	393	
			(1)			276.63	343	
		Накладные расходы				99%	2 926	
		Сметная прибыль				60%	1 774	
		Всего с НР и СП					7 706	
	
95.	ГЭСН 09-04-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		16	1 030.62	16 490	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	3.264	236.670	772	
95. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.88	46.08	192.800	8 884	
95. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.204	3.264	1 080.04	3 525	
			(1)			236.67	772	
95. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.48	7.68	45.10	346	
95. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.0016	61 373.22	98	
95. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.048	63 653.21	3 055	
95. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	1.6	362.78	580	
		Накладные расходы				81%	7 821	
		Сметная прибыль				72%	6 952	
		Всего с НР и СП					31 264	
	
96.	С КСМ 2019г.	07.1.01.03-0000-002   Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, с утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		16	12 597.80	201 565	
		Поправки: М: =12597.80	
	
97.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.12	55 517.88	6 662	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.29664	276.630	82	
97. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	29.38464	180.650	5 308	
97. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.29664	317.68	94	
			(1)			276.63	82	
97. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.516	2 393.49	1 235	
97. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.012	2 044.45	25	
		Накладные расходы				95%	5 121	
		Сметная прибыль				47%	2 533	
		Всего с НР и СП					14 316	
	
98.	ГЭСН 15-04-007-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2		0.12	10 609.53	1 273	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.02448	236.670	6	
98. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52.272	6.27264	170.030	1 067	
98. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.024	0.00288	273.05	1	
			(1)			236.67	1	
98. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0216	1 080.04	23	
			(1)			236.67	5	
98. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.1008	148.81	15	
98. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.0372	41.34	2	
98. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.00612	27 116.62	166	
		Накладные расходы				95%	1 019	
		Сметная прибыль				47%	504	
		Всего с НР и СП					2 797	
	
99.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		2.4	101.59	244	
		Объем: (0.12)*20.0						
	
100.	14.3.02.03-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая	т		0.0036	39 905.81	144	
		Объем: (0.12)*0.03						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					229 384	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					212 894	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					201 953	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 94; %=95 - по стр. 97, 98)					9 066	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 94; %=47 - по стр. 97, 98)					4 811	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					226 771	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					16 490	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 95)					7 821	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 95)					6 952	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					31 263	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					258 034	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	5 522	
	Итого со строительным контролем					263 556	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	5 271	
	Итого с непредвиденными расходами					268 827	
	НДС 20%				20	53 765	
	ВСЕГО С НДС					322 592	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					16 887	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					11 763	
	
	Раздел 3.  Плиты балконов (22шт)	
	
101.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.55	3 459.28	1 903	
101. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	12.551	151.590	1 903	
		Накладные расходы				99%	1 884	
		Сметная прибыль				60%	1 142	
		Всего с НР и СП					4 929	
	
102.	ГЭСН 13-06-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками (металлич. балки)	м2		21	149.63	3 142	
102. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	18.9	166.250	3 142	
		Накладные расходы				81%	2 545	
		Сметная прибыль				60%	1 885	
		Всего с НР и СП					7 572	
	
103.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.21	2 233.44	469	
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0042	221.300	1	
103. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	1.1151	206.910	231	
103. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0021	11.72		
103. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0021	1 052.49	2	
			(1)			205.93		
103. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0021	1 080.04	2	
			(1)			236.67		
103. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.2352	20.00	5	
103. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00252	75 972.52	191	
103. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00042	89 619.66	38	
		Накладные расходы				81%	188	
		Сметная прибыль				60%	139	
		Всего с НР и СП					796	
	
104.	ГЭСН 26-01-048-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство на плоских поверхностях каркаса: из сетки	100 м2		0.71	2 657.68	1 887	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.3976	236.670	94	
104. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11.2	7.952	166.250	1 322	
104. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.3976	1 080.04	429	
			(1)			236.67	94	
104. 4.	08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	0.003	0.00213	63 619.98	136	
		Накладные расходы				90%	1 274	
		Сметная прибыль				60%	850	
		Всего с НР и СП					4 011	
	
105.	08.1.02.17-0033 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2		74.55	105.42	7 859	
		Объем: 71*1.05						
	
106.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню	100 м2		0.71	17 926.25	12 728	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.9738	182.880	361	
106. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	50.3248	187.210	9 421	
106. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.639	15.18	10	
106. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.9738	277.68	548	
			(1)			182.88	361	
106. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.2485	20.52	5	
106. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	1.3419	2 044.45	2 743	
		Накладные расходы				95%	9 293	
		Сметная прибыль				47%	4 598	
		Всего с НР и СП					26 618	
	
107.	ГЭСН 15-04-019-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен	100 м2		0.71	2 403.65	1 707	
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0426	236.670	10	
107. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	9.1874	180.650	1 660	
107. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0497	11.72	1	
107. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0426	1 080.04	46	
			(1)			236.67	10	
107. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0071	41.34		
		Накладные расходы				95%	1 587	
		Сметная прибыль				47%	785	
		Всего с НР и СП					4 078	
	
108.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая	кг		9.23	101.59	938	
		Объем: (0.71)*13						
	
109.	С4 цена поставщ.	Краска акриловая типа Marshall с колером	кг		26.98	170.00	4 587	
		Объем: 71*0.38						
		Поправки: М: =170	
	
110.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.55	5 228.75	2 876	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.016	0.5588	276.630	155	
110. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	31.608	17.3844	154.380	2 684	
110. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.016	0.5588	317.68	178	
			(1)			276.63	155	
110. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7.256	3.9908	3.63	14	
		Накладные расходы				111%	3 151	
		Сметная прибыль				64%	1 817	
		Всего с НР и СП					7 844	
	
111.	ГЭСН 11-01-011-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать до 35мм к норме 11-01-011-01	100 м2		-0.55	365.58	-201	
		Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 0	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.504	-0.2772	276.630	-77	
111. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	1.2	-0.66	154.380	-102	
111. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.504	-0.2772	317.68	-88	
			(1)			276.63	-77	
111. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.568	-3.0624	3.63	-11	
		Накладные расходы				111%	-199	
		Сметная прибыль				64%	-115	
		Всего с НР и СП					-514	
	
112.	ГЭСН 11-01-004-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (в т.ч. ступень/порог выхода на балкон)	100 м2		0.55	26 216.03	14 419	
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.98	0.539	252.572	136	
112. 2.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	46.18	25.399	219.070	5 564	
112. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.39	0.2145	317.68	68	
			(1)			276.63	59	
112. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	8.05	4.4275	118.29	524	
112. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.59	0.3245	1 080.04	350	
			(1)			236.67	77	
112. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	6	3.3	2.65	9	
112. 7.	01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.0077	30 781.65	237	
112. 8.	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.03135	23 208.05	728	
112. 9.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.15895	25 148.77	3 997	
112. 10.	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.095	0.05225	42 913.20	2 242	
112. 11.	01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.12705	5 415.16	688	
112. 12.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.275	41.34	11	
		Накладные расходы				111%	6 327	
		Сметная прибыль				64%	3 648	
		Всего с НР и СП					24 394	
	
113.	12.1.02.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гидроизол	м2		63.8	79.00	5 040	
		Объем: (0.55)*116.0						
	
114.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (в т.ч. ступень/порог выхода на балкон)	100 м2		0.55	6 607.75	3 634	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.6985	276.630	193	
114. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	21.7305	154.380	3 355	
114. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.6985	317.68	222	
			(1)			276.63	193	
114. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	4.9885	3.63	18	
114. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	1.925	20.52	40	
		Накладные расходы				111%	3 938	
		Сметная прибыль				64%	2 271	
		Всего с НР и СП					9 843	
	
115.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		1.122	3 069.65	3 444	
		Объем: (0.55)*2.04						
	
116.	ГЭСН 11-01-011-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 35мм или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2		0.55	456.97	251	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.3465	276.630	96	
116. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	1.5	0.825	154.380	127	
116. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.63	0.3465	317.68	110	
			(1)			276.63	96	
116. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6.96	3.828	3.63	14	
		Накладные расходы				111%	248	
		Сметная прибыль				64%	143	
		Всего с НР и СП					641	
	
117.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.8415	3 069.65	2 583	
		Объем: (0.55)*0.51						
		Начисления: Н48= 3	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					67 266	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					67 266	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					24 451	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 101; %=81 - по стр. 102, 103; %=90 - по стр. 104; %=95 - по стр. 106, 107; %=111 - по стр. 110-112, 114, 116)					30 236	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 101-104; %=47 - по стр. 106, 107; %=64 - по стр. 110-112, 114, 116)					17 162	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					114 664	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					114 664	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	2 454	
	Итого со строительным контролем					117 118	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	2 342	
	Итого с непредвиденными расходами					119 460	
	НДС 20%				20	23 892	
	ВСЕГО С НДС					143 352	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					30 236	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					17 162	
	
	Раздел 4.  Устройство балконов	
	
118.	ГЭСН 13-06-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками	м2		100	149.63	14 963	
118. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	90	166.250	14 963	
		Накладные расходы				81%	12 120	
		Сметная прибыль				60%	8 978	
		Всего с НР и СП					36 061	
	
119.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) , ограждения	100 м2		1	4 466.89	4 467	
		Поправки: ПЗ: *2	
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02	221.300	4	
119. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	5.31	206.910	1 099	
119. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.01	11.72		
119. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	1 052.49	11	
			(1)			205.93	2	
119. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	1 080.04	11	
			(1)			236.67	2	
119. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	1.12	20.00	22	
119. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.012	75 972.52	912	
119. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.002	89 619.66	179	
		Накладные расходы				81%	1 787	
		Сметная прибыль				60%	1 324	
		Всего с НР и СП					7 577	
	
120.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) , ограждения	100 м2		1	5 412.86	5 413	
		Поправки: ПЗ: *2	
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02	221.300	4	
120. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	3.83	176.450	676	
120. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.01	11.72		
120. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	1 052.49	11	
			(1)			205.93	2	
120. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	1 080.04	11	
			(1)			236.67	2	
120. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.65	20.00	13	
120. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.019	99 822.46	1 897	
120. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0014	71 114.10	100	
		Накладные расходы				81%	1 102	
		Сметная прибыль				60%	817	
		Всего с НР и СП					7 332	
	
	УСИЛЕНИЕ ПЛИТЫ БП-1 (6 ШТ)	
121.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.84	912.71	767	
121. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	4.6116	166.250	767	
121. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00504			
		Накладные расходы				78%	598	
		Сметная прибыль				50%	384	
		Всего с НР и СП					1 749	
	
122.	ГЭСНр 69-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		0.84	877.80	737	
122. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.28	4.4352	166.250	737	
122. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00504			
		Накладные расходы				78%	575	
		Сметная прибыль				50%	369	
		Всего с НР и СП					1 680	
	
123.	ГЭСНр 69-2-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		0.84	1 049.04	881	
123. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.31	5.3004	166.250	881	
123. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.003	0.00252			
		Накладные расходы				78%	687	
		Сметная прибыль				50%	441	
		Всего с НР и СП					2 009	
	
124.	С5 цена поставщ.	Анкерный болт с гайкой М12х150	шт		84	63.75	5 355	
		Поправки: М: =63.75	
	
125.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м  (усиление)	т		1.176	17 536.82	20 623	
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	4.71576	275.695	1 300	
125. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	74.41728	170.030	12 653	
125. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.1176	1 704.86	200	
			(1)			315.05	37	
125. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.14112	951.88	134	
			(1)			276.63	39	
125. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	4.2336	1 161.69	4 918	
			(1)			276.63	1 171	
125. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.22344	1 080.04	241	
			(1)			236.67	53	
125. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	1.71696	3.25	6	
125. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.1176	116.66	14	
125. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	1.4112	51.61	73	
125. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.42336	48.38	20	
125. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.00051744	61 373.22	32	
125. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.024696	88 866.67	2 195	
125. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00001176	61 618.16	1	
125. 14.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.0002352	121 582.68	29	
125. 15.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00003528	48 518.73	2	
125. 16.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00121128	11 512.94	14	
125. 17.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00036456	75 972.52	28	
125. 18.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0007056	90 920.75	64	
		Накладные расходы				81%	11 302	
		Сметная прибыль				72%	10 046	
		Всего с НР и СП					41 971	
	
126.	08.3.08.02-0045 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т		1.176	46 225.36	54 361	
	
127.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)	100 м2		0.312	4 466.89	1 394	
		Поправки: ПЗ: *2	
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00624	221.300	1	
127. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	1.65672	206.910	343	
127. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00312	11.72		
127. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00312	1 052.49	3	
			(1)			205.93	1	
127. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00312	1 080.04	3	
			(1)			236.67	1	
127. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.34944	20.00	7	
127. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.003744	75 972.52	284	
127. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000624	89 619.66	56	
		Накладные расходы				81%	558	
		Сметная прибыль				60%	413	
		Всего с НР и СП					2 365	
	
128.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.312	2 706.43	844	
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00624	221.300	1	
128. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	1.19496	176.450	211	
128. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00312	11.72		
128. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00312	1 052.49	3	
			(1)			205.93	1	
128. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00312	1 080.04	3	
			(1)			236.67	1	
128. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.2028	20.00	4	
128. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.005928	99 822.46	592	
128. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0004368	71 114.10	31	
		Накладные расходы				81%	172	
		Сметная прибыль				60%	127	
		Всего с НР и СП					1 143	
	
	УСИЛЕНИЕ ПЛИТЫ БП-2 (16 ШТ)	
129.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.96	912.71	876	
		Объем: 6*16						
129. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	5.2704	166.250	876	
129. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00576			
		Накладные расходы				78%	683	
		Сметная прибыль				50%	438	
		Всего с НР и СП					1 997	
	
130.	ГЭСНр 69-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		0.96	877.80	843	
130. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.28	5.0688	166.250	843	
130. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00576			
		Накладные расходы				78%	658	
		Сметная прибыль				50%	422	
		Всего с НР и СП					1 922	
	
131.	ГЭСНр 69-2-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		0.96	1 049.04	1 007	
131. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.31	6.0576	166.250	1 007	
131. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.003	0.00288			
		Накладные расходы				78%	785	
		Сметная прибыль				50%	504	
		Всего с НР и СП					2 296	
	
132.	С6 цена поставщ.	Анкерный болт с гайкой М12х150	шт		96	63.75	6 120	
		Поправки: М: =63.75	
	
133.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м  (усиление)	т		1.912	17 536.82	33 530	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	7.66712	275.695	2 114	
133. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	120.99136	170.030	20 572	
133. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.1912	1 704.86	326	
			(1)			315.05	60	
133. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.22944	951.88	218	
			(1)			276.63	63	
133. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	6.8832	1 161.69	7 996	
			(1)			276.63	1 904	
133. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.36328	1 080.04	392	
			(1)			236.67	86	
133. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	2.79152	3.25	9	
133. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.1912	116.66	22	
133. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	2.2944	51.61	118	
133. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.68832	48.38	33	
133. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.00084128	61 373.22	52	
133. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.040152	88 866.67	3 568	
133. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00001912	61 618.16	1	
133. 14.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.0003824	121 582.68	46	
133. 15.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00005736	48 518.73	3	
133. 16.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00196936	11 512.94	23	
133. 17.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00059272	75 972.52	45	
133. 18.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0011472	90 920.75	104	
		Накладные расходы				81%	18 376	
		Сметная прибыль				72%	16 334	
		Всего с НР и СП					68 240	
	
134.	08.3.08.02-0045 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т		1.912	46 225.36	88 383	
	
135.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)	100 м2		0.51	4 466.89	2 278	
		Поправки: ПЗ: *2	
135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0102	221.300	2	
135. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	2.7081	206.910	560	
135. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0051	11.72		
135. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0051	1 052.49	5	
			(1)			205.93	1	
135. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0051	1 080.04	6	
			(1)			236.67	1	
135. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.5712	20.00	11	
135. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00612	75 972.52	465	
135. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00102	89 619.66	91	
		Накладные расходы				81%	912	
		Сметная прибыль				60%	676	
		Всего с НР и СП					3 866	
	
136.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.51	2 706.43	1 380	
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0102	221.300	2	
136. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	1.9533	176.450	345	
136. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0051	11.72		
136. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0051	1 052.49	5	
			(1)			205.93	1	
136. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0051	1 080.04	6	
			(1)			236.67	1	
136. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.3315	20.00	7	
136. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00969	99 822.46	967	
136. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000714	71 114.10	51	
		Накладные расходы				81%	281	
		Сметная прибыль				60%	208	
		Всего с НР и СП					1 869	
	
137.	ГЭСНр 58-20-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.95	7 894.95	7 500	
		Объем: 30+65						
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.114	263.310	30	
137. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	39.3395	166.250	6 540	
137. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.076	317.68	24	
			(1)			276.63	21	
137. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.038	1 080.04	41	
			(1)			236.67	9	
137. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0038	61 618.16	234	
137. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.0057	115 908.09	661	
137. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.2128			
		Накладные расходы				83%	5 453	
		Сметная прибыль				65%	4 271	
		Всего с НР и СП					17 224	
	
138.	08.3.05.05-0081 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.1748	62 757.96	10 970	
		Объем: (0.95)*0.184						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					262 692	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					208 539	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					165 189	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 118-120, 127, 128, 135, 136; %=78 - по стр. 121-123, 129-131; %=83 - по стр. 137)					26 372	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 118-120, 127, 128, 135, 136; %=50 - по стр. 121-123, 129-131; %=65 - по стр. 137)					19 368	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					254 279	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					54 153	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 125, 133)					29 678	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 125, 133)					26 380	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					110 211	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					364 490	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	7 800	
	Итого со строительным контролем					372 290	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	7 446	
	Итого с непредвиденными расходами					379 736	
	НДС 20%				20	75 947	
	ВСЕГО С НДС					455 683	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					56 050	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					45 748	
	
	Раздел 5.  Отмостка	
	
139.	ГЭСНр 68-12-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.0016	64 881.92	104	
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	0.066224	209.585	14	
139. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	0.38936	161.500	63	
139. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.003424	1 653.06	6	
			(1)			276.63	1	
139. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.002064	37.85		
139. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	0.0628	531.96	33	
			(1)			205.93	13	
139. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	0.1884	9.47	2	
		Накладные расходы				104%	80	
		Сметная прибыль				60%	46	
		Всего с НР и СП					230	
	
140.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.288	528.11	152	
		Объем: 0.16*1.8						
	
141.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.0032	23 344.86	75	
141. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	0.4928	151.590	75	
		Накладные расходы				72%	54	
		Сметная прибыль				38%	29	
		Всего с НР и СП					158	
	
142.	ГЭСН 01-02-060-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0032	7 797.26	25	
142. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.171392	145.580	25	
		Накладные расходы				72%	18	
		Сметная прибыль				38%	10	
		Всего с НР и СП					53	
	
143.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		0.512	156.62	80	
		Объем: 0.32*1.6						
	
144.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		0.288	271.77	78	
		Объем: 0.16*1.8						
	
145.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Улучшенная штукатурка цементно-песчан.  раствором по камню: стен	100 м2		0.0048	14 062.24	67	
145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.013344	182.880	2	
145. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	0.340224	187.210	64	
145. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.00432	15.18		
145. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.013344	277.68	4	
			(1)			182.88	2	
145. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.00168	20.52		
		Накладные расходы				95%	63	
		Сметная прибыль				47%	31	
		Всего с НР и СП					161	
	
146.	04.3.01.12-0111 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3		0.0091	2 044.45	19	
		Объем: (0.0048)*1.89						
	
147.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство гидроизоляции обмазочной:  мастикой в два слоя	100 м2		0.0048	3 898.79	19	
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.0036	253.187	1	
147. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	0.074592	212.640	16	
147. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.001488	317.68		
			(1)			276.63		
147. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.002112	1 080.04	2	
			(1)			236.67		
147. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.0024	41.34		
		Накладные расходы				111%	19	
		Сметная прибыль				64%	11	
		Всего с НР и СП					49	
	
148.	01.2.03.03-0062 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.0012	70 764.34	85	
		Объем: (0.0048)*0.24						
	
149.	ГЭСН 08-01-007-01 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		0.016	507.36	8	
149. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.000016	236.670		
149. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	0.05104	158.710	8	
149. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.000016	1 080.04		
			(1)			236.67		
		Накладные расходы				110%	9	
		Сметная прибыль				68%	5	
		Всего с НР и СП					22	
	
150.	12.1.02.13-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2		1.76	74.65	131	
		Объем: 1.60*1.1						
	
151.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		0.16	778.35	125	
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.048	205.930	10	
151. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	0.5456	167.930	92	
151. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.0128	1 052.49	13	
			(1)			205.93	3	
151. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	0.0704	3.19		
151. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.0352	531.96	19	
			(1)			205.93	7	
151. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.024	20.52		
		Накладные расходы				111%	113	
		Сметная прибыль				64%	65	
		Всего с НР и СП					304	
	
152.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.192	566.80	109	
		Объем: (0.16)*1.2						
	
153.	ГЭСН 11-01-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		0.16	2 751.86	440	
153. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.088	205.930	18	
153. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	0.5968	172.120	103	
153. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.0144	1 052.49	15	
			(1)			205.93	3	
153. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	0.1488	3.19		
153. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.0736	531.96	39	
			(1)			205.93	15	
153. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.024	20.52		
153. 7.	02.2.05.04-0049	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.1	0.016	1 499.82	24	
153. 8.	02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 10-20 мм	м3	0.09	0.0144	1 499.82	22	
153. 9.	02.2.05.04-0052	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 40-70 мм	м3	1	0.16	1 479.42	237	
		Накладные расходы				111%	134	
		Сметная прибыль				64%	77	
		Всего с НР и СП					652	
	
154.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство отмостки бетонной	м3		0.16	3 872.14	620	
154. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	0.5856	162.900	95	
154. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.0768	3.63		
154. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00032	23 187.17	7	
154. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.056	20.52	1	
154. 5.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	1.02	0.1632	3 152.94	515	
154. 6.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00016	4 623.63	1	
		Накладные расходы				111%	105	
		Сметная прибыль				64%	61	
		Всего с НР и СП					786	
	
	Прочее	
155.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		117.808	528.11	62 216	
		Объем: 20.5+(2206+180+262+55)*0.02*1.8						
	
156.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		117.808	271.77	32 017	
		Объем: 20.5+(2206+180+262+55)*0.02*1.8						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					96 370	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 827	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					150	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 139; %=72 - по стр. 141, 142; %=95 - по стр. 145; %=111 - по стр. 147, 151, 153, 154; %=110 - по стр. 149)					595	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 139; %=38 - по стр. 141, 142; %=47 - по стр. 145; %=64 - по стр. 147, 151, 153, 154; %=68 - по стр. 149)					335	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 757	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					94 543	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					94 543	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					97 300	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	2 082	
	Итого со строительным контролем					99 382	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	1 988	
	Итого с непредвиденными расходами					101 370	
	НДС 20%				20	20 274	
	ВСЕГО С НДС					121 644	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					595	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					335	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					6 554 297	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					30 054	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					23 171	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 56, 58)					5 926	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 56, 58)					4 055	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					40 035	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 316 760	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 942 546	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 149; %=78 - по стр. 4, 5, 30, 121-123, 129-131; %=99 - по стр. 6, 31, 34, 39, 43, 69, 76, 78, 94, 101; %=86 - по стр. 7, 10, 12; %=95 - по стр. 15, 23, 32, 44, 52, 70, 72, 73, 87, 90, 91, 97, 98, 106, 107, 145; %=83 - по стр. 17, 20, 21, 137; %=81 - по стр. 22, 25, 26, 66, 67, 102, 103, 118-120, 127, 128, 135, 136; %=108 - по стр. 33, 35; %=79 - по стр. 46, 47, 50; %=85 - по стр. 55; %=117 - по стр. 59, 64, 68; %=106 - по стр. 79, 81, 83, 85; %=90 - по стр. 104; %=111 - по стр. 110-112, 114, 116, 147, 151, 153, 154; %=104 - по стр. 139; %=72 - по стр. 141, 142)					2 096 349	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 149; %=50 - по стр. 4, 5, 46, 47, 50, 121-123, 129-131; %=60 - по стр. 6, 22, 25, 26, 31, 34, 39, 43, 66, 67, 69, 76, 78, 94, 101-104, 118-120, 127, 128, 135, 136, 139; %=70 - по стр. 7, 10, 12; %=47 - по стр. 15, 23, 32, 44, 52, 70, 72, 73, 87, 90, 91, 97, 98, 106, 107, 145; %=65 - по стр. 17, 20, 21, 55, 137; %=63 - по стр. 30; %=55 - по стр. 33, 35; %=76 - по стр. 59, 64, 68; %=54 - по стр. 79, 81, 83, 85; %=64 - по стр. 110-112, 114, 116, 147, 151, 153, 154; %=38 - по стр. 141, 142)					1 131 226	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 544 335	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					73 173	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 38, 40, 95, 125, 133)					38 250	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 38, 40, 95, 125, 133)					33 999	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					145 422	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					39 767	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 27, 28, 61; %=74 - по стр. 60)					9 503	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 27, 28, 61; %=50 - по стр. 60)					5 980	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					55 250	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					94 543	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					94 543	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					9 879 585	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	211 423	
	Итого со строительным контролем					10 091 008	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	201 820	
	Итого с непредвиденными расходами					10 292 828	
	НДС 20%				20	2 058 566	
	ВСЕГО С НДС					12 351 394	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 150 028	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 175 260	

Составил:	
Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                       Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ «КР МКД»                                          Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)