,«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
    Смета на сумму:	337 121	руб.	    Смета на сумму:	337 121	руб.	
    Директор  МКУ  «КР МКД»	    Директор ООО  «Дом-Сервис»	
		
    ________________ /С. Б. Руович/	    ________________ /А.В. Ходорович /	
		
    «______»____________________ 2014г.	   «______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Беговая,7-11	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на обустройство системы водоотведения вокруг МКД, замену трубопроводов ХВС,  канализации, электропроводки и электрооборудования в МОП  (во исполнение решения суда), 	

    Сметная стоимость:	
 337.121	
тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Водоотведение вокруг здания	
	
1.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.018	1 466.39	1 466.39		1 492.78	1 492.78		14.4	1	21 496	21 496		
									1	1				
	Объем: (39.9+11)*2*1*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1 074.80				61%	13 113			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			567.26				31%	6 664			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 134.84					41 272			
	
2.	ТЕРр 66-2-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм, 100 м	1.07	1 165.24	1 165.24		1 246.81	1 246.81		14.4	1	17 954	17 954		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			922.64				63%	11 311			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			623.41				40%	7 182			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 792.85					36 447			
	
3.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	3.21												
									1					
	Объем: (1.07)*3													
	
4.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	1.07	1 297.83	101.69	44.88	1 388.68	108.81	48.02	14.4	5.23	8 014	1 567	251	
				1 151.26	4.91		1 231.85	5.26	5.03	14.4		6 196	76	
	Объем: 107*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			133.46				99%	1 627			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			86.69				61%	1 002			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 608.84					10 643			
	
5.	ТЕР 22-01-021-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.107	6 906.78	2 551.72	4 287.44	739.03	273.03	458.76	14.4	5.45	6 460	3 932	2 500	
				67.62	567.75		7.24	60.75	3.86	14.39		28	874	
	Объем: 107/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			390.52				99%	4 758			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			253.67				61%	2 932			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 383.23					14 150			
	
6.	ТССЦ 103-1316 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм, м	108.07	42.34			4 575.68					16 962			
				42.34			4 575.68		156.95			16 962		
	Объем: (0.107)*1010													
	
7.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1,песком, 100 м3 грунта	0.307665	810.13	810.13		249.25	249.25		14.4	1	3 589	3 589		
									1	1				
	Объем: 107*1*0.3-3.14*0.063*0.063*107													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			179.46				61%	2 189			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			94.72				31%	1 113			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					523.43					6 891			
	
8.	ТССЦ 408-0141 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных растворов средний, м3	33.84315	107.87			3 650.66					18 709			
				107.87			3 650.66		552.82			18 709		
	Объем: 0.307665*110													
	
9.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.699635	810.13	810.13		566.79	566.79		14.4	1	8 162	8 162		
									1	1				
	Объем: 101.8-1.07-30.7665													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			408.09				61%	4 979			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			215.38				31%	2 530			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 190.26					15 671			
	
	Водопровод	
	
10.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.49	391.23	305.70	8.28	191.70	149.79	4.06	14.4	4.98	2 301	2 157	20	
				77.25	1.29		37.85	0.63	3.28	16.84		124	11	
	Накладные расходы		74%			111.31				63%	1 366			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			75.21				40%	867			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					378.22					4 534			
	
11.	ТССЦ 509-9899 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.1078												
									3.28					
	Объем: (0.49)*0.22													
	
12.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.09	2 958.70	1 810.34	1 067.10	266.28	162.93	96.04	14.41	5.92	2 946	2 348	569	
				81.26	154.78		7.31	13.93	4.02	14.39		29	200	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			203.39				98%	2 497			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			125.57				56%	1 427			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					595.24					6 870			
	
13.	ТССЦ 301-5602 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	9	4.39			39.51					151			
				4.39			39.51		16.82			151		
	
14.	ТССЦ 507-3337 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	8.361	19.03			159.11					206			
				19.03			159.11		24.62			206		
	Объем: (0.09)*92.9													
	
15.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	6									44			
									7.37			44		
	
16.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	6									37			
									6.16			37		
	
17.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.4	2 171.21	1 473.54	626.15	868.48	589.42	250.46	14.41	5.97	10 105	8 493	1 495	
				71.52	89.09		28.61	35.64	4.05	14.39		116	513	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			718.82				98%	8 826			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			443.79				56%	5 043			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 031.09					23 974			
	
18.	ТССЦ 301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	40	4.90			196.00					731			
				4.90			196.00		18.28			731		
	
19.	ТССЦ 507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	37.52	29.31			1 099.71					1 944			
				29.31			1 099.71		51.8			1 944		
	Объем: (0.4)*93.8													
	
20.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	3									41			
									13.53			41		
	
21.	С Цена поставщик. 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт	3	2.51			7.53					32			
				2.51			7.53		4.27			32		
	Поправки: М: =10.3*1.04/4.27	
	
22.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	4.9	216.24	42.58	32.78	1 059.57	208.66	160.60	14.41	8.04	6 576	3 007	1 291	
				140.88			690.31		3.3	1		2 278		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			187.79				77%	2 315			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			125.20				48%	1 443			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 372.56					10 335			
	
23.	ТССЦ 104-0843 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	9.9	6.14			60.79					288			
				6.14			60.79		29.06			288		
	Объем: (0.9)*11													
	
24.	ТССЦ 104-0844 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	44	7.80			343.20					1 486			
				7.80			343.20		33.77			1 486		
	Объем: (4.0)*11													
	
	Канализация	
	
25.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.4	775.58	765.14	10.44	310.23	306.06	4.18	14.41	8.53	4 446	4 410	36	
					4.13			1.65	1	16.83			28	
	Накладные расходы		74%			227.71				63%	2 796			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			153.86				40%	1 775			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691.79					9 017			
	
26.	ТССЦ 509-9899 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.536												
									1					
	Объем: (0.4)*1.34													
	
27.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.4	12 833.31	745.23	9.03	5 133.32	298.09	3.61	14.41	7.52	13 213	4 296	27	
				12 079.05	0.95		4 831.62	0.38	1.84	14.29		8 890	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			343.24				98%	4 215			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			211.91				56%	2 409			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 688.47					19 837			
	
28.	С Цена поставщик. 
Тройник ПВХ 110*110мм 45 град., шт	3	28.09			84.28					360			
				28.09			84.28		4.27			360		
	Поправки: М: =115.34*1.04/4.27	
	
29.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ 110мм, шт	6	71.16			426.95					1 823			
				71.16			426.95		4.27			1 823		
	Поправки: М: =292.16*1.04/4.27	
	
30.	С Цена поставщик. 
Отвод ПВХ 110мм, шт	6	16.34			98.01					419			
				16.34			98.01		4.27			419		
	Поправки: М: =67.07*1.04/4.27	
	
31.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	274.14	93.05	1.26	274.14	93.05	1.26	14.4	8.27	2 219	1 340	10	
				179.83			179.83		4.83	1		869		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			107.01				98%	1 313			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			66.07				56%	750			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					447.21					4 283			
	
	Электроосвещение	
	
32.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.12	53.31	52.33	0.98	6.40	6.28	0.12	14.4	8.52	91	90	1	
					0.39			0.05	1	16.72			1	
	Накладные расходы		85%			5.38				72%	66			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.11				52%	47			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.90					204			
	
33.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.12	1 441.37	700.75	226.27	172.96	84.09	27.15	15.28	7.2	1 913	1 285	195	
				514.35	11.88		61.72	1.43	7.01	16.09		433	23	
	Накладные расходы		95%			81.24				81%	1 059			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.59				52%	680			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					309.79					3 653			
	
34.	С Цена поставщик. 
Светильник Vega 100 W, шт	10	37.87			378.71					1 617			
				37.87			378.71		4.27			1 617		
	Поправки: М: =157*1.03/4.27	
	
35.	С509-0763 
Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52), шт.	2									364			
									182.2			364		
	
36.	С Цена поставщик. 
Энергосберегающая лампа, шт	12	31.36			376.30					1 607			
				31.36			376.30		4.27			1 607		
	Поправки: М: =130*1.03/4.27	
	
37.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.12	48.36	48.36		5.80	5.80		14.4	1	84	84		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			4.93				72%	60			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.77				52%	44			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.50					188			
	
38.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.612	80.15	79.82	0.33	49.05	48.85	0.20	14.4	8.42	705	703	2	
					0.13			0.08	1	16.69			1	
	Объем: 6.8*3*3													
	Накладные расходы		85%			41.59				72%	507			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.80				52%	366			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.45					1 578			
	
39.	ФЕРм 08-02-390-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	0.612	237.65	154.92	31.20	145.44	94.81	19.09	15.29	3.31	1 643	1 450	63	
				51.53	0.14		31.54	0.09	4.14	15.5		131	1	
	Накладные расходы		95%			90.16				81%	1 175			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.69				52%	755			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					297.28					3 573			
	
40.	С Цена поставщик. 
Короб ПВХ, м	62.424	31.36			1 957.51					8 359			
				31.36			1 957.51		4.27			8 359		
	Объем: 61.2*1.02													
	Поправки: М: =130*1.03/4.27	
	
41.	ФЕРм 08-02-399-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	0.612	41.55	26.51	2.22	25.43	16.22	1.36	15.29	7.14	309	248	10	
				12.82	0.14		7.85	0.09	6.53	15.5		51	1	
	Накладные расходы		95%			15.49				81%	202			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.60				52%	129			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.53					640			
	
42.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.062424									1 356			
									21 724.56			1 356		
	Объем: 61.2*1.02													
	
43.	ТССЦ 503-0527 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разветвительная коробка У-194, шт.	12	1.84			22.08					106			
				1.84			22.08		8.81			106		
	
44.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.08	433.08	313.47	13.78	34.65	25.08	1.10	15.28	7.27	430	383	8	
				105.83	0.41		8.47	0.03	4.62	15.9		39	1	
	Накладные расходы		95%			23.85				81%	311			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.32				52%	200			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.83					941			
	
45.	С Цена поставщик. 
Выключатель одноклавишный, шт	8	9.41			75.26					321			
				9.41			75.26		4.27			321		
	Поправки: М: =39*1.03/4.27	
	
46.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.02	465.46	348.49	13.78	9.31	6.97	0.28	15.28	7.27	118	106	2	
				103.19	0.41		2.06	0.01	4.62	15.9		10		
	Накладные расходы		95%			6.63				81%	86			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.54				52%	55			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.48					259			
	
47.	С Цена поставщик. 
Выключатель одноклавишный, шт	2	27.74			55.48					237			
				27.74			55.48		4.27			237		
	Поправки: М: =115*1.03/4.27	
	
48.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	3.854	66.71		66.71	257.10		257.10	1	6.28	1 615		1 615	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
49.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	3.854	18.71		18.71	72.10		72.10		6.28	453		453	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	28 172.07	6 033.57	1 405.49			172 042	87 100	8 548	
			20 733.03	120.02				76 394	1 735	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 573.20	288.10	49.30			21 532	4 349	281	
			4 235.80	1.78				16 903	28	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	4 124.16					16 239			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 32, 37, 38; %=81 - по стр. 33, 39, 41, 44, 46)	269.28					3 466			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 32, 33, 37-39, 41, 44, 46)	188.42					2 276			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 030.90					27 274			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 743.53	4 146.13	996.58			97 436	59 707	6 110	
			6 600.82	66.01				31 619	950	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 671.42					23 117			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1, 7, 9; %=63 - по стр. 2; %=99 - по стр. 4, 5; %=77 - по стр. 22)	3 296.77					40 292			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 7, 9; %=40 - по стр. 2; %=61 - по стр. 4, 5; %=48 - по стр. 22)	1 966.32					22 865			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 006.62					160 593			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	11 855.34	1 599.34	359.61			53 074	23 044	2 157	
			9 896.41	52.23				27 872	757	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 10, 25; %=98 - по стр. 12, 17, 27, 31)	1 711.47					21 013			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 10, 25; %=56 - по стр. 12, 17, 27, 31)	1 076.41					12 272			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	14 643.22					86 359			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	36 680.74					274 226			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	784.97					5 868			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	37 465.71					280 094			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	749.31					5 602			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	38 215.02					285 696			
	НДС	6 878.70					51 425			
	Всего с НДС	45 093.72					337 121			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)