Приложение № 2
к постановлению администрации
 городского округа «Город Калининград»
от 12 мая 2012 года  № 764

План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2012-2013 г.г.
МУП «Калининградтеплосеть» 

№
п/п	Наименование мероприятий	Объем работ	Ориентировочная стоимость  тыс.руб.	Срок исполнения	Исполнитель	
		Ед. изм.	Кол-во	ВСЕГО	В том числе
из бюджета			
Перекладка тепловых сетей РТС	
РТС-1 «СЕВЕРНЫЙ»	
1	Теплосеть от ЦТП Куйбышева до ж.д. Куйбышева,109, до ж.д.Куйбышева,129-137 до ж.д. Куйбышева, 113-117
Д 273*400
Д 219*315
Д 159*250	

км
км
км	

0,108
0,198
0,062

 831,60
1445,40
 291,40		

     29 июня –
 05  июля

ООО «Алит-
Профмонтаж»	
2	Теплосеть  по ул.Куйбышева, от ж/д № 129-37
1Д159*250
1Д 108*200	

км
км

0,17
0,08	

799,00
304,00		
29	июня –
     05 июля

ООО «Алит-
Профмонтаж»	
3	Теплосеть от ЦТП Сибирякова                          до ж/д №56 по ул.Сибирякова         1Д89*160

км	

0,086	
    
292,40		
       05 июля-
       08 июля	ООО «Алит-
Профмонтаж»	
4	Теплосеть между ЦТП «Нарвская» и ТК №1
1Д 219*315	

км	

0,09	

657,00		 08 июля-
10 июля
	ООО «Алит-
Профмонтаж»	
5	Теплосеть от ж/д  №14 по ул. Береговая  до жд №3-9 по пер.Потемкина
1Д 89*160	

км	

0,08	

272,00		
 10 июля-
12 июля
	
ООО «Алит-
Профмонтаж»	
6	Теплосеть  между ТК и ж.д. №46 по ул.А. Невского                             
                                1Д 159*250	

км	

0,14	

658,00		  12 июля –
15 июля	
ООО «Алит-
Профмонтаж»	
7	Теплосеть  по ул.Захарова,33 до Захарова,46       1Д 159*250	
   км	
  0,09	
    423,00		
14 мая –
         18 мая	
ООО «Алит-
Профмонтаж»	
8	Теплосеть от ТК 1-29 к ж.д. №19 в,б  по ул.Леонова     
                               1Д 89*160                                                  	
км	
0,09	
306,00		
18 мая-
24 мая	
ООО «Алит-
Профмонтаж»	
9	Теплосеть от ТК 1-29-5  до ж.д. № 31  по ул.Леонова     
                               1Д 57*125                                                  	
км	
0,048	
120,00		
28 мая-
  01 июня	ООО «Алит-
Профмонтаж»	
10	Теплосеть от ж.д.39/45 по ул. Нарвская до ТК 6-13-7 
                                  1Д89*160	
км	
0,118	
401,20		
01 мая-
14 мая	ООО «Алит-
Профмонтаж»	
11	Теплосеть от ТК 1-31-2 по                                                                             пер.Зоологическому до жд 2/4
                                1Д108*200	
км	
0,09	
342,00		
24 мая-
28 мая	ООО «Алит-
Профмонтаж»	
	Итого РТС-1 «СЕВЕРНЫЙ»	км	1,450	7143,00				
РТС – 2 «ЮЖНЫЙ»	
1	Теплосеть от ТК5-17а-3 до жд №19-29  ул. Красноармейской
                                1Д108*200	
км	
0,234	
889,20		
24 июня-
29 июня	
ООО «Алит-
Профмонтаж»	
2	Теплосеть от ЦТП «Новый Вал» до жд №83а-д по Ленинскому проспекту
1Д159*250                                                                                                                                                                                                                                                                                1Д110*145 гвс
                1 Д  75*110 гвс

км
км
км	

0,244
0,140
0,140	

1146,80
570,00
510,00		
20 июня-
24 июня	
ООО «Алит-
Профмонтаж»	
3	Теплосеть от ЦТП «Новый Вал» до ж/д №10 по ул. Старопрегольская
1Д159*250
Д110*145 гвс
Д75*110 гвс

км
км
км

0,160
0,09
0,09	

752,00
380,00
    350,00		

20 июня-
24 июня	
	
	ООО «Алит-
Профмонтаж»	
4	Теплосеть от ТК 5-30-1 до          ТК 5-30-3
1Д133*225
1Д89*160	

км
км	

0,230
0,04	

966,00
136,00		
15 июня-
18 июня	
ООО «Алит-
Профмонтаж»	
5	Теплосеть от ТК «Башмачок»  до ж/д №84 по  Ленинскому проспекту
1Д108*200
1Д 89*160	

км
км	

0,122
0,202	

463,60
686,80	

	
18 июня-
20 июня	
ООО «Алит-
Профмонтаж»	
6	Теплосеть от ТК 10-20 до        ЦТП  «Карбышева»
1Д273*400	

км	

0,240	

1848,00		
01 июня-
15 июня	
ООО «Алит-
Профмонтаж»	
	
Итого РТС -2 «ЮЖНЫЙ»	
км
	
1,692	
8698,40				
РТС -3  « ВОСТОЧНЫЙ»	
1	Теплосеть от ТК 3-15-1 до Барнаульской,5 (ФАПСИ)
1Д 89*160	
км	
0,286	
972,40		
15 июля-
25 июля	
ООО «Калининград-
стройкомму-никации»	
2	Теплосеть от ТК 2-3 до МДОУ № 100 ул. Дм.Донского,9
1Д76*140	
км	
0,236
	
731,60		
18 мая-
23 мая	
ООО «Калининград-
стройкомму-никации»	
3	Теплосеть от ТК 3-1А-10 до ТК 3-1А-14 по ул.Буткова	
км	
0,590	
2478,00		
25 июля-
10 августа	
ООО «Калининград-
стройкомму-никации»	
4	Теплосеть от ж/д 24/26 по Ленинскому пр. до ж/д 2-4 по ул.Житомирской

км	
0,07	
238,00		

28 мая-
05 июня	

ООО «Калининград-
стройкомму-никации	
5	Теплосеть от ТК 1-28-5 до ТК 1-28-5-2 по ул. Разина
1Д159*250	
км	
   0,1	
       470,00		
14 мая-
18 мая	
ООО «Калининград-
стройкомму-никации»	
6	Теплосеть  по ул.К.Маркса  от ж/д № 64 до ж/д № 62
1Д76*140	
км	
0,104	
322,40		
25 апреля-
1 мая	
ООО «Алит-
Профмонтаж»	
7	Теплосеть от ж/д  №3/5 до ж/д № 4-10 по ул. Чайковского
1Д76*140	
км	
0,1	
310,00		
23 мая-
28 мая	
ООО «Калининград-
стройкомму-никации»	
8	Сеть ГВС  от ж/д №69-73 до ж/д № 65а и 71а-73а  по Ленинскому проспекту
1Д40*75 гвс
			1Д75/110 гвс	

км
км	

0,07
0,07	

455,00		

14 мая-
28 мая	

ООО «Калининград-
стройкомму-никации»
	
9	Теплосеть от ТК 3-43 до       ТК 3-43-1 1Д219*315	
км	
0,056	
408,80		
10 августа-
15 августа	
ООО «Калининград-
стройкомму-никации»	
10	Теплосеть от ТК 3-27 до ТК 3-28 по ул. Фрунзе
1Д530*630	

км	

0,550	

6754,00		
15 июля-
15 августа	
ООО «Алит-
Профмонтаж»	
	Итого по РТС-3 «ВОСТОЧНЫЙ»		
2,232	
13140,2                                                                                                                                                                                                 				
Участок «Красносельский»	
1	Перекладка участка тепловой сети от ТК 21 до жилого дома по ул. Красносельская, 13-19
1Д159*250	

км	

0,03	

141,00		
02 августа-
10 августа	
ООО «Калининград-
стройкомму-никации»	
2	Перекладка участка тепловой сети от ТК 20 до МДОУ «Детский сад  №2 » по ул. Менделеева,18
1Д108*200

км	

0,270	

1026,00		

10 августа-
16 августа	

ООО «Калининград-
стройкомму-никации»
	
3	Замена насоса WILOIL 150/340 -  37/4	
шт	
2	
530,00				
	Итого по  участку «Красносельский»		
0,300	
1697,00                                                                                     				
Переключение части потребителей с ТЭЦ-1 на РТС «Северная»	
	Т/сеть от ТК8-16 до ТК 2-37
1Д273*400 по ул. Рокоссовского	
км	
0,54	
4158		14.05-28.05
15.08-15.09	ООО «Алит-
Профмонтаж»	
	
Итого по переключениям:	
км	
0,54	
4158				
Строительные работы	
1	ЦТП «Гайдара 1», ЦТП «Дадаева»
капитальный ремонт 	
объект	
2

800,00		
июль-
сентябрь	Подрядная
организация	
2	Работы по восстановлению тепловой изоляции трубопроводов стадион: «Красная Звезда»	объект	1
		
900,00		
июль-
сентябрь	Подрядная
организация	
	Итого по строительным работам:		
		
1700,0				
Гидрохимическая промывка теплообменного оборудования	
1	ЦТП «Горького – Балтийская»	объект	1	375,00		14 мая-                  28 мая	ООО
«Технологии-СКС»	
2	ЦТП « Зеленая »
	объект	1	375,00		14 мая-                         28 мая	ООО
«Технологии-СКС»	
3	ЦТП « Сибирякова »	объект	1	375,00		14 мая-                   28 мая	ООО
«Технологии-СКС»	
4	ЦТП «Нарвская»	объект	1	375,00		14 мая-                      28 мая	ООО
«Технологии-СКС»	
	
Итого  :			
1500,00				
	Замена запорной арматуры			2855,98				
	Проектирование			200,00				
	
ВСЕГО по району РТС	
км	
6,214	
41092,56

План капитального ремонта источников	
РТС «Северная»	
1	Замена запорной арматуры	комп	2	300,00		Май-
июнь	Рем. Группа         РТС «Северная»	
2	Окраска 4х мазутных емкостей №1,2,3,4.	шт	4	300,00			Рем. Группа
РТС «Северная»	
3	Зачистка канализации
-замазученных стоков
-хозяйственно-бытовой
-производственных стоков
-ливневой канализации	

шт	

4	

300,00		

Май-
июнь	

Подрядная
организация	
	Итого:			900,00				
РТС «Балтийская»	
1	Замена запорного устройства на газопроводе ПК-2 (опускная задвижка ДУ 200)	
комп	
1	
30,00		
июль	Рем. Группа
РТС «Балтийская»	
2	Монтаж блока розжига и защиты котла ДЕ25/14(предписание Ростехнадзора)	
шт	
1	
1200,00		.
Май
июнь	
Подрядная    организация	
3	Монтаж ковера водоотливной трубки конденсата сборника на газопроводе высокого давления	
   комп	
   1	
100,00		
июнь	
Подрядная                   организация	
4	Окраска мазутных емкостей  1,2,3.	шт	3	150,00		
сентябрь	Рем. Группа
РТС «Балтийская»	
5	Монтаж прибора учета сточных вод	
комп	
1	
800,00		
сентябрь	Подрядная                   организация	
	Итого:			2280,00                                                                                                                     				
РТС «Восточная»»	
1	Монтаж блока розжига и защиты котла ДЕ25/14 со щитом автоматики	

комп	

1	

1200,00		
Май-
июль	
Подрядная                   организация	
2	Замена входной и выходной задвижек котла КВГМ-5-150 (Ду300,Ру-25) с электроприводом 	
комп	
2	
350,00		
июль	Рем. Группа
РТС «Восточная»	
3	Окраска мазутных емкостей  №1,2	
шт	
2	
100,00		
август	Рем. Группа
РТС «Восточная»	
	Итого:			1650,00                               				
РТС «Дюнная»	
1	Кап. ремонт  ДКВР20/13 №3  с заменой экранных труб	комп	1	2300,00		
сентябрь	Подрядная
организация	
2	Кап.ремонт щита управления на ПК №4	
шт	
1	
300,00		
июль	Служба
КИПиА	
3	Окраска мазутных емкостей №2,3.	
шт	
2	
100,00		
август	
Рем. Группа
	
	Итого:			2700,00				
РТС «Заводская»	
1	Ремонт ГРУ-1 с заменой оборудования   и установкой счетчика по газу	
компл	
1	
740,00		
июль	Подрядная
организация	
2	Замена сепарационных устройств в верхнем барабане ДКВР-20/13 №3	шт	1	
200,00		
.июль	Подрядная 
организация	
3	Ремонт обмуровки внутри котла ДКВР-20/13 №2	шт	1	
10,00		
июнь	Рем. Группа
РТС	
 4	Окраска мазутной емкости	шт	1	50,00				
5	Замена конденсатных трубопроводов	
комп	
1	
200,00		
сентябрь	Подрядная 
организация	
	Итого			   1200,00				
РТС «Цепрусс»	
1	Замена арматуры трубопровода ПК паропровод 	комп	1	200,00		
август	Рем. Группа
РТС	
2	Очистка и ремонт газоходов	комп	1	500,00		
сентябрь	Подрядная 
организация	
3	Ремонт бака конденсата в бойлерной	шт	1	150,00		
август	Рем. Группа
подрядчик	
	Итого:			850,00				
СР «Чкаловский»	
	Ремонт и обмуровка газоходов от котла ПК-1,2	шт	2	50,00                                                                                                              		.
август	Рем. Группа             СР	
	Итого:			50,00				
СР «Прибрежный »	
1	Кап. ремонт газохода парового котла №3 	шт.	1	500,00		
июнь	Подрядная
организация	
2	Замена фекального насоса СМ 100-65-200	комп	1	50,00		
август	Рем. Группа
СР	
3	Ремонт подогревателя пароводяного ПП 1-53-7-11	
шт	
1	
100,00		май	Мех.
мастерская	
	Итого			650,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      				
РТС «Горького,166»	
1	Замена сервоприводов котлов водогрейных LOO S U nimat №3, №4.	
комп.	
1	
300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    		
Июнь-
июль	
Рем. группа
РТС	
	Итого:			300,00				
РТС «Красная»	
	Замена стационарного           газоанализатора СТМ-10 совместно с датчиками	
шт	
1	
40,00		
сентябрь	
Рем. Группа
РТС «Красная»	
	Итого			40,00				
СР «Космодемьяновский»	
	Замена питательного трубопровода цельнотянутого Д 120 мм	
шт	
1	
320,00		
июль	Подрядная
организация	
	Итого			320,00				
СР «Б.Камская»	
	Восстановление изоляции теплотрассы  от ТК   ул.Садовая,39 до  ул.Садовой,31 	
пм
	
750
	
1000		
август	
Подрядная
организация	
	Итого			1000				
	Всего по ИСТОЧНИКАМ			11940				

Квартальные котельные	
Замена водогрейных котлов и оборудования	
1	Чувашская,4
Замена ВК КВС -0,8 №4	
шт	
1	
200		Март-
апрель	
ПСРиК	
2	Невского,9а
Замена ВК Минск №1	
шт	
1	
200		
июль	
ПСРиК	

3	Невского, 188
Замена ВК №5 «КВС-0,8»	
шт	
1	
200		
май		
	ПСРиК	

4	Емельянова,92
Замена ВК № 1,4 «КВС-0,8»	
шт	
2	
400		
август	
ПСРиК	

5	П.Морозова,115
Замена ВК № 3,4 «КВС-0,8»	
шт	
2	
400		Март-апрель
сентябрь		
	ПСРиК	

6	Солнечногорская,59                  Замена ВК № 2 «КВС-0,8»,
Насоса КН80-65-160	
шт
шт
	
1
1
	
400 
15
		
июль	
Подрядчик
ПСРиК	
7	Летняя,50
Замена ВК №5,6 ДКВР на КВС-2	
шт	
2	
3000		
сентябрь	Подрядчик
ПСРиК	
8	Пр.Победы,82                             Кап. ремонт   котла «Факел-Г»
с заменой горелки	
шт	
1	
500		
август	МУП К
Подрядчик
	
9	Емельянова,47
КВ-Г- 2,5-95                          Кап. рем. водоподогревателя	
шт
шт	
1
1	
3000		
май-
сентябрь	Подрядчик
ПСРиК + мехмастерские	
10	Катина,4                                 Замена ВК «Универсал-5»	
шт	
1	
200		
июнь	
ПСРиК	

11	Грекова,11                                   Замена ВК «Универсал-6»	
шт	
1	
200		
сентябрь		
	ПСРиК	

12	Пр.Победы,105                         Замена ВК №1 «Универсал-6»	
шт	
1	
200		
август	
ПСРиК	
13	Танковая,4
Замена насоса ЦН WILOTOP	
шт	
1	
15		
август	
ПСРиК	

14	Красная,301                                 Замена насоса ЦН №2 К8/18 на насос ЦН WILOTOP 24	
шт	
1	
15		
июнь		
	ПСРиК	
15
	СержантаМишина,24               Замена насоса ЦН №2 К8/18 на насос ЦН WILOTOP 24	
шт	
1	
15		
июнь	
ПСРиК	
16	Чайковского,38                         Замена насоса 1,5 К6  на насос ЦН WILO TOP 24	
шт	
1	
15		
август	
ПСРиК	
17	Пр.Мира,90 
Установка дополнительного насоса  ЦН WILOTOP	
шт	
1	
15		
август	
ПСРиК
	
18	Емельянова,300
Замена фильтров  ХВО	
комп	
1	
200		
июль	ПСРиК

Итого замена 15 котлов, 6 насосов			
9190,00				
Замена и ремонт дымовых труб	
1	Летняя,50 
Замена  дымовой трубы	
шт	
1	
1300		
июнь	ООО СК «Бравия»	
2	К,Маркса,41                        Кап.     ремонт дымовой трубы	
шт	
1	
20	
	
май	
ООО СК «Бравия»	
3	Гагарина,109
Кап. ремонт оголовка дымовой трубы	
шт	
1	
25		
май	
ООО СК «Бравия»	
4	Барклая де Толли,17
Замена дымовой трубы	
шт	
1	
600		
июнь	
ООО СК «Бравия»	
5	П.Морозова,90
Замена дымовой трубы	
шт	
1	
800		
июль	
ООО СК «Бравия»	
6	Вагоностроительная,31
Кап. ремонт оголовка дымовой трубы	
шт	
1	
137,321		
май	
ООО СК «Бравия»	
7	Гвардейский пр.,53
Демонтаж дымовой трубы	
шт	
1	
76,981		
август	
ООО СК «Бравия»	
8	М.Гвардия, 1-3
Демонтаж дымовой трубы
	
шт	
1	
76,981		
сентябрь	ООО СК «Бравия»	
9	Воздушная,73
Демонтаж дымовой трубы	
шт	
1	
19,630		
август	ООО СК «Бравия»	
10	Гагарина,41
Кап. ремонт дымовой трубы с заменой растяжек	
шт	
1	
39,412		
август	
ООО СК «Бравия»	
	Итого по дымовым трубам  10 труб, в том числе замена 3 шт.	шт	10	3095,325				
Ремонтно-строительные работы	
1	Энгельса,1
Кап. ремонт забора котельной	
пм	
60	
70		
август	
ПСРиК	
2	Транспортная,25
Кап. ремонт  забора котельной	шт	1	         90		
сентябрь	
ПСРиК	
	Итого ремонтно-строительных   работ:	
		
160				
Ремонт,  промывка водоподогревателей в котельной	
	Транспортная,25
Хим.очистка водоподогревателей	
шт	
1	
130		
август	
ПСРиК	
	
Итого :			
130				
Перекладка тепловых сетей	
1	Тенистая аллея,38
Замена участка т/сети ГВС между ТК №9 и ТК №8
1Д 159 мм
1Д 109 мм	

пм
пм	

100
100	

148,551
138,840		

июль	

ООО «Вега-777»	
2	Тихорецкая,32
Замена участка т/сети (отопления)  по ул.Тобольской от ж/д№15/25 до ж/д №27/44
1Д 108 мм	

пм	

150	

58,260		

август	

ПСРиК	
3	Тихорецкая,32
Замена участка теплотрассы между домами №16 и18 по ул. Великолукской 
1Д 89 мм
1Д 57 мм	

пм	

50

38,000		

июль	

            ПСРиК	
4	П.Морозова,5
Замена участка теплотрассы от котельной до ж.д. ул.Киевская,95-101
1Д 108 мм	

пм	

140	

194,370		

июль	

ООО»Вега-1»	

5	Колхозная,8
Замена водовода от колодца до котельной
1Д 89 мм	

пм	

100	

228,200		

август	

ООО «Вега-1»	
6	П.Морозова,115
Замена участка теплосети отопления и ГВС от котельной до  ж. д.
1Д 108 мм
1Д  89 мм
1Д  57 мм	

пм
пм
пм	

200
100
100	

77,870
35,450
14,300		

август	

ПСРиК	
7	Бассейная,35
Замена участка теплосети отопления и ГВС от котельной до камеры (воздушка)
1Д 150 мм
1Д  89 мм	

пм
пм	

195
65	

94,677
23,041		

июнь	

ПСРиК	
8	М.Борисово,19а
Замена участка теплосети от ТК до жд №11
1Д до 159 мм	

пм	

100	

130,00		

август	

ООО «Вега-1»	
	Итого по перекладке т/сетей от котельных в 1Д	
пм	
1400	
1181,559				
Закрытие котельных	
1	Зоологический тупик,1               	шт	1	722.00		май-июнь	ООО «Вега-1»	
2	Пр.Мира,69 	шт	1	600.00		Август-сентябоь	ООО «Вега-1»	
	Итого по закрытию котельных	шт	2	1322,00				
Всего    по квартальным котельным:                            		 	15078,884				
	Итого:                                Мероприятия по подготовке к   отопительному сезону  МУП  «Калининградтеплосеть»	

тыс.руб.		

68111,484			
	
	В том числе:							
1	Перекладка магистральных тепловых сетей от источников	
тыс.руб.		
41092,60			
в 1D -6214 пм	
2	Источники: 8  РТС, 4СР	тыс.руб.		11940,00			12 шт	

3	Кап. ремонт квартальных котельных с заменой 15 котлов 	
тыс.руб.		
9190,00			
19 котельных	
4	Замена и ремонт дымовых труб от котельных	тыс.руб.		3095,325
			10 шт	
5.	Перекладка тепловых сетей от котельных	тыс.руб.		1181,559
			в 1D – 1400 пм	
6.	Промывка,хим.очистка в/подогревателей котельной	тыс.руб.		130,00				
7.	Ремонтно-строительные работы котельных	тыс.руб.		160,00				

8.	Закрытие котельных	тыс.руб.		1322,00			2 шт.