«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 244 646.00	руб.	Смета на сумму:	3 244 646.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /Д.Ю.Кислый /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт крыши. чердачного перекрытия МКД, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Мебельная 7-21, пр-кт Калинина 85-89	
Сметная стоимость:	3 244.646	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.320	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	555.331	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		1.65	2 458.66	4 057	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	26.235	147.310	3 865	
1. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	7.59	25.31	192	
		Накладные расходы				84%	3 247	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 855	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 159	
	
2.	ГЭСН 46-04-008-03	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2		5.78	8 500.09	49 131	
2. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	55.52	320.9056	147.310	47 273	
2. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12.7	73.406	25.31	1 858	
		Накладные расходы				84%	39 709	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	22 691	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					111 531	
	
3.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		7.43	2 792.42	20 748	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	3.4178	268.820	919	
3. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	112.6388	150.030	16 899	
3. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	3.4178	1 126.02	3 849	
			(1)			268.82	919	
		Накладные расходы				71%	12 651	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	9 265	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					42 664	
	
4.	ГЭСНр 58-1-1 
(прим)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2		7.43	2 792.42	20 748	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	3.4178	268.820	919	
4. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	112.6388	150.030	16 899	
4. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	3.4178	1 126.02	3 849	
			(1)			268.82	919	
		Накладные расходы				71%	12 651	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	9 265	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					42 664	
	
5.	ГЭСНр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м		0.366	29 485.89	10 792	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.06954	229.990	16	
5. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	48.7695	161.570	7 880	
5. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.19032	10.80	2	
5. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.06954	1 037.49	72	
			(1)			229.99	16	
5. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.004758	57 689.15	274	
5. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.3477	7 372.62	2 563	
		Накладные расходы				71%	5 606	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	4 106	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					20 504	
	
6.	ГЭСНр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (затяжки, подкосы)	100 м		0.14	29 485.89	4 128	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.0266	229.990	6	
6. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	18.655	161.570	3 014	
6. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.0728	10.80	1	
6. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0266	1 037.49	28	
			(1)			229.99	6	
6. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.00182	57 689.15	105	
6. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.133	7 372.62	981	
		Накладные расходы				71%	2 144	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 570	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 843	
	
7.	ГЭСНр 58-5-5 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 150*150мм)	100 м		0.2	55 449.83	11 090	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.126	229.990	29	
7. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	32.042	161.570	5 177	
7. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.362	10.80	4	
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.126	1 037.49	131	
			(1)			229.99	29	
7. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0008	57 689.15	46	
7. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.944	5 804.89	5 480	
7. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	7.4	34.10	252	
		Накладные расходы				71%	3 696	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 707	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 493	
	
8.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400 мм	т		0.006	96 058.76	576	
		Объем: 0.00029086*20						
	
9.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.001	98 286.21	98	
		Объем: 0.000025*20						
	
10.	01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		0.426	117.69	50	
		Объем: 0.021276596*20						
	
11.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.016	64 522.98	1 032	
		Объем: 0.2*0.08						
	
12.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (кобылки)	100 м		1.91	45 697.79	87 283	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.6112	229.990	141	
12. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	286.6719	161.570	46 318	
12. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	2.2538	10.80	24	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.6112	1 037.49	634	
			(1)			229.99	141	
12. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.00955	57 689.15	551	
12. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.04775	50 201.92	2 397	
12. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	5.0806	7 353.20	37 359	
		Накладные расходы				71%	32 986	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	24 159	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					144 428	
	
13.	ГЭСН 10-01-010-01	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев (прим)	м3		0.27	3 148.38	850	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.288	0.07776	229.990	18	
13. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	18	4.86	158.310	769	
13. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.288	0.07776	1 037.49	81	
			(1)			229.99	18	
		Накладные расходы				90%	708	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	338	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 897	
	
14.	ГЭСН 10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (прим)	м3		0.27	13 202.39	3 565	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.0972	229.990	22	
14. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22.5	6.075	158.310	962	
14. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.36	0.0972	1 037.49	101	
			(1)			229.99	22	
14. 4.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.002025	89 253.46	181	
14. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.00081	57 689.15	47	
14. 6.	08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.0031	0.000837	45 150.41	38	
14. 7.	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0.93	0.2511	7 448.65	1 870	
14. 8.	11.1.03.05-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.01	0.0027	4 877.98	13	
14. 9.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.12	0.0324	7 372.62	239	
14. 10.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.3915	34.10	13	
14. 11.	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.0006966	46 063.23	32	
14. 12.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00301	0.0008127	84 869.83	69	
		Накладные расходы				90%	886	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	423	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 874	
	
15.	ГЭСНр 58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт.		0.04	51 271.12	2 051	
15. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	341.3	13.652	150.030	2 048	
15. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.244	10.80	3	
15. 3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.6	0.224			
		Накладные расходы				71%	1 454	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 065	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 570	
	
16.	ГЭСН 10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт.		8	2 706.07	21 649	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	1.76	249.405	439	
16. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.63	53.04	161.570	8 570	
16. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.88	874.68	770	
			(1)			268.82	237	
16. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.88	1 037.49	913	
			(1)			229.99	202	
16. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0112	57 689.15	646	
16. 6.	11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта	м3	0.06	0.48	2 955.35	1 419	
16. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.1	0.8	7 372.62	5 898	
16. 8.	11.1.03.06-0098	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0.06	0.48	7 152.88	3 433	
		Накладные расходы				90%	8 108	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	3 874	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					33 631	
	
17.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		3.84	8 099.41	31 102	
		Объем: 0.6*0.8*8						
	
18.	ГЭСН 10-01-008-09 
(прим)	Обивка боковин стен слуховых окон сталью оцинкованной. прим.	100 м2		0.129	4 169.99	538	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.02967	229.990	7	
18. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	25.1	3.2379	154.230	499	
18. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.23	0.02967	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
18. 4.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.000129	60 190.64	8	
		Накладные расходы				90%	455	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	218	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 211	
	
19.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.057	62 748.13	3 577	
		Объем: 0.129*0.44						
	
20.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3		0.22	1 510.91	332	
20. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	1.8128	167.270	303	
20. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.253	97.21	25	
20. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	0.506	9.05	5	
		Накладные расходы				84%	255	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	145	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					732	
	
21.	ГЭСНр 53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3		0.0022	150 072.77	330	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.0858	268.820	23	
21. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670	1.474	158.310	233	
21. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.0858	1 126.02	97	
			(1)			268.82	23	
21. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.00968	20.52		
		Накладные расходы				73%	187	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	143	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					660	
	
22.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3		0.05	2 735.32	137	
	
23.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.088	13 896.92	1 223	
		Объем: (0.0022)*40.0						
	
24.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		7.43	77 259.11	574 035	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	23.8503	250.312	5 970	
24. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	1291.8541	177.590	229 420	
24. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	12.4824	874.68	10 918	
			(1)			268.82	3 356	
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	11.3679	1 037.49	11 794	
			(1)			229.99	2 615	
24. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	68.8018	14.99	1 031	
24. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.010402	127 819.59	1 330	
24. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.083216	120 606.78	10 036	
24. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.0033435	60 190.64	201	
24. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	4.95581	189.88	941	
24. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	748.944	10.49	7 856	
24. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	3.4178	15 715.36	53 712	
24. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	10.9221	17 839.83	194 848	
24. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	861.88	46.96	40 474	
24. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	26.8966	26.91	724	
24. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	2.3033	2 791.89	6 431	
24. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.020061	84 734.93	1 700	
24. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	5.5725	469.84	2 618	
		Накладные расходы				92%	216 559	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	103 572	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					894 165	
	
25.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		936.18	262.08	245 354	
		Объем: (7.43)*126.0						
	
26.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		128	753.58	96 458	
	
27.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)	Устройство мелких покрытий (карнизный свес, брандмаурная стенка) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.45	64 313.56	28 941	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.1215	258.753	31	
27. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	50.7375	161.570	8 198	
27. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.09	1 126.02	101	
			(1)			268.82	24	
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.0315	1 037.49	33	
			(1)			229.99	7	
27. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.0018	60 190.64	108	
27. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.0054	107 511.00	581	
27. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.3519	56 608.46	19 921	
		Накладные расходы				92%	7 571	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	3 621	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					40 132	
	
28.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: брандмаурной  кирпичной стены	100 м2		0.145	3 361.61	487	
28. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	3.3089	147.310	487	
		Накладные расходы				84%	409	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	234	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 130	
	
29.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.6	11 882.62	7 130	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.258	268.820	69	
29. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	21.234	151.380	3 214	
29. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.12	874.68	105	
			(1)			268.82	32	
29. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.138	308.04	43	
			(1)			268.82	37	
29. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0264	20.52	1	
29. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.253	0.1518	2 735.32	415	
29. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.402	0.2412	13 896.92	3 352	
		Накладные расходы				73%	2 397	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 838	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 365	
	
30.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.145	17 515.20	2 540	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.4031	177.720	72	
30. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	10.2776	181.930	1 870	
30. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.1305	14.36	2	
30. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.4031	267.44	108	
			(1)			177.72	72	
30. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.05075	20.52	1	
30. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.27405	2 040.43	559	
		Накладные расходы				80%	1 554	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	719	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 812	
	
31.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.145	1 208.93	175	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0029	249.405	1	
31. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	0.94975	181.930	173	
31. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00145	308.04		
			(1)			268.82		
31. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00145	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
31. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0145	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	139	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	64	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					379	
	
32.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		1.885	61.73	116	
		Объем: (0.145)*0.013*1000						
	
33.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска брандмаурной стенки акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.145	2 335.01	339	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0087	229.990	2	
33. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	1.8763	175.550	329	
33. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.01015	10.80		
33. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0087	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
33. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00145	38.33		
		Накладные расходы				80%	265	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	122	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					726	
	
34.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		5.51	170.42	939	
		Объем: (0.145)*0.038*1000						
	
35.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		1.885	104.81	198	
		Объем: 14.5*0.13						
	
36.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.21	303.66	367	
36. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.000363	200.120		
36. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	2.1538	161.570	348	
36. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000121	534.12		
			(1)			200.12		
36. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.000242	232.29		
			(1)			200.12		
36. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	1.0406	18.56	19	
		Накладные расходы				77%	268	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	167	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					802	
	
37.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		22.385	227.97	5 103	
		Объем: 1.21*18.5						
	
38.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		5.2	306.17	1 592	
38. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.0156	200.120	3	
38. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	9.308	161.570	1 504	
38. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.0052	534.12	3	
			(1)			200.12	1	
38. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.0104	232.29	2	
			(1)			200.12	2	
38. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	4.472	18.56	83	
		Накладные расходы				77%	1 160	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	723	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 476	
	
39.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		107.12	227.97	24 420	
		Объем: 5.2*20.6						
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	
40.	ГЭСНр 58-10-2 
(прим.)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м		1.59	14 398.10	22 893	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.1272	229.990	29	
40. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	88.6	140.874	161.570	22 761	
40. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.1272	1 037.49	132	
			(1)			229.99	29	
40. 4.	08.3.03.06	Проволока катанная	т	0.0005	0.000795			
40. 5.	23.3.10.02	Трубы	м	114.5	182.055			
		Накладные расходы				71%	16 181	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	11 851	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					50 925	
	
41.	С2 цена поставщ.	Звенья водосточных труб Д.100 (3м) 	шт		45	840.00	37 800	
	
42.	С3 цена поставщ.	Звенья водосточных труб Д.100 (1м) 	шт		8	308.00	2 464	
	
43.	ГЭСНр 58-10-4 
(прим.)	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.		0.32	21 749.54	6 960	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0256	229.990	6	
43. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	134.1	42.912	161.570	6 933	
43. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0256	1 037.49	27	
			(1)			229.99	6	
43. 4.	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт.	100	32			
43. 5.	08.3.03.06	Проволока катанная	т	0.0004	0.000128			
		Накладные расходы				71%	4 927	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	3 608	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 495	
	
44.	С4 цена поставщ.	Колено трубы 70 град д.100 	шт.		32	441.00	14 112	
	
45.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		1.24	1 341.82	1 664	
45. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	11.284	147.310	1 662	
45. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.1488	10.80	2	
		Накладные расходы				71%	1 180	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	864	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 708	
	
46.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		1.24	5 335.88	6 616	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.31	254.841	79	
46. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	38.9484	161.570	6 293	
46. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.1364	1 126.02	154	
			(1)			268.82	37	
46. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.062	874.68	54	
			(1)			268.82	17	
46. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.1116	1 037.49	116	
			(1)			229.99	26	
		Накладные расходы				92%	5 862	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	2 804	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 282	
	
47.	С5 цена поставщ.	Желоб водосточный( 4м ) д.150 	шт.		31	906.00	28 086	
	
48.	С6 цена поставщ.	Желоб водосточный( 3м ) д.150 	шт.		5	680.00	3 400	
	
49.	С7 цена поставщ.	Заглушка желоба  д.150 	шт.		3	165.00	495	
	
50.	С8 цена поставщ.	Крюк для желоба 	шт.		200	89.00	17 800	
	
51.	С9 цена поставщ.	Соединитель желоба д.150 	шт.		30	112.00	3 360	
	
52.	ГЭСНр 58-10-7 
(прим.)	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.		0.16	19 422.93	3 108	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0128	229.990	3	
52. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	119.7	19.152	161.570	3 094	
52. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0128	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
52. 4.	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт.	100	16			
52. 5.	08.3.03.06	Проволока катанная	т	0.0004	0.000064			
		Накладные расходы				71%	2 199	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 610	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 917	
	
53.	С10 цена поставщ.	Воронка (штуцер) водосточная 150/100 	шт		16	451.00	7 216	
	
54.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт		0.16	8 662.37	1 386	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0128	229.990	3	
54. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	8.496	161.570	1 373	
54. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0128	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				71%	977	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	716	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 078	
	
55.	С11 цена поставщ.	Отмет (слив) д.100 733	шт		16	733.00	11 728	
	
56.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт		1.34	5 840.27	7 826	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0134	229.990	3	
56. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	50.652	154.230	7 812	
56. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0134	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				71%	5 549	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	4 064	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 438	
	
57.	С12 цена поставщ.	Хомут водосточной трубы д.100 (в комплекте с дюбелями) 200	шт.		134	200.00	26 800	
	
	МАНСАРДА	
	ПЕРЕКРЫТИЕ НАД МАНСАРДОЙ	
58.	ГЭСН 11-01-008-03	Разборка засыпного утеплителя	м3		9.6	537.01	5 155	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	3.456	227.600	787	
58. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	16.896	161.570	2 730	
58. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	2.0736	964.28	2 000	
			(1)			200.12	415	
58. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	1.3824	308.04	426	
			(1)			268.82	372	
		Накладные расходы				94%	3 306	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 794	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 255	
	
59.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		1.03	578.17	596	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0206	229.990	5	
59. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	3.5535	161.570	574	
59. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0206	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
		Накладные расходы				94%	544	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	295	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 436	
	
60.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		126.072	34.52	4 352	
		Объем: 1.03*122.4						
	
61.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.816	578.17	472	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01632	229.990	4	
61. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	2.8152	161.570	455	
61. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.01632	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
		Накладные расходы				94%	431	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	234	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 138	
	
62.	12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		9.988	599.04	5 983	
		Объем: 0.816*122.4						
	
63.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		0.738	5 877.21	4 337	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.85608	236.015	202	
63. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	20.94444	169.310	3 546	
63. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.13284	308.04	41	
			(1)			268.82	36	
63. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.72324	1 037.49	750	
			(1)			229.99	166	
		Накладные расходы				94%	3 523	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 911	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 772	
	
64.	12.2.05.10-0016	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3		9.88	2 279.87	22 525	
		Объем: 73.8*0.13*1.03						
	
65.	ГЭСН 10-01-023-01 
(прим)	Укладка ходовых досок (ширина "ходового  мостика" -0,7м)	100 м		0.17	751.13	128	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0204	255.877	5	
65. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.8	0.646	158.310	102	
65. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.08	0.0136	874.68	12	
			(1)			268.82	4	
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0068	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
65. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00066	0.0001122	57 689.15	6	
		Накладные расходы				90%	96	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	46	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					270	
	
66.	11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		0.476	7 294.56	3 472	
		Объем: 17*2.8/100						
	
67.	ГЭСН 10-01-010-01 
(прим.)	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3		0.03	11 969.28	359	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.0108	229.990	2	
67. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22.5	0.675	158.310	107	
67. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.36	0.0108	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
67. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.00009	57 689.15	5	
67. 5.	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0.93	0.0279	7 448.65	208	
67. 6.	11.1.03.05-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.01	0.0003	4 877.98	1	
67. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.12	0.0036	7 372.62	27	
		Накладные расходы				90%	98	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	47	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					504	
	
	Скосы мансарды	
68.	ГЭСН 11-01-008-03	Разборка засыпного утеплителя	м3		6	537.01	3 222	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	2.16	227.600	492	
68. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	10.56	161.570	1 706	
68. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	1.296	964.28	1 250	
			(1)			200.12	259	
68. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	0.864	308.04	266	
			(1)			268.82	232	
		Накладные расходы				94%	2 066	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 121	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 409	
	
69.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.56	578.17	324	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0112	229.990	3	
69. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	1.932	161.570	312	
69. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0112	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				94%	296	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	161	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					781	
	
70.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		68.544	34.52	2 366	
		Объем: 0.56*122.4						
	
71.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.43	578.17	249	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0086	229.990	2	
71. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	1.4835	161.570	240	
71. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0086	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				94%	227	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	123	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					600	
	
72.	12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		5.263	599.04	3 153	
		Объем: 0.43*122.4						
	
73.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		0.4	5 877.21	2 351	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.464	236.015	110	
73. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	11.352	169.310	1 922	
73. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.072	308.04	22	
			(1)			268.82	19	
73. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.392	1 037.49	407	
			(1)			229.99	90	
		Накладные расходы				94%	1 910	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 036	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 297	
	
74.	12.2.05.10-0016	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3		6.18	2 279.87	14 090	
		Объем: 40*0.15*1.03						
	
	Стены мансарды	
75.	ГЭСН 10-01-008-09 
(прим)	Демонтаж метллической обшивкм стен мансарды	100 м2		0.1	2 876.86	288	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.161	0.0161	229.990	4	
75. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	17.57	1.757	154.230	271	
75. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.161	0.0161	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
		Накладные расходы				90%	248	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	118	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					654	
	
76.	ГЭСНр 53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен мансарды	100 м2		0.09	15 591.68	1 403	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.95	0.3555	268.820	96	
76. 2.	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	84.9	7.641	142.690	1 090	
76. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3.95	0.3555	874.68	311	
			(1)			268.82	96	
76. 4.	91.07.01-002	Бадьи: 2 м3	маш.-ч	3.95	0.3555	5.65	2	
76. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	9.8	0.882			
		Накладные расходы				73%	866	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	664	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 933	
	
77.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		1.26	578.17	728	
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0252	229.990	6	
77. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	4.347	161.570	702	
77. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0252	1 037.49	26	
			(1)			229.99	6	
		Накладные расходы				94%	666	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	361	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 755	
	
78.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		154.224	34.52	5 324	
		Объем: 1.26*122.4						
	
79.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.1	578.17	58	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.002	229.990		
79. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	0.345	161.570	56	
79. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.002	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
		Накладные расходы				94%	53	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	29	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					139	
	
80.	12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		1.224	599.04	733	
		Объем: 0.1*122.4						
	
81.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		0.09	5 877.21	529	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.1044	236.015	25	
81. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	2.5542	169.310	432	
81. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.0162	308.04	5	
			(1)			268.82	4	
81. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.0882	1 037.49	92	
			(1)			229.99	20	
		Накладные расходы				94%	430	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	233	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 192	
	
82.	12.2.05.10-0016	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3		1.391	2 279.87	3 171	
		Объем: 9*0.15*1.03						
	
83.	ГЭСН 10-01-012-04 
(прим)	Обшивка каркасных стен: досками под штукатурку	100 м2		0.1	17 352.90	1 735	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.74	0.074	229.990	17	
83. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	24.2	2.42	147.310	356	
83. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.74	0.074	1 037.49	77	
			(1)			229.99	17	
83. 4.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.006	0.0006	77 993.35	47	
83. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.0022	0.00022	60 190.64	13	
83. 6.	11.1.03.05-0076	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	2	0.2	5 436.09	1 087	
83. 7.	12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный марки: П-350	м2	105	10.5	14.74	155	
		Накладные расходы				90%	336	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	160	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 231	
	
84.	ГЭСН 10-01-008-09 
(прим)	Обивка  стен мансарды сталью оцинкованной. прим.	100 м2		0.1	4 169.99	417	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.023	229.990	5	
84. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	25.1	2.51	154.230	387	
84. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.23	0.023	1 037.49	24	
			(1)			229.99	5	
84. 4.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.0001	60 190.64	6	
		Накладные расходы				90%	353	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	169	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					938	
	
85.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.044	62 748.13	2 761	
		Объем: 0.1*0.44						
	
86.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251(ходовые доски и стены мансарды)	100 м2		0.472	303.66	143	
86. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.0001416	200.120		
86. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	0.84016	161.570	136	
86. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.0000472	534.12		
			(1)			200.12		
86. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.0000944	232.29		
			(1)			200.12		
86. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.40592	18.56	8	
		Накладные расходы				77%	105	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	65	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					313	
	
87.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		8.732	227.97	1 991	
		Объем: 0.472*18.5						
	
	ПЕРЕКРЫТИЕ	
88.	ГЭСН 10-01-023-01 
(прим)	Демонтаж ходовых досок	100 м		0.97	570.44	553	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	0.09312	255.877	24	
88. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.04	2.9488	158.310	467	
88. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.064	0.06208	874.68	54	
			(1)			268.82	17	
88. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.032	0.03104	1 037.49	32	
			(1)			229.99	7	
		Накладные расходы				90%	442	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	211	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 206	
	
89.	ГЭСН 11-01-008-03	Разборка засыпного утеплителя	м3		34.7	537.01	18 634	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	12.492	227.600	2 843	
89. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	61.072	161.570	9 867	
89. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	7.4952	964.28	7 227	
			(1)			200.12	1 500	
89. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	4.9968	308.04	1 539	
			(1)			268.82	1 343	
		Накладные расходы				94%	11 947	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	6 482	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					37 064	
	
90.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		4.015	578.17	2 321	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0803	229.990	18	
90. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	13.85175	161.570	2 238	
90. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0803	1 037.49	83	
			(1)			229.99	18	
		Накладные расходы				94%	2 121	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 151	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 592	
	
91.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		491.436	34.52	16 964	
		Объем: 4.015*122.4						
	
92.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		3.212	578.17	1 857	
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.06424	229.990	15	
92. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	11.0814	161.570	1 790	
92. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.06424	1 037.49	67	
			(1)			229.99	15	
		Накладные расходы				94%	1 697	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	921	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 474	
	
93.	12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		39.315	599.04	23 551	
		Объем: 3.212*122.4						
	
94.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		2.891	5 877.21	16 991	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	3.35356	236.015	791	
94. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	82.04658	169.310	13 891	
94. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.52038	308.04	160	
			(1)			268.82	140	
94. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	2.83318	1 037.49	2 939	
			(1)			229.99	652	
		Накладные расходы				94%	13 801	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	7 488	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					38 280	
	
95.	12.2.05.10-0016	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3		38.71	2 279.87	88 254	
		Объем: 289.1*0.13*1.03						
	
96.	ГЭСН 10-01-023-01 
(прим)	Укладка ходовых досок (ширина "ходового  мостика" -0,7м)	100 м		0.97	751.13	729	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.1164	255.877	30	
96. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.8	3.686	158.310	584	
96. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.08	0.0776	874.68	68	
			(1)			268.82	21	
96. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0388	1 037.49	40	
			(1)			229.99	9	
96. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00066	0.0006402	57 689.15	37	
		Накладные расходы				90%	553	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	264	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 546	
	
97.	11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		2.716	7 294.56	19 812	
		Объем: 97*2.8/100						
	
98.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.51	303.66	459	
98. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.000453	200.120		
98. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	2.6878	161.570	434	
98. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000151	534.12		
			(1)			200.12		
98. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.000302	232.29		
			(1)			200.12		
98. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	1.2986	18.56	24	
		Накладные расходы				77%	334	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	208	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 002	
	
99.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		27.935	227.97	6 368	
		Объем: 1.51*18.5						
	
100.	ГЭСН 10-01-010-01 
(прим.)	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3		0.188	11 969.28	2 250	
		Объем: 0.05*0.05*75.4						
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.06768	229.990	16	
100. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22.5	4.23	158.310	670	
100. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.36	0.06768	1 037.49	70	
			(1)			229.99	16	
100. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.000564	57 689.15	33	
100. 5.	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0.93	0.17484	7 448.65	1 302	
100. 6.	11.1.03.05-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.01	0.00188	4 877.98	9	
100. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.12	0.02256	7 372.62	166	
		Накладные расходы				90%	617	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	295	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 162	
	
101.	ГЭСНр 54-4-3	Нашивка досок (ремонт балок)	100 м		0.44	19 241.77	8 466	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	0.6644	229.990	153	
101. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	30.1268	161.570	4 868	
101. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	0.6644	1 037.49	689	
			(1)			229.99	153	
101. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0143	0.006292	57 689.15	363	
101. 5.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.3454	7 372.62	2 547	
		Накладные расходы				72%	3 615	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	3 213	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 295	
	
102.	01.7.15.02-0021 
(прим)	Болт анкерный диаметром 14 мм	шт.		88	10.78	949	
	
103.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.002	98 286.21	197	
		Объем: 0.000025*88						
	
104.	01.7.15.11-0046 
(прим)	Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм	кг		1.872	117.69	220	
		Объем: 0.021276596*88						
	
	Ремонт дымоходов и вентканалов	
105.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб кирпичных над  кровлей (прим).	100 м2		0.387	3 361.61	1 301	
105. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	8.83134	147.310	1 301	
		Накладные расходы				84%	1 093	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	624	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 018	
	
106.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Демонтаж оголовников: бетонных (прим)	100 м3		0.0053	67 591.53	358	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.296	0.0969688	264.155	26	
106. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	286.416	1.5180048	165.230	251	
106. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	15.04	0.079712	1 126.02	90	
			(1)			268.82	21	
106. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.224	0.0064872	874.68	6	
			(1)			268.82	2	
106. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	0.0011448	964.28	1	
			(1)			200.12		
106. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	14.568	0.0772104	11.58	1	
106. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.816	0.0096248	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				80%	222	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	122	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					701	
	
107.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.047	113 631.77	5 341	
		Объем: 0.5*2+0.5+8*0.4						
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.20821	268.820	56	
107. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	28.63287	161.570	4 626	
107. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.06251	874.68	55	
			(1)			268.82	17	
107. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.1457	308.04	45	
			(1)			268.82	39	
107. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.0188	20.52		
107. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.235	2 615.05	615	
		Накладные расходы				66%	3 090	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	2 341	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 772	
	
108.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.197	13 896.92	2 738	
		Объем: 4200*0.047						
	
109.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3 каналов	100 м		0.01	124 312.91	1 243	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.32	0.0332	268.820	9	
109. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	672.74	6.7274	161.570	1 087	
109. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.01	874.68	9	
			(1)			268.82	3	
109. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.32	0.0232	308.04	7	
			(1)			268.82	6	
109. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.6	0.006	20.52		
109. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5.36	0.0536	2 615.05	140	
		Накладные расходы				66%	723	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	548	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 514	
	
110.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.044	13 896.92	611	
		Объем: 2200*0.01*2						
	
111.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до8 каналов	100 м		0.032	435 095.20	13 923	
		Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.62	0.37184	268.820	100	
111. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2354.59	75.34688	161.570	12 174	
111. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3.5	0.112	874.68	98	
			(1)			268.82	30	
111. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	8.12	0.25984	308.04	80	
			(1)			268.82	70	
111. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.1	0.0672	20.52	1	
111. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	18.76	0.60032	2 615.05	1 570	
		Накладные расходы				66%	8 101	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	6 137	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					28 161	
	
112.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.493	13 896.92	6 851	
		Объем: (2200*0.032)*7						
	
113.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м		0.005	310 782.29	1 554	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	0.0415	268.820	11	
113. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1681.85	8.40925	161.570	1 359	
113. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.5	0.0125	874.68	11	
			(1)			268.82	3	
113. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5.8	0.029	308.04	9	
			(1)			268.82	8	
113. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.5	0.0075	20.52		
113. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	13.4	0.067	2 615.05	175	
		Накладные расходы				66%	904	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	685	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 143	
	
114.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.055	13 896.92	764	
		Объем: (2200*0.005)*5						
	
115.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3		0.0053	106 487.48	564	
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.121211	264.155	32	
115. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	1.897506	165.230	314	
115. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.09964	1 126.02	112	
			(1)			268.82	27	
115. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.008109	874.68	7	
			(1)			268.82	2	
115. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.001431	964.28	1	
			(1)			200.12		
115. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.096513	11.58	1	
115. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.012031	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
115. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.0004081	20.52		
115. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.000265	89 253.46	24	
115. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.0002279	57 689.15	13	
115. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.0001378	11 636.25	2	
115. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.000371	5 768.85	2	
115. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.004558	5 760.02	26	
115. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.212	234.83	50	
		Накладные расходы				80%	277	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	152	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					993	
	
116.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.541	3 014.79	1 631	
		Объем: 1.02*0.53						
	
117.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.387	26 799.91	10 372	
117. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	50.8518	175.550	8 927	
117. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.4257	10.80	5	
117. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.13545	20.52	3	
117. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.70434	2 040.43	1 437	
		Накладные расходы				67%	5 981	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	3 571	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					19 924	
	
118.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.387	2 335.01	904	
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.02322	229.990	5	
118. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	5.00778	175.550	879	
118. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.02709	10.80		
118. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.02322	1 037.49	24	
			(1)			229.99	5	
118. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00387	38.33		
		Накладные расходы				80%	707	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	327	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 938	
	
119.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		14.71	170.42	2 507	
		Объем: (0.387)*0.038*1000						
	
120.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		5.031	104.81	527	
		Объем: 38.7*0.13						
	
	Выход фановых стояков на кровле	
121.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (фановый стояк)	100 м		0.16	14 599.63	2 336	
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0112	257.726	3	
121. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	9.856	187.360	1 847	
121. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.0048	1 126.02	5	
			(1)			268.82	1	
121. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.0032	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
121. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0032	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
121. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.2512	20.52	5	
121. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0004256	161 777.88	69	
121. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.64	630.92	404	
		Накладные расходы				98%	1 813	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 036	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 185	
	
122.	24.3.03.02-0002	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		15.968	226.22	3 612	
		Объем: (0.16)*99.8						
	
123.	24.1.02.01-0024	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм	10 шт.		0.8	1 790.01	1 432	
	
124.	ГЭСН 20-02-004-01	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт		10	229.63	2 296	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.1	229.990	23	
124. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	10.3	167.270	1 723	
124. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	2.6	33.60	87	
124. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.1	1 037.49	104	
			(1)			229.99	23	
124. 5.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.002	89 253.46	179	
124. 6.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	2.46	82.84	204	
		Накладные расходы				98%	1 711	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	978	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 985	
	
125.	С99.1-01.08-0012	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		10	5 457.98	54 580	
	
126.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		32.19	510.71	16 440	
	
127.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		32.19	262.99	8 466	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 908 336	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 873 754	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					860 089	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 20, 28, 105; %=71 - по стр. 3-7, 12, 15, 40, 43, 45, 52, 54, 56; %=90 - по стр. 13, 14, 16, 18, 65, 67, 75, 83, 84, 88, 96, 100; %=73 - по стр. 21, 29, 76; %=92 - по стр. 24, 27, 46; %=80 - по стр. 30, 31, 33, 106, 115, 118; %=77 - по стр. 36, 38, 86, 98; %=94 - по стр. 58, 59, 61, 63, 68, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 89, 90, 92, 94; %=72 - по стр. 101; %=66 - по стр. 107, 109, 111, 113; %=67 - по стр. 117)					463 717	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 20, 28, 36, 38, 86, 98, 105; %=52 - по стр. 3-7, 12, 15, 40, 43, 45, 52, 54, 56; %=43 - по стр. 13, 14, 16, 18, 65, 67, 75, 83, 84, 88, 96, 100; %=56 - по стр. 21, 29, 76; %=44 - по стр. 24, 27, 46, 106, 115; %=37 - по стр. 30, 31, 33, 118; %=51 - по стр. 58, 59, 61, 63, 68, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 89, 90, 92, 94; %=64 - по стр. 101; %=50 - по стр. 107, 109, 111, 113; %=40 - по стр. 117)					261 712	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 599 183	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					9 676	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 121, 124)					3 524	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 121, 124)					2 014	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					15 214	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					24 906	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					24 906	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 639 303	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	56 481	
	ИТОГО					2 695 784	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	53 916	
	ИТОГО					2 749 700	
	НДС 18%				18	494 946	
	ВСЕГО С НДС					3 244 646.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					467 241.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					263 726	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»:                                                    Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»:                                                 Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)