Приложение № 3
к постановлению администрации
 городского округа «Город Калининград»
от 12 мая 2012 года № 764

План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2012-2013гг.
МУП КХ «Водоканал» 

№
п/п	Наименование мероприятий	Объем работ	Стоимость,
тыс.руб.	Срок
исполнения	Исполнитель	
		Ед.изм.	К-во	Всего	В т.ч. из
бюджета			
Южная водопроводная станция № 2	
1	Ремонт кровли над РУ 0,6 кВ водозабора «Рыбное»	м2	432	772,00		3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
2	Ремонт Затворного бака	шт.	3	630,00		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
3	Устранение утечки в стене насосной станции	шт.	1	200,00		2 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
4	Замена ворот в цехе коагуляции и хлораторной	м2	62	60,00		3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
5	Монтаж камерно-лучевых смесителей	шт.	2	20,00		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
Цех ВНС 3-4-го подъема	
6	Ремонт отмосток насосных станций	м2	343	141,00		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
								
7	Установка электрокотла отопления ВНС «Тихорецкая»	шт.	1	66,00		выполнено	МУП КХ «Водоканал»	
8	Ремонт и замена задвижек на насосных станциях	шт.	109	214,50		1-4 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
9	Замена трубопроводов на насосных станциях 3-4го подъемов	м.п.	209	418,00		1-4 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
Цех водопровода	
10	Восстановление дорожного покрытия	м2	2586	3198,00		1-4 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
11	Ремонт сетей водопровода	м.п.	152	744,80		1-4 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
12	Ремонт водопроводных вводов	м.п.	150	127,50		1-4 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
13	Ремонт и замена задвижек свыше 100мм.	шт.	107	662,00		1-4 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
14	Ремонт и замена пробковых кранов и задвижек до 100мм.	шт.	232	605,00		1-4 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
15	Замена водопроводных вводов	м.п.	1680	2856,00		1-4 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
16	Ремонт колодцев	шт.	77	231,00		1-4 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
17	Устройство перемычки Д 900, 200 мм. в пос. М.Борисово	м.п.	10	150,00		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
18	Переключение сети по ул. Галицкого	об	1	200,00		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
ВКУ пос.А. Космодемьянского	
19	Замена бытовки обслуживающего персонала КНС-4	шт.	1	120,00		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
20	Замена водопроводной сети по ул. 1-я Алтайская	м.п.	150	375,00		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
21	Замена вводов	м.п.	60	102,00		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
22	Замена вводов в п. Совхозный	м.п.	50	85,00		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
23	Замена ввода КНС  в п. Прегольский	м.п.	30	54,87		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
24	Ремонт и замена задвижек на сетях	шт.	5	27,90		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
25	Ремонт водопроводных колодцев	шт.	3	21,80		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
Цех канализационных очистных сооружений	
26	Укрепление стенок канала ОС-1 шпунтом и досками	м.п.	100	410,00		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
Ремонтно-механический цех	
27	Ремонт межпанельных швов	м.п.	100	490,00		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
ВКУ пос.Чкаловск.	
28	Ремонт и замена опускных труб на скважинах	м.п.	225	760,00		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
29	Замена водопроводной сети	м.п.	320	800,00		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
ВКУ пос. Прибрежный	
30	Замена задвижек на сетях	шт.	2	13,00		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
Прочие объекты	
31	Обследование и чистка водозаборов ЮВС-2, «Нескучное», «Рыбное»	об.	3	210,00		2-3 квартал	МУП КХ «Водоканал»	
                                Всего:                                                            13978,800