«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 911 813	руб.	Смета на сумму:	3 911 813	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши МКД № 27-29  по ул. Красная	
Сметная стоимость:	3 911.813	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.253	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	563.747	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	8.56	553.31	459.71	93.60	4 736.33	3 935.12	801.22	14.4	6.14	61 585	56 666	4 919	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			3 895.77				84%	47 599			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 361.07				48%	27 200			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 993.17					136 384			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	8.56	172.51	127.80	44.71	1 476.69	1 093.97	382.72	14.41	7.71	18 715	15 764	2 951	
					6.95			59.49	1	14.38			855	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			957.37				71%	11 799			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			749.75				52%	8 642			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 183.81					39 156			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.28	5 502.93	806.67	80.64	23 552.54	3 452.55	345.14	14.41	8	117 703	49 751	2 761	
				4 615.62			19 754.85		3.3	1		65 191		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 865.62				71%	35 323			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 244.16				52%	25 871			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 662.31					178 897			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	14.4	7.93	4 366	2 088	53	
				5 258.63			525.86		4.23	1		2 224		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 482			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	1 086			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					6 934			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.5	9 291.30	1 358.31	34.61	13 936.95	2 037.47	51.92	14.4	7.89	65 292	29 339	410	
				7 898.38			11 847.57		3	1		35 543		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 691.10				71%	20 831			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 324.36				52%	15 256			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 952.41					101 379			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.15	4 519.16	360.82	36.65	677.87	54.12	5.50	14.4	7.97	3 420	779	44	
				4 121.69			618.25		4.2	1		2 597		
	Накладные расходы		83%			44.92				71%	553			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.18				52%	405			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					757.97					4 378			
	
7.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	0.55	1 615.27	301.17	30.24	888.40	165.64	16.63	14.4	6.44	5 296	2 385	107	
				1 283.86	5.99		706.12	3.29	3.97	14.41		2 803	47	
	Накладные расходы		86%			145.28				73%	1 775			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			118.25				56%	1 362			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 151.93					8 433			
	
8.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка люка выхода на кровлю, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	14.41	5.49	376	376	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	267			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					838			
	
9.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Установка в жилых и общественных зданиях люка выхода на кровлю из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0072	21 223.62	2 306.00	742.65	152.81	16.60	5.35	14.4	6.38	637	239	34	
				18 174.97	28.43		130.86	0.20	2.78	14.43		364	3	
	Объем: 0.85*0.85													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.81				90%	218			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.07				43%	104			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.69					959			
	
10.	С цена поставщик. 
Окно-люк, м2	0.7225	2 199.48			1 589.13					7 087			
				2 199.48			1 589.13		4.46			7 087		
	Объем: 0.85*0.85													
	Поправки: М: =9342.56*1.05/4.46	
	
11.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	14.552	221.62	101.80	102.69	3 224.95	1 481.36	1 494.31	14.4	3.55	27 182	21 332	5 305	
				17.13	1.45		249.28	21.10	2.19	14.47		546	305	
	Объем: 428*2+856*0.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 352.21				77%	16 660			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			901.48				48%	10 386			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 478.64					54 228			
	
12.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	301.2264	36.04			10 856.20					54 161			
				36.04			10 856.20		179.8			54 161		
	Объем: 14.552*20.7													
	
13.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	8.56	286.73	122.64	1.26	2 454.40	1 049.76	10.81	14.4	8.08	19 176	15 117	87	
				162.83			1 393.82		2.85	1		3 972		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			976.28				79%	11 942			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			671.85				51%	7 710			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 102.52					38 828			
	
14.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1070	13.13			14 049.10					46 053			
				13.13			14 049.10		43.04			46 053		
	Объем: 856*1.25													
	
15.	ТЕР 12-01-007-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	8.56	29 858.10	1 069.80	288.58	255 585.37	9 157.48	2 470.20	14.4	7.52	1 338 518	131 868	18 576	
				28 499.73	32.46		243 957.69	277.88	4.87	14.39		1 188 074	3 999	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			10 190.19				92%	124 998			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			5 189.45				44%	59 781			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					270 965.01					1 523 297			
	
16.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	1.275	153.74	72.11	75.20	196.01	91.93	95.88	14.4	6.73	2 000	1 324	645	
				6.43	5.48		8.20	6.98	3.73	14.38		31	100	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1851:[ М-(22.16=42.61*0.52) ];  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			106.82				92%	1 310			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			54.40				44%	627			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.23					3 937			
	
17.	С цена поставщик. 
держатель решетки снегозащитный (4шт), к-т	63	244.84			15 425.11					68 796			
				244.84			15 425.11		4.46			68 796		
	Поправки: М: =1050*1.04/4.46	
	
18.	С цена поставщик. 
решетка снегозащитная - 2м, шт	63	186.55			11 752.47					52 416			
				186.55			11 752.47		4.46			52 416		
	Поправки: М: =800*1.04/4.46	
	
19.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали,  желобов, 100 м труб и покрытий	1.275	75.57	75.35	0.22	96.35	96.07	0.28	14.4	5.59	1 385	1 383	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			79.74				71%	982			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			62.45				52%	719			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					238.53					3 086			
	
20.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.275	8 813.16	326.90	31.86	11 236.78	416.80	40.62	14.4	7.48	40 369	6 002	304	
				8 454.40	3.03		10 779.36	3.86	3.16	14.36		34 063	55	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			454.31				92%	5 572			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			231.36				44%	2 665			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 922.46					48 607			
	
21.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник), 100 м2 покрытия	1.275	11 907.97	1 173.45	33.16	15 182.66	1 496.15	42.28	14.4	7.8	58 032	21 545	330	
				10 701.36	3.78		13 644.23	4.81	2.65	14.39		36 157	69	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 621.04				92%	19 885			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			825.53				44%	9 510			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 629.22					87 427			
	
22.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.15	219.24	204.34	14.90	32.89	30.65	2.23	14.41	8.05	460	442	18	
									4.11	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			32.49				90%	398			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			16.55				43%	190			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81.93					1 048			
	
23.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.15	373.54	335.71	26.60	56.03	50.36	3.99	14.41	8.05	765	726	32	
				11.23			1.68		4.11	1		7		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			53.38				90%	653			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			27.19				43%	312			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136.61					1 731			
	
24.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.066	23 811.97			1 571.59					3 044			
				23 811.97			1 571.59		46 126.25			3 044		
	Объем: 0.15*0.44													
	
25.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.8	7 415.77	333.04	13.17	5 932.62	266.43	10.54	14.4	8.06	18 966	3 837	85	
				7 069.56			5 655.65		2.66	1		15 044		
	Накладные расходы		83%			221.14				71%	2 724			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			173.18				52%	1 995			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 326.94					23 686			
	
26.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	14.4	8.06	2 440	999	8	
				5 145.09			617.41		2.32	1		1 432		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	709			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	519			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 669			
	
27.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	14.4	8.06	1 036	415	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 546			
	
28.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.06	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 547			
	
29.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.8	1 357.93	327.73	1.01	1 086.34	262.18	0.81	14.4	8.08	7 166	3 775	7	
				1 029.19			823.35		4.11	1		3 384		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			217.61				71%	2 680			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.42				52%	1 963			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 474.37					11 809			
	
30.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.145	8 572.20	5 513.35	252.31	1 242.97	799.44	36.58	14.4	6.63	13 793	11 512	243	
				2 806.54	60.12		406.95	8.72	5.01	14.42		2 039	126	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			630.36				66%	7 681			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			509.14				50%	5 819			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 382.48					27 293			
	
31.	ТССЦ 404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.609	3 259.00			1 984.73					9 128			
				3 259.00			1 984.73		14 989.02			9 128		
	Объем: 0.145*4200													
	
32.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( до 4 каналов), 100 м труб	0.058	13 930.32	9 132.45	284.04	807.96	529.68	16.47	14.4	6.63	9 048	7 627	109	
				4 513.83	67.62		261.80	3.92	5.01	14.41		1 312	57	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			416.21				66%	5 071			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			336.17				50%	3 842			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 560.34					17 961			
	
33.	ТССЦ 404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.3828	3 259.00			1 247.55					5 738			
				3 259.00			1 247.55		14 989.02			5 738		
	Объем: 0.058*2200*3													
	
34.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 5 каналов), 100 м труб	0.027	18 573.76	12 176.60	378.72	501.49	328.77	10.23	14.4	6.63	5 616	4 734	68	
				6 018.44	90.16		162.50	2.43	5.01	14.41		814	35	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			258.34				66%	3 148			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			208.66				50%	2 385			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					968.48					11 148			
	
35.	ТССЦ 404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.2376	3 259.00			774.34					3 561			
				3 259.00			774.34		14 989.02			3 561		
	Объем: 0.027*2200*4													
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 8 каналов), 100 м труб	0.06	32 504.08	21 309.05	662.76	1 950.24	1 278.54	39.77	14.4	6.63	21 841	18 411	264	
				10 532.27	157.78		631.94	9.47	5.01	14.41		3 166	136	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			1 004.65				66%	12 241			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			811.45				50%	9 274			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 766.33					43 356			
	
37.	ТССЦ 404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.924	3 259.00			3 011.32					13 850			
				3 259.00			3 011.32		14 989.02			13 850		
	Объем: 0.06*2200*7													
	
38.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.462	1 567.41	240.58	37.36	724.14	111.15	17.26	14.41	7.23	4 753	1 602	125	
				1 289.47	2.11		595.74	0.97	5.08	14.41		3 026	14	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			111.00				84%	1 357			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			67.27				48%	776			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					902.41					6 886			
	
39.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.357	2 412.79	1 295.60	2.05	861.37	462.53	0.73	14.4	5.48	8 329	6 660	4	
				1 115.14			398.10		4.18	1		1 664		
	Накладные расходы		79%			365.40				67%	4 462			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			231.27				40%	2 664			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 458.03					15 455			
	
40.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.357	2 291.60	114.18	14.24	818.10	40.76	5.08	14.4	8	2 805	587	41	
				2 163.18			772.26		2.82	1		2 178		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			38.72				80%	470			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			19.16				37%	217			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					875.98					3 492			
	
	Мансарда	
	
41.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя	64.2	47.52	20.14	27.38	3 050.78	1 292.73	1 758.05	14.4	5.91	29 005	18 615	10 390	
					3.42			219.82	2.44	14.4			3 165	
	Объем: 428*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			1 633.55				92%	20 038			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			831.90				44%	9 583			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 516.24					58 626			
	
42.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	64.2	202.86	119.97	82.89	13 023.32	7 701.95	5 321.38	14.4	7.9	152 947	110 908	42 039	
									17.72	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			6 931.76				77%	85 399			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4 621.17				48%	53 236			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 576.25					291 582			
	
43.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	1309.68	26.54			34 758.91					115 619			
				26.54			34 758.91		88.28			115 619		
	Объем: 428*3*1.02													
	
44.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.28	286.73	122.64	1.26	1 227.20	524.88	5.40	14.4	8.08	9 588	7 558	44	
				162.83			696.91		2.85	1		1 986		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			488.14				79%	5 971			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			335.92				51%	3 855			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 051.26					19 413			
	
45.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	535	7.04			3 766.40					12 310			
				7.04			3 766.40		23.01			12 310		
	Объем: 428*1.25													
	
	Прочее	
	
46.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	61.8829	7.56		7.56	467.94		467.94		6.07	2 840		2 840	
										1				
	Объем: 34.24+21.8303+1.4406+3.4776+0.8944													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
47.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., т	61.8829	27.63		27.63	1 709.68		1 709.68		6.07	10 378		10 378	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	469 869.04	38 523.19	15 177.78			2 458 628	554 781	103 232	
			416 168.07	622.94				1 800 614	8 966	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	469 869.04	38 523.19	15 177.78			2 458 628	554 781	103 232	
			416 168.07	622.94				1 800 614	8 966	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	100 786.85					391 763			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 38; %=71 - по стр. 2-6, 8, 19, 25-29; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 22, 23; %=77 - по стр. 11, 42; %=79 - по стр. 13, 44; %=92 - по стр. 15, 16, 20, 21, 41; %=66 - по стр. 30, 32, 34, 36; %=67 - по стр. 39; %=80 - по стр. 40)	37 048.63					454 791			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 38, 42; %=52 - по стр. 2-6, 8, 19, 25-29; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 22, 23; %=51 - по стр. 13, 44; %=44 - по стр. 15, 16, 20, 21, 41; %=50 - по стр. 30, 32, 34, 36; %=40 - по стр. 39; %=37 - по стр. 40)	23 331.56					268 580			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	530 249.23					3 181 999			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	530 249.23					3 181 999			
	Строительный контроль 2,14%	11 347.33					68 095			
	Всего со строительным контролем	541 596.56					3 250 094			
	Непредвиденные работы 2%	10 831.93					65 002			
	Всего с непредвиденными работами	552 428.49					3 315 096			
	НДС	99 437.13					596 717			
	Всего с НДС	651 865.62					3 911 813			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	37 048.63					454 791			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	23 331.56					268 580			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)