«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	12 689 970	руб.	Смета на сумму:	12 689 970	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
________________ /__С.Б.Русович_____ /	________________ /__А.В.Ходорович___ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«__24____»_сентября__________ 20_14__г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Павлика Морозова,50-62	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт многоквартирного дома (по решению суда)	
Сметная стоимость:	12 689.970	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	18.900	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 697.860	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	10.856	165.55	131.65	33.90	1 797.21	1 429.19	368.02	15.07	6.82	24 048	21 538	2 510	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 414.90				84%	18 092			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			857.51				48%	10 338			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 069.62					52 478			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	10.856	172.51	127.80	44.71	1 872.77	1 387.40	485.37	15.08	8.6	25 096	20 922	4 174	
					6.95			75.45	1	15.05			1 136	
	Накладные расходы		83%			1 214.17				71%	15 661			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			950.85				52%	11 470			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 037.79					52 227			
	
3.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.08	4 519.16	360.82	36.65	4 880.69	389.69	39.58	15.07	8.41	21 429	5 873	333	
				4 121.69			4 451.43		3.42	1		15 224		
	Накладные расходы		83%			323.44				71%	4 170			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			253.30				52%	3 054			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 457.43					28 653			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	3.2054	9 291.30	1 358.31	34.61	29 782.33	4 353.93	110.94	15.07	8.33	140 718	65 614	924	
				7 898.38			25 317.47		2.93	1		74 180		
	Накладные расходы		83%			3 613.76				71%	46 586			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 830.05				52%	34 119			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 226.15					221 423			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.8775	6 775.72	1 449.90	67.19	5 945.69	1 272.29	58.96	15.07	8.36	38 309	19 173	493	
				5 258.63			4 614.45		4.04	1		18 642		
	Накладные расходы		83%			1 056.00				71%	13 613			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			826.99				52%	9 970			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 828.68					61 892			
	
6.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	10.856	172.51	127.80	44.71	1 872.77	1 387.40	485.37	15.08	8.6	25 096	20 922	4 174	
					6.95			75.45	1	15.05			1 136	
	Накладные расходы		83%			1 214.17				71%	15 661			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			950.85				52%	11 470			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 037.79					52 227			
	
7.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	10.856	2 713.25	179.98	29.68	29 455.04	1 953.86	322.21	15.08	8.62	116 496	29 464	2 777	
				2 503.59	4.13		27 178.97	44.84	3.1	17.62		84 255	790	
	Накладные расходы		83%			1 658.92				71%	21 480			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 299.16				52%	15 732			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32 413.12					153 708			
	
8.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	10.856	286.73	122.64	1.26	3 112.72	1 331.34	13.71	15.07	8.51	25 395	20 063	117	
				162.83			1 767.68		2.95	1		5 215		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			1 238.15				79%	15 850			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			852.06				51%	10 232			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 202.92					51 477			
	
9.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1357	13.13			17 817.41					57 279			
				13.13			17 817.41		42.21			57 279		
	Объем: 10.856*125													
	
10.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	10.856	8 171.06	405.87	165.99	88 704.99	4 406.12	1 801.96	15.08	7.56	476 052	66 444	13 623	
				7 599.20	14.91		82 496.92	161.89	4.8	15.06		395 985	2 438	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4 933.45				92%	63 371			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 512.41				44%	30 308			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					96 150.85					569 732			
	
11.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	128.96	137.86			17 778.43					68 654			
				137.86			17 778.43		532.37			68 654		
	
12.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	28.9052	221.62	101.80	102.69	6 405.84	2 942.49	2 968.20	15.08	3.6	56 257	44 373	10 686	
				17.13	1.45		495.15	41.91	2.42	15.14		1 198	635	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			2 685.96				77%	34 656			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 790.64				48%	21 604			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 882.44					112 517			
	
13.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	598.33764	36.04			21 564.09					121 869			
				36.04			21 564.09		203.68			121 869		
	Объем: (28.9052)*20.7													
	
14.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0297	21 223.62	2 306.00	742.65	630.34	68.49	22.06	15.07	6.77	2 687	1 032	149	
				18 174.97	28.43		539.80	0.84	2.79	17.6		1 506	15	
	Объем: 0.66*0.9*5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			73.49				90%	942			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			37.44				43%	450			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					741.27					4 080			
	
15.	С Цена поставщик. 
Окно-люк, м2	2.97	1 485.15			4 410.91					18 658			
				1 485.15			4 410.91		4.23			18 658		
	Объем: 0.66*0.9*5													
	Поправки: М: =6220*1.01/4.23	
	
16.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.22	8 572.20	5 513.35	252.31	1 885.88	1 212.94	55.51	15.07	7.32	21 451	18 279	406	
				2 806.54	60.12		617.44	13.23	4.48	16.75		2 766	222	
	Объем: 22*1													
	Накладные расходы		78%			956.41				66%	12 211			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			772.49				50%	9 251			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 614.78					42 912			
	
17.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.924	3 086.00			2 851.46					11 806			
				3 086.00			2 851.46		12 777.23			11 806		
	Объем: 0.22*4200													
	
18.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.22	4 643.44	3 044.15	94.68	1 021.56	669.71	20.83	15.07	7.31	11 728	10 093	152	
				1 504.61	22.54		331.01	4.96	4.48	16.74		1 483	83	
	Накладные расходы		78%			526.24				66%	6 716			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			425.04				50%	5 088			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 972.84					23 532			
	
19.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.484	3 086.00			1 493.62					6 184			
				3 086.00			1 493.62		12 777.23			6 184		
	Объем: 0.22*2200													
	
20.	ТЕР 46-02-009-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных, 100 м2	1.76	278.54	278.54		490.23	490.23		15.07	1	7 388	7 388		
									1	1				
	Объем: 22*(0.9+0.7)*2*2.5													
	Накладные расходы		99%			485.33				84%	6 206			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			294.14				48%	3 546			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 269.70					17 140			
	
21.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	3.52	2 412.79	1 295.60	2.05	8 493.02	4 560.51	7.22	15.07	5.89	82 547	68 727	43	
				1 115.14			3 925.29		3.51	1		13 778		
	Объем: 22*(0.9+0.7)*2*5													
	Накладные расходы		79%			3 602.80				67%	46 047			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 280.26				40%	27 491			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 376.08					156 085			
	
22.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.056	2 291.60	114.18	14.24	2 419.93	120.58	15.03	15.07	8.43	8 340	1 817	127	
				2 163.18			2 284.32		2.8	1		6 396		
	Объем: 22*(0.9+0.7)*2*1.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			114.55				80%	1 454			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			56.67				37%	672			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 591.15					10 466			
	
23.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обетонирование оголовников, 1 м3	2.5	1 507.44	278.21	47.43	3 768.60	695.53	118.58	15.07	6.4	24 240	10 482	759	
				1 181.80	1.96		2 954.50	4.90	4.4	15.08		13 000	74	
	Накладные расходы		99%			693.43				84%	8 867			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			420.26				48%	5 067			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 882.28					38 174			
	
24.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.8066	75.57	75.35	0.22	136.52	136.13	0.40	15.07	6	2 054	2 051	2	
									1	1				
	Объем: 90.33*2													
	Накладные расходы		83%			112.99				71%	1 456			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			88.48				52%	1 067			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					337.99					4 577			
	
25.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.8066	8 813.16	326.90	31.86	15 921.86	590.58	57.56	15.07	8.05	57 170	8 900	463	
				8 454.40	3.03		15 273.72	5.46	3.13	15.03		47 807	82	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			643.72				92%	8 263			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			327.82				44%	3 952			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 893.41					69 386			
	
26.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.728	11 907.97	1 173.45	33.16	8 669.00	854.27	24.14	15.07	8.57	33 492	12 874	207	
				10 701.36	3.78		7 790.59	2.75	2.62	15.06		20 411	41	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			925.58				92%	11 882			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			471.36				44%	5 683			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 065.94					51 056			
	
27.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.7	7 415.77	333.04	13.17	12 606.81	566.17	22.39	15.07	8.49	42 854	8 532	190	
				7 069.56			12 018.25		2.84	1		34 132		
	Накладные расходы		83%			469.92				71%	6 058			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			368.01				52%	4 437			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 444.74					53 348			
	
28.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.34	5 731.49	578.30	8.10	1 948.71	196.62	2.75	15.07	8.5	7 325	2 963	23	
				5 145.09			1 749.33		2.48	1		4 338		
	Объем: 17*2													
	Накладные расходы		83%			163.19				71%	2 104			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.80				52%	1 541			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 239.71					10 969			
	
29.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.17	8 719.75	480.56	8.10	1 482.36	81.70	1.38	15.07	8.5	2 894	1 231	12	
				8 231.09			1 399.29		1.18	1		1 651		
	Накладные расходы		83%			67.81				71%	874			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			53.11				52%	640			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 603.28					4 408			
	
30.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.42	1 357.93	327.73	1.01	1 928.26	465.38	1.43	15.07	8.51	13 003	7 013	12	
				1 029.19			1 461.45		4.09	1		5 977		
	Накладные расходы		83%			386.27				71%	4 979			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			302.50				52%	3 647			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 617.02					21 629			
	
31.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.17	4 604.75	480.56	8.10	782.81	81.70	1.38	15.07	8.5	2 992	1 231	12	
				4 116.09			699.74		2.5	1		1 749		
	Накладные расходы		83%			67.81				71%	874			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			53.11				52%	640			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					903.73					4 506			
	
32.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, 100 м досок	0.22	1 013.25	295.48	18.24	222.92	65.01	4.01	15.07	8.49	1 528	980	34	
				699.53			153.90		3.34	1		514		
	Объем: 5.5*4													
	Накладные расходы		86%			55.91				73%	715			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			45.51				56%	549			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.34					2 792			
	
	чердачное перекрытие	
	
33.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя	109.65	47.52	20.14	27.38	5 210.57	2 207.91	3 002.66	15.07	6.52	52 851	33 273	19 577	
					3.42			375.44	2.05	15.08			5 662	
	Объем: 731*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			2 790.02				92%	35 820			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 420.84				44%	17 131			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 421.43					105 803			
	
34.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	7.31	286.73	122.64	1.26	2 095.99	896.47	9.23	15.07	8.51	17 100	13 510	79	
				162.83			1 190.29		2.95	1		3 511		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			833.72				79%	10 673			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			573.74				51%	6 890			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 503.45					34 663			
	
35.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	913.75	7.04			6 432.80					20 824			
				7.04			6 432.80		22.79			20 824		
	Объем: 7.31*125													
	
36.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	109.65	202.86	119.97	82.89	22 243.11	13 154.49	9 088.61	15.07	8.35	274 128	198 238	75 890	
									17.68	1				
	Объем: 731*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			11 839.04				77%	152 643			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7 892.69				48%	95 154			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41 974.85					521 926			
	
37.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	2193	26.54			58 202.22					188 335			
				26.54			58 202.22		85.88			188 335		
	Объем: 731*3													
	
38.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	7.31	286.73	122.64	1.26	2 095.99	896.47	9.23	15.07	8.51	17 100	13 510	79	
				162.83			1 190.29		2.95	1		3 511		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			833.72				79%	10 673			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			573.74				51%	6 890			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 503.45					34 663			
	
39.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	913.75	7.04			6 432.80					20 824			
				7.04			6 432.80		22.79			20 824		
	Объем: 7.31*125													
	
40.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	1.6626	1 688.64	38.89	16.44	2 807.53	64.66	27.33	15.07	6.96	9 583	974	190	
				1 633.31	1.51		2 715.54	2.51	3.1	15.03		8 418	38	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			71.20				90%	911			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			36.27				43%	435			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 915.00					10 929			
	
41.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.8	4 972.00	72.11	75.20	8 949.59	129.79	135.36	15.07	7.12	40 436	1 956	964	
				4 824.69	5.48		8 684.44	9.86	4.32	15.05		37 517	148	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			150.82				92%	1 936			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			76.81				44%	926			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 177.22					43 297			
	
42.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	1.8	4 972.00	72.11	75.20	8 949.59	129.79	135.36	15.07	7.12	40 436	1 956	964	
				4 824.69	5.48		8 684.44	9.86	4.32	15.05		37 517	148	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			150.82				92%	1 936			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			76.81				44%	926			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 177.22					43 297			
	
43.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	137.2474	48.13	4.41	36.66	6 605.17	605.26	5 031.49	15.07	7.27	60 294	9 121	36 579	
									1	1				
	Объем: 40.542+109.65*0.7+176*0.015*1.8+1085.6*14/1000													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			605.26				100%	9 121			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			363.16				60%	5 473			
	
44.	ТССЦпг 03-01-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	137.2474	17.33		17.33	2 378.50		2 378.50	1	7.87	18 719		18 719	
									1	1				
	Раздел 2.  ФАСАД	
45.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	18.64	1 454.57	549.87	8.86	27 113.25	10 249.67	165.20	15.08	8.49	238 958	154 565	1 403	
				895.84			16 698.38		4.97	1		82 991		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			11 274.64				93%	143 745			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			6 969.78				54%	83 465			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45 357.66					466 169			
	
46.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.86	63.27	49.68	13.59	117.68	92.40	25.28	15.07	1.97	1 442	1 393	50	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			72.07				66%	919			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			46.20				40%	557			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.95					2 919			
	
47.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.86	4 688.98	197.81	4 246.36	8 721.50	367.93	7 898.23	15.08	3.66	36 054	5 548	28 908	
				244.81	143.10		455.35	266.17	3.51	14.12		1 598	3 758	
	Накладные расходы		78%			494.60				66%	6 142			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			317.05				40%	3 722			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 533.15					45 918			
	
48.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	16.21	188.95	188.95		3 062.88	3 062.88		15.07	1	46 158	46 158		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			3 032.25				84%	38 773			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 837.73				48%	22 156			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 932.86					107 087			
	
49.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.9	37.19	25.77		33.47	23.19		15.08	1	401	350		
				11.42			10.28		4.96	1		51		
	Накладные расходы		86%			19.94				73%	256			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			16.23				56%	196			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.65					853			
	
50.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.28	1 870.07	1 617.67	252.40	523.62	452.95	70.67	15.08	8.86	7 457	6 830	626	
					100.00			28.00	1	17.6			493	
	Объем: 5*0.8*7													
	Накладные расходы		99%			476.14				84%	6 151			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			288.57				48%	3 515			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 288.33					17 123			
	
51.	ТЕР 10-01-034-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.28	15 214.20	1 721.71	624.86	4 259.98	482.08	174.96	15.07	7.11	18 921	7 265	1 244	
				12 867.63	10.66		3 602.94	2.99	2.89	17.59		10 412	53	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			514.17				90%	6 586			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			261.94				43%	3 147			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 036.09					28 654			
	
52.	ТССЦ 203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	28	1 770.36			49 570.08					82 125			
				1 770.36			49 570.08		2 933.04			82 125		
	Объем: (0.28)*100													
	
53.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.063	5 825.86	220.54	20.63	367.03	13.89	1.30	15.07	8.52	850	209	11	
				5 584.70	0.65		351.84	0.04	1.79	17.48		630	1	
	Объем: 0.9*7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			14.77				90%	189			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.52				43%	90			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					389.32					1 129			
	
54.	ТССЦ 101-2906 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	6.3	60.66			382.16					1 364			
				60.66			382.16		216.45			1 364		
	
55.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.2688	6 181.26	1 849.25	114.03	1 661.52	497.08	30.65	15.07	9.8	11 533	7 491	300	
				4 217.99	32.69		1 133.80	8.79	3.3	15.45		3 742	136	
	Объем: (0.8+6*2)*0.3*7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			480.58				80%	6 102			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			237.76				37%	2 822			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 379.86					20 457			
	
56.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2688	1 379.50	319.58	16.34	370.81	85.90	4.39	15.08	8.5	2 253	1 295	37	
				1 043.57	0.20		280.51	0.05	3.28	17.46		920	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы		95%			81.65				80%	1 037			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			40.40				37%	480			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.86					3 769			
	
57.	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	15.073	40 613.99	3 949.94	5 786.76	612 174.70	59 537.44	87 223.87	15.08	5.44	2 158 871	897 825	474 498	
				30 877.29	307.74		465 413.39	4 638.53	1.69	15.07		786 549	69 903	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			60 967.17				80%	774 182			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			30 162.71				37%	358 059			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					703 304.58					3 291 113			
	
58.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	168.8176	671.40			113 344.14					614 233			
				671.40			113 344.14		3 638.44			614 233		
	Объем: (15.073)*11.2													
	
59.	ТЕР 46-03-007-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3	5.658	428.88	116.97	311.91	2 426.60	661.82	1 764.79	15.08	3.97	16 986	9 980	7 006	
					28.55			161.54	1	15.06			2 433	
	Объем: 0.8*0.4*26*0.41+2.1*2*0.41+0.8*0.8*2*0.41													
	Накладные расходы		99%			815.13				84%	10 427			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			494.02				48%	5 958			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 735.74					33 371			
	
60.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.112	1 734.68	1 482.28	252.40	194.28	166.02	28.27	15.08	8.86	2 754	2 504	250	
					100.00			11.20	1	17.6			197	
	Объем: 0.8*0.8*2+(57-26)*0.8*0.4													
	Накладные расходы		99%			175.45				84%	2 269			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			106.33				48%	1 296			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					476.06					6 319			
	
61.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.304	21 223.62	2 306.00	742.65	6 451.98	701.02	225.77	15.07	6.77	27 508	10 564	1 528	
				18 174.97	28.43		5 525.19	8.64	2.79	17.6		15 415	152	
	Объем: 25.6+4.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			752.24				90%	9 644			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			383.22				43%	4 608			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 587.44					41 760			
	
62.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	25.6	3 070.76			78 611.46					134 333			
				3 070.76			78 611.46		5 247.39			134 333		
	
63.	ТССЦ 203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	4.8	1 770.36			8 497.73					14 079			
				1 770.36			8 497.73		2 933.04			14 079		
	
64.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	3.51	2 956.30	374.76	6.66	10 376.61	1 315.41	23.38	15.07	8.64	44 066	19 823	202	
				2 574.88	1.03		9 037.83	3.62	2.66	17.66		24 041	64	
	Накладные расходы		83%			1 094.79				71%	14 120			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			857.37				52%	10 341			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 328.77					68 527			
	
65.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0945	1 143.95	891.55	252.40	108.10	84.25	23.85	15.08	8.86	1 482	1 271	211	
					100.00			9.45	1	17.6			166	
	Объем: 2.1*0.9*5													
	Накладные расходы		99%			92.76				84%	1 207			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.22				48%	690			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					257.08					3 379			
	
66.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	9.45	91.08	29.04	27.29	860.66	274.40	257.87	15.08	7.61	7 411	4 138	1 962	
				34.75			328.39		3.99	1		1 310		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			222.26				69%	2 855			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			197.57				58%	2 400			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 280.49					12 666			
	
67.	С Цена поставщик. 
Блок дверной металлический, м2	9.45	1 106.38			10 455.32					44 226			
				1 106.38			10 455.32		4.23			44 226		
	Поправки: М: =4500*1.04/4.23	
	
68.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.35	1 679.51	942.47	24.65	587.83	329.86	8.63	15.08	8.63	6 176	4 974	74	
				712.39	3.75		249.34	1.31	4.52	17.58		1 127	23	
	Накладные расходы		76%			251.69				65%	3 248			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			198.70				48%	2 399			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 038.22					11 823			
	
69.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.035	19 716.98	3 507.27	113.70	690.09	122.75	3.98	15.07	6.28	3 982	1 850	25	
				16 096.01	15.10		563.36	0.53	3.74	15.06		2 107	8	
	Накладные расходы		86%			106.02				73%	1 356			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			86.30				56%	1 040			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					882.41					6 379			
	
70.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.52	80.30	76.91	1.68	41.75	39.99	0.87	15.07	8.57	612	603	7	
				1.71	0.16		0.89	0.08	2.43	17.46		2	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			38.07				80%	483			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.83				37%	223			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.65					1 319			
	
71.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	6.76	15.82			106.94					349			
				15.82			106.94		51.69			349		
	Объем: (0.52)*0.013*1000													
	
72.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.52	1 043.83	675.65	13.36	542.79	351.34	6.95	15.07	8.45	6 392	5 295	59	
				354.82			184.51		5.63	1		1 039		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			277.56				67%	3 548			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			175.67				40%	2 118			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					996.02					12 058			
	
73.	ТССЦ 101-2615 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная, м2	57.2	6.42			367.22					1 923			
				6.42			367.22		33.62			1 923		
	Объем: 0.52*110													
	
74.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.52	2 074.12	832.23	83.91	1 078.54	432.76	43.63	15.07	9.43	9 047	6 522	411	
				1 157.98	39.06		602.15	20.31	3.51	13.35		2 114	271	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			430.42				80%	5 434			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			212.94				37%	2 513			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 721.90					16 995			
	
75.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.52	2 512.50	159.37	15.75	1 306.50	82.87	8.19	15.07	8.4	5 122	1 249	69	
				2 337.38			1 215.44		3.13	1		3 804		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			78.73				80%	999			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			38.95				37%	462			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 424.18					6 583			
	
76.	ТЕРр 57-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.07	2 526.51	1 124.28	139.64	176.86	78.70	9.77	15.07	4.6	1 672	1 186	45	
				1 262.59	15.51		88.38	1.09	4.99	15.06		441	16	
	Накладные расходы		80%			63.83				68%	817			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			54.26				54%	649			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.95					3 138			
	
77.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	10.853	303.52	75.11	228.41	3 294.10	815.17	2 478.93	15.07	3.97	22 126	12 285	9 841	
					20.91			226.94	1	15.06			3 418	
	Объем: (90.33+9.1+9.1)*1*0.1													
	Накладные расходы		99%			1 031.69				84%	13 191			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			625.27				48%	7 537			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 951.05					42 854			
	
78.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.21706	1 466.39	1 466.39		318.29	318.29		15.07	1	4 797	4 797		
									1	1				
	Объем: (90.33+9.1+9.1)*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			229.17				61%	2 926			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			120.95				31%	1 487			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					668.41					9 210			
	
79.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей перед нанесением гидроизоляции здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.32559	1 909.51	835.02	150.35	621.72	271.87	48.95	15.07	10.89	5 747	4 097	533	
				924.14	86.58		300.89	28.19	3.71	13.84		1 116	390	
	Объем: (90.33+9.1+9.1)*1*0.3													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0179:[ М-(0.77=10947.00*0.00007) ];  ТССЦ 101-0874:[ М-(87.48=31.58*2.77) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(8.50=1416.70*0.006) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			285.06				80%	3 590			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			141.03				37%	1 660			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.81					10 997			
	
80.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.32559	3 001.78	246.00	111.59	977.35	80.09	36.33	15.08	4.08	4 137	1 208	148	
				2 644.20			860.93		3.23	1		2 781		
	Объем: (90.33+9.1+9.1)*1*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			88.10				93%	1 123			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			54.46				54%	652			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 119.91					5 913			
	
81.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	10.853	452.40	40.32	76.78	4 909.94	437.58	833.24	15.08	4.23	26 099	6 599	3 525	
				335.31	7.73		3 639.12	83.84	4.39	15.07		15 976	1 263	
	Объем: (90.33+9.1+9.1)*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			578.78				94%	7 390			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			333.71				51%	4 010			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 822.43					37 499			
	
82.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	10.853	203.51	35.93	41.45	2 208.65	389.90	449.86	15.08	4.37	14 266	5 880	1 966	
				126.13	4.21		1 368.89	45.72	4.69	15.07		6 420	689	
	Объем: (90.33+9.1+9.1)*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			483.54				94%	6 175			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			278.80				51%	3 350			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 970.99					23 791			
	
83.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	10.853	730.22	37.46	0.38	7 925.08	406.50	4.07	15.07	5.6	39 213	6 126	23	
				692.39			7 514.51		4.4	1		33 064		
	Объем: (90.33+9.1+9.1)*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			451.22				94%	5 758			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			260.16				51%	3 124			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 636.46					48 096			
	
84.	ТЕРр 53-25-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек	0.051675	18 417.15	1 519.46	77.09	951.71	78.52	3.98	15.08	5.62	5 709	1 184	22	
				16 820.60	5.28		869.20	0.27	5.18	15.07		4 502	4	
	Объем: 6.89/1000*1.5*5													
	Накладные расходы		86%			67.76				73%	867			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			55.15				56%	665			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 074.62					7 242			
	
85.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	68.3273	48.13	4.41	36.66	3 288.31	301.32	2 504.88	15.07	7.27	30 017	4 541	18 210	
									1	1				
	Объем: 1.769+1621*0.015*1.8+10.853*2.1													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			301.32				100%	4 541			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			180.79				60%	2 725			
	
86.	ТССЦпг 03-01-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	68.3273	17.33		17.33	1 184.11		1 184.11	1	7.87	9 319		9 319	
									1	1				
	Раздел 3.  ПОДВАЛ	
87.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	18.8	188.95	188.95		3 552.26	3 552.26		15.07	1	53 533	53 533		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			3 516.74				84%	44 968			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 131.36				48%	25 696			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 200.35					124 197			
	
88.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	25.19	57.10	31.22		1 438.35	786.43		15.07	1	14 472	11 852		
				25.88			651.92		4.02	1		2 621		
	Накладные расходы		80%			629.14				68%	8 059			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			393.22				40%	4 741			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 460.71					27 272			
	
89.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	60	11.25	11.25		674.82	674.82		15.06	1	10 163	10 163		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			546.60				69%	7 012			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			404.89				48%	4 878			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 626.32					22 054			
	
90.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	374.88	82.80	15.62	224.93	49.68	9.37	15.08	2.66	1 244	749	25	
				276.46	0.17		165.88	0.10	2.83	15.36		469	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			40.32				69%	518			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.87				48%	360			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					295.12					2 123			
	
91.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	634.96	50.89	10.37	380.98	30.54	6.22	15.07	3.19	1 279	460	20	
				573.70	0.17		344.22	0.10	2.32	15.36		799	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			24.82				69%	319			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			18.38				48%	222			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					424.18					1 820			
	
92.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	16.13	2 203.33	1 002.02	180.42	35 539.68	16 162.55	2 910.17	15.07	10.89	336 354	243 570	31 692	
				1 020.89	103.89		16 466.96	1 675.75	3.71	13.84		61 092	23 192	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			16 946.39				80%	213 410			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8 384.00				37%	98 702			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60 870.07					648 466			
	
93.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Штукатурка поверхностей внутри здания Гидротексом по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.672	1 270.68	1 002.02	180.42	3 395.25	2 677.39	482.08	15.07	10.89	46 473	40 348	5 250	
				88.24	103.89		235.78	277.59	3.71	13.84		875	3 842	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0083:[ М-(924.15=612.02*1.51) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(8.50=1416.70*0.006) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			2 807.23				80%	35 352			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 388.84				37%	16 350			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 591.32					98 175			
	
94.	С Цена поставщик. 
Гидротекс -Р, кг	534.4	9.34			4 993.72					21 123			
				9.34			4 993.72		4.23			21 123		
	Объем: 2*267.2													
	Поправки: М: =37.29*1.06/4.23	
	
95.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.25	6 374.88	3 642.90	37.83	1 593.72	910.73	9.46	15.08	8.86	16 182	13 734	84	
				2 694.15	14.99		673.54	3.75	3.51	17.6		2 364	66	
	Накладные расходы		79%			722.44				67%	9 246			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			457.24				40%	5 520			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 773.40					30 948			
	
96.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	25.19	189.33	101.80	2.94	4 769.11	2 564.29	74.00	15.07	8.55	47 864	38 644	633	
				84.59	0.16		2 130.82	4.09	4.03	17.46		8 587	71	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 439.96				80%	30 972			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 207.14				37%	14 325			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 416.21					93 161			
	
97.	ТЕРр 57-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	1.7	2 526.51	1 124.28	139.64	4 295.07	1 911.28	237.39	15.07	4.6	40 605	28 803	1 092	
				1 262.59	15.51		2 146.40	26.37	4.99	15.06		10 711	397	
	Накладные расходы		80%			1 550.12				68%	19 856			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 317.60				54%	15 768			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 162.79					76 229			
	
98.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	6.39	4 044.31	762.19	548.76	25 843.13	4 870.38	3 506.58	15.08	3.92	182 731	73 445	13 746	
				2 733.36	7.56		17 466.17	48.31	5.47	17.59		95 540	850	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			5 459.75				94%	69 837			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3 147.96				51%	37 890			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 450.84					290 459			
	
99.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	6.39	1 809.82	459.64	70.56	11 564.73	2 937.08	450.88	15.08	8.47	88 503	44 291	3 819	
				1 279.62	24.62		8 176.77	157.29	4.94	17.6		40 393	2 768	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			3 434.75				94%	44 235			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 980.40				51%	24 000			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 979.88					156 739			
	
100.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	6.39	1 340.07	23.29	49.74	8 563.08	148.85	317.84	15.06	8.3	44 957	2 242	2 638	
				1 267.04	16.26		8 096.39	103.90	4.95	17.62		40 077	1 831	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*4, Н4= 1.25*1.2*4, Н5= 1.15*1.2*4, Н48= 4	
	Накладные расходы		111%			280.55				94%	3 829			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			161.76				51%	2 077			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 005.39					50 863			
	
101.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.438354	224.69	163.97	60.72	98.49	71.88	26.62	15.07	7.5	1 283	1 083	200	
					3.63			1.59	5.31	15.03			24	
	Объем: 0.0343/1000*20*639													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			69.80				80%	886			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			40.41				44%	487			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					208.70					2 656			
	
102.	ТССЦ 101-6040 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, м2	639	14.91			9 527.49					38 947			
				14.91			9 527.49		60.95			38 947		
	
103.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, "сапожки", 1 м3 подстилающего слоя	1.5	737.79	44.95	0.45	1 106.68	67.42	0.68	15.07	5.6	5 590	1 016	4	
				692.39			1 038.59		4.4	1		4 570		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			74.84				94%	955			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			43.15				51%	518			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 224.67					7 063			
	
104.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.35	1 679.51	942.47	24.65	587.83	329.86	8.63	15.08	8.63	6 176	4 974	74	
				712.39	3.75		249.34	1.31	4.52	17.58		1 127	23	
	Накладные расходы		76%			251.69				65%	3 248			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			198.70				48%	2 399			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 038.22					11 823			
	
105.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	55.301	48.13	4.41	36.66	2 661.42	243.88	2 027.33	15.07	7.27	24 294	3 675	14 739	
									1	1				
	Объем: 4.541+1880*0.015*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			243.88				100%	3 675			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			146.33				60%	2 205			
	
106.	ТССЦпг 03-01-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	55.301	17.33		17.33	958.37		958.37	1	7.87	7 542		7 542	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 526 591.09	170 389.26	143 397.23			7 015 154	2 568 704	839 514	
			1 210 963.99	8 676.80				3 579 193	129 156	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 508 654.55	168 964.40	129 054.68			6 857 558	2 547 229	732 444	
			1 210 635.60	8 676.80				3 577 883	129 156	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	412 840.00					1 467 135			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 20, 23, 48, 50, 59, 60, 65, 77, 87; %=71 - по стр. 2-7, 24, 27-31, 64; %=79 - по стр. 8, 34, 38; %=92 - по стр. 10, 25, 26, 33, 41, 42; %=77 - по стр. 12, 36; %=90 - по стр. 14, 40, 51, 53, 61; %=66 - по стр. 16, 18, 46, 47; %=67 - по стр. 21, 72, 95; %=80 - по стр. 22, 55-57, 70, 74, 75, 79, 92, 93, 96, 101; %=73 - по стр. 32, 49, 69, 84; %=93 - по стр. 45, 80; %=65 - по стр. 68, 104; %=68 - по стр. 76, 88, 97; %=61 - по стр. 78; %=94 - по стр. 81-83, 98-100, 103; %=69 - по стр. 89-91)	168 982.81					2 154 738			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12, 20, 23, 36, 48, 50, 59, 60, 65, 68, 77, 87, 89-91, 104; %=52 - по стр. 2-7, 24, 27-31, 64; %=51 - по стр. 8, 34, 38, 81-83, 98-100, 103; %=44 - по стр. 10, 25, 26, 33, 41, 42, 101; %=43 - по стр. 14, 40, 51, 53, 61; %=50 - по стр. 16, 18; %=40 - по стр. 21, 46, 47, 72, 88, 95; %=37 - по стр. 22, 55-57, 70, 74, 75, 79, 92, 93, 96; %=56 - по стр. 32, 49, 69, 84; %=54 - по стр. 45, 76, 80, 97; %=31 - по стр. 78)	95 941.83					1 147 298			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 773 579.19					10 159 594			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	860.66	274.40	257.87			7 411	4 138	1 962	
			328.39					1 310		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 66)	222.26					2 855			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 66)	197.57					2 400			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 280.49					12 666			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	17 075.88	1 150.46	14 084.68			150 185	17 337	105 108	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43, 85, 105)	1 150.46					17 337			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43, 85, 105)	690.28					10 403			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	17 075.88					150 185			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 791 935.56					10 322 445			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	38 347.42					220 900			
	ИТОГО	1 830 282.98					10 543 345			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	36 605.66					210 867			
	ИТОГО	1 866 888.64					10 754 212			
	НДС 18%	336 039.96					1 935 758			
	ВСЕГО С НДС	2 202 928.60					12 689 970			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)